6/2020-1053(1) 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть)

Дело № А04-4345/2019

г. Благовещенск

14 января 2020 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего, 

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «М-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к администрации Благовещенского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 1 084 120 руб. 73 коп.,  

и встречное исковое заявление администрации Благовещенского района (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «М- Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении муниципального  контракта и взыскании 760 393 руб. 11 коп.,  

третьи лица: государственное казенное учреждение управление автомобильных дорог  Амурской области «Амурупрадор», министерство транспорта и дорожного хозяйства  Амурской области,  

руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 167-169  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 

подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел»  (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

по первоначальному иску: 

взыскать с администрации Благовещенского района (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность за выполненные работы в размере 683  148 руб. 87 коп., пени за период с 22.01.2019 по 14.01.2020 в размере 50 951 руб. 46 коп.  (всего – 734 099 руб. 46 коп.).  

В части взыскания штрафа и процентов за пользование чужими денежными  средствами производство по делу прекратить.  

По встречному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации Благовещенского района  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени за несвоевременное выполнение работ  период с 01.10.2018 по 13.01.2020 в размере 99 091 руб. 66 коп., штраф за ненадлежащее  качество выполненных работ в размере 149 000 руб. (всего – 248 091 руб. 66 коп.).  

Расторгнуть муниципальный контракт № Ф.2018.269784 «На выполнение работ по  ремонту дорог в с. Волково с. Ровное» от 20.06.2018, заключенный между администрацией  Благовещенского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с  ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 13 962 руб.  

В результате произведенного зачета: 

взыскать с администрации Благовещенского района (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму в размере 486 007 руб. 80 коп.  

Расторгнуть муниципальный контракт № Ф.2018.269784 «На выполнение работ по  ремонту дорог в с. Волково с. Ровное» от 20.06.2018, заключенный между администрацией  Благовещенского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с  ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 13 962 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья А.Г. Осадчий 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.06.2019 0:26:22

Кому выдана Осадчий Александр Геннадьевич