Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-96213/24

30 января 2026 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2026 года Полный текст решения изготовлен 30 января 2026 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к АО "МОСОБЛГАЗ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к совершению действий: предоставить акт о результатах реализации договора и исполнительно-техническую документацию,

по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Мособлгаз» к Обществу с ограниченной ответственностью «Воздвижение» о понуждении к заключению дополнительных соглашений к договору,

третье лицо: Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии в заседании:

Истец: представитель истца по первоначальному иску (представитель ответчика по встречному иску) - ФИО1, представлено удостоверение адвоката № 14648 от 07.12.2015, рег. № 77/12683; представлена доверенность № б/н (дата ее совершения 18.02.2025, срок действия – 3 года): действующий в интересах ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ".

Ответчик: представитель ответчика по первоначальному иску (представитель истца по встречному иску) - ФИО2, личность установлена по паспорту Российской Федерации; представлена доверенность № 12-07/1481 (дата ее совершения 10.11.2025, срок действия по 01.12.2026): действующий в интересах АО «Мособлгаз»; представлен диплом о высшем юридическом образовании (рег. № 7905/2011 от 14.10.2011).

Третье лицо: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Воздвижение» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АО «Мособлгаз» о понуждении предоставить акт о результатах реализации Договора о реконструкции (переносе) объектов газового хозяйства от 11.02.2020 № 01/1534-20 в порядке, установленном условиями Договора, а также передать исполнительно-техническую документацию на перенесенный газопровод.

АО «Мособлгаз» предъявлено встречное исковое заявление к ООО «Воздвижение» о понуждении заключить Дополнительные соглашения № 1/269-5523-2025 и № 1 к Договору о

реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства от 11.02.2020 № 01/1534-20 в редакции с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Истец по первоначальному иску направил в судебное заседание своего представителя, который поддержал требования первоначального иска, возражал против удовлетворения встречного иска.

Ответчик по первоначальному иску направил в судебное заседание своего представителя, который возражал против удовлетворения первоначального иска, поддержал встречное исковое заявление.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в суд не явилось. В материалы дела представлен отзыв на исковое заявление, из которого следует, что в соответствии с п. 5.4.32 Государственного контракта от 16.12.2021 № 0148200005421000723 заключенного между ГКУ МО «ДЗКС» и ООО «Воздвижение» Подрядчик обязан нести затраты по инженерному обеспечению объекта до сдачи результатов работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным проведение судебного заседания в отсутствие третьего лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд, с учетом изложенных Истцом по первоначальному иску, Ответчиком по первоначальному иску и третьим лицом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела доказательствами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между АО «Мособлгаз» (собственник) и ООО «Воздвижение» (заказчик) (до перемены лица в обязательстве МБУ «Развитие») заключен Договор от 11.02.2020 № 01/1534-20 о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства.

В соответствии с п.1.1 Договора, Заказчик (Истец по первоначальному иску) обязуется компенсировать Собственнику (Ответчик по первоначальному иску) убытки и затраты, вызванные реконструкцией (переносом):

- газовой распределительной сети высокого давления от ГРС г. Хотьково, протяженностью 57 334 м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Пушкинский муниципальный район, кадастровый номер 50:05:0000000:77539, являющейся собственностью АО «Мособлгаз», в части газопровода высокого давления 2 категории, протяженность 1366,34 м., инв. бух. № 01-007455(С00020526), по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, мкр-н Семхоз, Советская площадь, ул. Школьная, ул. Чернышевского, ул. Кирова,

- газораспределительная сеть г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз протяженностью 58 443 м., по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, кадастровый номер 50:05:0000000:3411, являющейся собственностью АО «Мособлгаз», в части газопровода низкого давления, протяженность 4949,83 м., инв. бух. № 01-007455 (С00020526) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.п. Сергиев Посад, г.Сергиев Посад, мкр- н Семхоз, Советская площадь, ул. Школьная, ул. Чернышевского, ул. Кирова, с территории строительства здания «Физико-математического лицея на 550 мест» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Хотьковская, уч-к 250 и 251 (далее - Сооружение), путем оплаты суммы стоимости, обусловленной Договором, а Собственник обязуется за счет средств Заказчика в соответствии с условиями Договора и в сроки, предусмотренные Договором, организовать реализацию проекта реконструкции (переноса) Сооружения.

Целью планируемой реконструкции (переноса) является освобождение земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040310:289 по адресу: Московская область, Сергиево- Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, мкр. Семхоз, ул. Хотьковская, д.33б, категория земель –земли населенных пунктов с разрешением использования дошкольного, начального и среднего образования.

Реконструкция (перенос) Сооружения не является новым строительством и не влечет за собой создание нового объекта недвижимости.

В результате реконструкции (переноса) изменяется протяженность Сооружения и его охранная зона (конфигурация). Реконструкция (перенос) Сооружения не влечет за собой перехода права собственности на него.

Согласно п.1.2 Договора, реализация мероприятий по реконструкции (переноса) сооружения включает в себя:

- выполнение проектно-изыскательских работ; -разработку проектной документации; - демонтаж (полностью или частично) существующей части Сооружения:

Газопровода высокого давления 2 категории, протяженностью 1366,34 м., инв. бух. № 01-007455 (С00020526), по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, мкр-н Семхоз, Советская площадь, ул. Школьная, ул. Чернышевского, ул. Кирова;

Газопровода низкого давления, протяженностью 4949,83 м, инв. бух. № 01-007455 (С00020526) по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный раон, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, мкрн-н Семхоз, Советская площадь, ул. Школьная, ул. Чернышевского, ул. Кирова;

- строительство части Сооружения взамен демонтированной;

- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для реконструкции (переноса) Сооружения;

- строительный контроль;

- подготовку технического плана для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН) изменений в сведения об основных характеристиках сооружений;

- подготовку материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (переносимого) сооружения, и внесения соответствующих сведений в ЕГРН;

- компенсацию Собственнику затрат, связанных с уплатой последним налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения реконструкции (переноса) сооружения, в размере 20 % от стоимости выполненных работ;

- работы по подключению реконструированного (перенесенного) Сооружения к газораспределительной сети Московской области после оформления Заказчиком договора о

выполнении врезки (фактического технологического присоединения) и перечисления платы по нему;

- оплата государственной пошлины за внесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции (переноса).

Реконструируемое (переносимое) Сооружение, созданное в процессе реализации Договора, является неотъемлемой частью газораспределительной системы Московской области и по окончании строительно-монтажных работ остается в собственности АО «Мособлгаз» (п.2.1 Договора).

В силу п.3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Согласно п.4.1 Договора, ориентировочная стоимость работ по Договору складывается из стоимости проектно-изыскательских работ, затрат на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для реконструкции (переноса) Сооружения, затрат на оплату стоимости аренды (субаренды) либо компенсации за установление сервитута, строительно-монтажных работ, расходов на подготовку технического плана на реконструированное (перенесенное) Сооружение, расходов на подготовку материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (перенесенного) объекта газового хозяйства и внесения соответствующих сведений в ЕГРН (каталог координат и текстового (при необходимости) и графического описания).

Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 974 428,43 руб., в том числе НДС 20 % -162 404, 74 руб. (п.4.2 Договора).

Как следует из п. 4.5 Договора стоимость строительно-монтажных работ, размер платы за право пользования земельным участком, размер компенсации за установление сервитута, расходов на подготовку технического плана определяются Сторонами путем подписания, соответствующего (-их) дополнительного (-ых) соглашения (-й) к настоящему Договору.

Согласно п. 4.6 Договора стоимость работ по подготовке материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (переносимого) Сооружения и внесения соответствующих сведений в ЕГРН (каталога координат и текстового (при необходимости) и графического описания) определяется на основании расчета стоимости и компенсируется «Заказчиком» «Собственнику» после выполнения проектных работ на основании подписанного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В соответствии с п. 4.7. Договора, компенсация Собственнику затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) Сооружения, составляет 20 % от стоимости результата выполненных работ по реконструкции (переносу).

Размер компенсации таких затрат и порядок их оплаты Стороны согласовывают путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Как следует из содержания п.5.1 Договора стоимость строительно-монтажных работ, сумма платы за право пользования земельным участком, а также иные расходы, предусмотренные Договором, компенсируются в порядке и в сроки, установленные соответствующим дополнительным соглашением, если условиями Договора не определены порядок и сроки такой компенсации.

Сторонами в соответствии с условиями Договора было подписано Дополнительное соглашение № 01/1 016-5523-2022-СМР устанавливающее стоимость строительно-монтажных работ – 5 764 122,41 руб., с учетом НДС 20%.

Согласно п. 5.2. Договора, в случае изменения стоимости строительно-монтажных работ или изменения размера иных расходов, предусмотренных настоящим Договором, расчет между Сторонами производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания

соответствующего дополнительного соглашения на основании выставленного Собственником счета.

В соответствии с п. 5.3. Договора, компенсация затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) Сооружения, в размере 20 % от стоимости результата выполненных работ по реконструкции (переноса) осуществляется Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Собственника.

В соответствии с п. 6.1.7 Собственник обязался оформить и подписать акт о результатах реализации Договора, указанный в разделе 7 Договора.

Заказчик в силу п.6.3.4 Договора, обязался по итогам реализации Договора подписать акт о результатах реализации Договора, указанный в разделе 7 Договора.

Согласно п.7.1 Договора, выполнение обязательств по Договору оформляется актом о результатах реализации Договора.

По окончании реализации мероприятий по реконструкции (переносу) Сооружения Собственник в течение 10 календарных дней представляет Заказчику для подписания акт о результатах реализации Договора в 3 (трех) экземплярах (п. 7.2 Договора).

Таким образом по условиям указанного Договора, Истец по первоначальному иску обязался компенсировать Ответчику по первоначальному иску все убытки и затраты, вызванные реконструкцией (переносом) Сооружения, подписать соответствующие дополнительные соглашения, а по результатам реализации всех мероприятий, установленных п.1.2 Договора подписать акт о результат реализации Договора.

Как указывает Истец по первоначальному иску ООО «Воздвижение», письмами от 15.01.2024 № 24-24, от 13.02.2024 № 173-24 и от 15.03.2024 № 327-24 обращался в адрес АО «Мособлгаз» с требованием о передаче исполнительно-технической документации по объекту реконструкции (переноса) и акта о результатах реализации Договора.

Однако Ответчик по первоначальному иску исполнительно-техническую документацию на реконструируемые газопроводы и акт о результатах реализации Договора не предоставил, что послужило основанием для обращения в суд с исковыми требованиями.

В обосновании первоначальных исковых требований Истец ссылается на положения заключенного между сторонами Договора о реконструкции (переносе) объектов газового хозяйства, в соответствии с которым по окончании реализации мероприятий Собственник представляет Заказчику для подписания акт о результатах реализации Договора (п. 7.2), положения ст. 726 Гражданского кодекса РФ, ч.11.1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, п.3.5, 3.6 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84), п.8.2.1 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр), об обязанности подрядчика после окончания строительства передать заказчику исполнительную документацию.

Сторонами не оспаривается, что строительно-монтажные работы осуществлены, распределительный газопровод высокого давления от ГРС г. Хотьково с к.н. 50:05:0000000:77539, в части газопровода высокого давления протяженностью 1366,34 м. и газораспределительная сеть с к.н. 50:05:0000000:3411, в части газопровода низкого давления протяженностью 4949,83 м. переложены, произведено их переподключение.

Возражая против удовлетворения первоначального иска Ответчиком указано, что, заключая Договор о реконструкции (переносе) объектов газового хозяйства Общество исходило из возможности компенсации всех возможных затрат собственника имущества, включающих в себя не только расходы связанные с проведением работ по переносу газопроводов, а так же компенсацию стоимости подготовки технического плана для внесения в ЕГРН изменений в сведения об основных характеристиках Сооружения, стоимости подготовки материалов и

сведений, необходимых для изменения границ охранных зон Сооружения и внесения соответствующих сведений в ЕГРН, оплата госпошлины за внесение изменений в ЕГРН, компенсации затрат связанных с налоговыми отчислениями, которое Общество обязано произвести в соответствии с действующим законодательством.

По указанному Договору реализована только часть мероприятий, несмотря на то, что строительно-монтажные работы завершены, мероприятия, предусмотренные условиями п. 1.2 Договора Сторонами в полном объеме не реализованы, а именно: - не выполнена подготовка технического плана для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее- ЕГРН) изменений в сведения об основных характеристиках сооружений; подготовка материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (переносимого) сооружения, и внесения соответствующих сведений в ЕГРН; не получена компенсация Собственником затрат, связанных с уплатой последним налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения реконструкции (переноса) сооружения, в размере 20 % от стоимости выполненных работ; не оплачена государственная пошлина за внесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции (переноса).

В соответствии с условиями Договора (п.1.1 Договора) Собственник (Ответчик по первоначальному иску) обязуется за счет средств Заказчика (Истца по первоначальному иску) в соответствии с условиями Договора и в сроки, предусмотренные Договором, организовать реализацию проекта реконструкции (переноса) Сооружения.

Из указанного условия Договора следует, что мероприятия (работы) определенные условиями Договора выполняются после их оплаты Заказчиком.

При этом в полном объеме указанные мероприятий по Договору не реализованы в связи с тем, что Заказчиком не компенсирована Собственнику стоимость подготовки технического плана для внесения в ЕГРН изменений в сведения об основных характеристиках сооружений, также мероприятий по изменению границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (переносимого) сооружения, и внесения соответствующих сведений в ЕГРН; - не компенсированы затраты, связанных с уплатой Собственником налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения реконструкции (переноса) сооружения, в размере 20 % от стоимости выполненных работ; - не компенсирован размер государственной пошлины за внесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции (переноса).

В рамках исполнения условий Договора в адрес первоначального Истца 26.02.2025 Ответчиком были направлены на официальный электронный почтовый ящик ООО «Воздвижение» - info@vzdv.ru и почтой России 12.03.2025 два Дополнительных соглашения о размере компенсации предусмотренной Договором от 11.02.2020 № 01/1534-20, а именно Дополнительное соглашение № 1/269-5523-2025 (компенсация затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) сооружения), также содержащего стоимость подготовки технического плана и Дополнительное соглашение № 1 (размер компенсации затрат, связанных с уплатой государственной пошлины за внесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции), которые были получены Истцом по первоначальному иску 15.04.2025, что подтверждается почтовым трек номером 14102005570885.

30.04.2025 в адрес Ответчика по первоначальному иску от Истца по первоначальному иску поступил запрос № 402-25 от 17.04.2025, относительно разъяснений несения АО «Мособлгаз» затрат, компенсация которых предусматривают Дополнительные соглашения.

В ответ на запрос Ответчик по первоначальному иску по электронной почте 13.05.2025 и по почте России 28.05.2025 (трек номер отправления 14102008529644) направил в адрес Истца по первоначальному иску подписанное со стороны Ответчика скорректированное Дополнительное соглашение с расчетом компенсации затрат и сводным расчетом стоимости мероприятий по реконструкции (переносу).

До настоящего времени указанные Дополнительные соглашения со стороны Истца по первоначальному иску не подписаны, что явилось основанием для предъявления встречных исковых требований.

Отказ Истца по первоначальному иску от подписания дополнительных соглашений, определяющих размер и порядок компенсации Ответчику по первоначальному иску, означает, что Договор сторонами в полном объеме не исполнен. Не урегулирован вопрос компенсации ключевых положений, предусмотренных п. 1.2 Договора (налоги, госпошлина, подготовка документов и внесение изменений в ЕГРН).

Относительно требований о передаче исполнительно-технической документации Ответчик по первоначальному иску указал, что условиями Договор не предусмотрена обязанность Собственника перекладываемого газопровода по передачи Заказчику исполнительно-технической документацию на газопровод, находящийся в собственности и эксплуатации АО «Мособлгаз», что также подтверждается условиям п.2.1 Договора, из которого следует, что реконструируемое Сооружение по окончании строительно-монтажных работ остается в собственности АО «Мособлгаз».

Кроме того, согласно п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должны в том числе хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).

Указанные Истцом по первоначальному иску положения п.3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87, п.8.2.1 СП 48.13330.2019 не подлежат применению в данном споре и не меняют существа правоотношений сторон, вытекающих из Договора.

Кроме того, СНиП 3.01.04-87, утратил силу с 28.01.2018 в связи с изданием Приказа Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр, утвердившего новый Свод правил СП 68.13330.2017. Подраздел 8.21 СП 48.13330.2019 исключен с 29.04.2022 (Изменение № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 N 207/пр.) из СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

Истец по первоначальному иску возражая относительно требований по встречному исковому заявлению, указал, что АО «Мособлгаз» не представлено каких-либо доказательств увеличения налоговой нагрузки, которая могла бы быть компенсирована Заказчиком в пределах 20% от стоимости результата выполненных работ по реконструкции (переносу) газового хозяйства, оснований к выплате компенсаций не имеется, равно как не имеется и оснований к заключению Дополнительных соглашений, поскольку полагает, что это дополнительное обогащение АО «Мособлгаз» сверх оплаченных работ, в том числе, с учетом предусмотренных законом налогов.

Проанализировав условия Договора о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства, судом установлено, что сложившиеся между сторонами отношения, регулируются положениями статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 52.2 ГрК РФ положения настоящей статьи применяются при реконструкции, капитальном ремонте существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением объектов электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, а также существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения, критерии определения и

(или) виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации), их частей (далее в настоящей статье - существующие линейные объекты), в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов, домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, если предусмотрено изменение местоположения существующих линейных объектов.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств целью реконструкции (переноса) газопроводов являлось освобождение земельного участка с кадастровым номером 50:05:0040310:289, для дальнейшего его использования при строительстве объекта капитального строительства «Сергиево-Посадский физико-математический лице».

В соответствии с ч. 10 ст. 52.2 ГрК РФ реконструкция, капитальный ремонт существующего линейного объекта, а также при необходимости архитектурно-строительное проектирование в целях таких реконструкции, капитального ремонта осуществляется в соответствии с договором, заключаемым правообладателем существующего линейного объекта с застройщиком или техническим заказчиком с учетом требований настоящей статьи.

Согласно ч.12 ст. 52.2 ГрК РФ в договор включаются: 1) сведения о местоположении объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи; 2) сведения о существующих линейных объектах (наименование, местоположение, кадастровый номер (при наличии), реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществить; 3) обязательство сторон при необходимости обеспечить подготовку документации по планировке территории или внесение в нее изменений, архитектурно-строительное проектирование в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в соответствии с техническими требованиями и условиями; 4) обязательство сторон по выполнению работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов, предусмотренных техническими требованиями и условиями, предельный срок выполнения таких работ; 5) обязательство застройщика, технического заказчика возместить правообладателям существующих линейных объектов затраты в связи с их реконструкцией, капитальным ремонтом; 6) форма и сроки возмещения застройщиком, техническим заказчиком затрат, возникших в связи с такими реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, их правообладателям; 7) обязательства сторон по урегулированию отношений с владельцами объектов, подключенных (технологически присоединенных) в установленном порядке к существующим линейным объектам, реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществить, в связи с невозможностью эксплуатации таких существующих линейных объектов во время их реконструкции, капитального ремонта; 8) обязательства сторон по обеспечению оформления правоустанавливающих документов на земельные участки в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов, а также на указанные линейные объекты после завершения их реконструкции, капитального ремонта (при необходимости); 9) обязательства сторон по установлению, изменению, прекращению зон с особыми условиями территорий в соответствии с земельным законодательством (при необходимости); 10) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

В силу ч.13 ст. 52.2 ГрК РФ предусмотренное пунктом 6 части 12 настоящей статьи возмещение осуществляется в денежной и (или) в натуральной формах. Порядок определения формы возмещения устанавливается Правительством Российской Федерации. В случае возмещения в денежной форме выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов обеспечивается правообладателями таких объектов. В случае возмещения в натуральной форме выполнение указанных работ обеспечивается застройщиками, техническими заказчиками.

Согласно ч.16 ст. 52.2 ГрК РФ перечень видов затрат, которые возникают в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов и которые

включаются в сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1420-р утвержден Перечень видов затрат, подлежащих компенсации в связи с реконструкцией линейных объектов в соответствии со ст. 52.2 ГрК РФ. Пунктами 4, 11 и 19 указанного Перечня прямо предусмотрены затраты на выполнение работ, проводимых в целях установления, изменения, прекращения существования в соответствии с земельным законодательством зон с особыми условиями использования территорий в связи с реконструкцией существующих линейных объектов; затраты на выполнение работ по оформлению правоустанавливающих документов на существующие линейные объекты после завершения их реконструкции, в том числе по подготовке технического плана существующего линейного объекта, внесению изменений в Единый государственный реестр недвижимости; затраты правообладателя существующих линейных объектов на уплату налогов и иных обязательных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, связанных с проведением реконструкции существующих линейных объектов и (или) получением возмещения затрат в связи с реконструкцией существующих линейных объектов.

В соответствии с п. 14.1 ст. 1 ГрК РФ реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Согласно ч. 1 ст. 247 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой.

Доходы в силу ст. 248 НК РФ в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на доходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные доходы.

Согласно подп. 11.2 п. 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Данная норма подлежит применению только в отношении полученных результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств налогоплательщика, выполненных сторонними организациями при осуществлении вышеназванных мероприятий и вышеуказанном финансировании.

При этом что касается доходов, полученных налогоплательщиками в качестве компенсации понесенных ими расходов, возникающих при осуществлении работ по переносу, переустройству их основных средств в рамках создания упомянутых объектов капитального строительства, то такие доходы не подпадают под действие нормы подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ и подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Как установлено судом, работы по реконструкции (перекладке) газопроводов, являющихся основными средствами, осуществлял собственник – АО «Мособлгаз», а Договор не

содержит условий о том, что мероприятия финансируются полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» и Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99 сумма, полученная за компенсацию расходов по строительству, является доходом организации, с которого необходимо заплатить налог на прибыль организаций.

Согласно положениям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», затраты на строительство не признаются расходами в целях исчисления налога на прибыль, поскольку, носят капитальный характер и подлежат включению в стоимость объекта.

Согласно п. 3 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 настоящего Кодекса. Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Таким образом, получаемая компенсация за перекладку газопроводов Ответчиком по первоначальному иску по Договору не является доходом от реализации, является внереализационным доходом, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.

Аналогичная правовая позиция изложена в письмах Министерства финансов РФ от 02.04.2020 № 03-03-06/1/26200, от 26.08.2019 № 03-03-6/1/65392, от 26.04.2019 № 03-03-06/1/30890, от 04.10.2024 № 03-03-06/1/96300, от 24.06.2024 № 03-03-06/1/58587, содержащих разъяснения о налоге на прибыль.

Как следует из представленных в материалы дела акта о приемке работ № 0100-005998 от 31.07.2020, акта о приемке выполненных работ от 30.11.2022, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2022, акта о приемке выполненных работ от 30.12.2022, справки о стоимости выполненных работ от 30.12.2022, стоимость выполненных Ответчиком по первоначальному иску работ по Договору и оплаченных, Заказчиком составила 6 810 300,72 руб. без учета НДС 20%. С указанной суммы АО «Мособлгаз» в 2020, 2022 и 2023 годах в соответствии с действующим законодательством был начислен и оплачен налог на прибыль в размере 20% (1 362 060,15 руб.), что подтверждается выписками из регистра статьи «Доходы от реализации товаров, работ, услуг» и квитанциями о приеме Налоговым органом налоговой декларации за 2020, 2022 и 2023 года.

Стоимость подготовки технического плана на реконструированное (перенесенное) Сооружение и расходов на подготовку материалов и сведений, необходимых для принятий уполномоченными органом решения об изменения границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (перенесенного) объекта газового хозяйства и внесения соответствующих сведений в ЕГРН составляет 151 800,08 руб., с учетом НДС 20 %., что подтверждается расчетом стоимости работ и сметой, представленной Ответчиком по первоначальному иску.

Согласно п.1 ст. 284 НК РФ общая налоговая ставка по налогу на прибыль до 01.01.2025 составляла 20 %.

Общая сумма расходов, подлежащих возмещению, которая является для Ответчика по первоначальному иску внереализационным доходом составляет 6 936 800,79 руб., следовательно, сумма налога на прибыль по ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ (20%) = 6 936 800,79 *20% =1 387 360,16 руб., и исчислена Истцом по встречному иску верно.

Кроме того, условиями Договора предусмотрена оплата государственной пошлины за внесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках Сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции (переноса).

Подпунктом 27 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ установлены размеры государственной пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости о

правах, об ограничениях прав и обременениях недвижимого имущества, в частности, для организаций государственная пошлина составляет 2 000,00 рублей.

Отсутствие на момент рассмотрения спора доказательств уплаты пошлины не освобождает Истца по первоначальному иску от договорной обязанности компенсировать данный вид затрат, который неминуемо возникнет у Ответчика по первоначальному иску при внесении изменений в ЕГРН по окончании всех работ.

Согласно ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям, и, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условии не допускаются.

Согласно ч.2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда в случаях, предусмотренных настоящим ГК РФ, другими законами или договором.

В силу ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Требование об изменении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Суд отклоняет доводы Истца по первоначальному иску о том, что требование о компенсации 20% является необоснованным, поскольку АО «Мособлгаз» не подтвердило факта увеличения налоговой нагрузки и, по сути, требует компенсации налога на прибыль с полученной выручки, что является его неосновательным обогащением, как основанные на ошибочном толковании норм права.

Согласно положениям ст. 52.2 ГрК РФ и Перечню видов затрат, подлежащих компенсации в связи с реконструкцией линейных объектов, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2022 № 1420-р, компенсации подлежат именно затраты на уплату налогов, связанные с реконструкцией. Договор, заключаемый в рамках данной процедуры, по своей правовой природе не является договором подряда в чистом виде. Это соглашение о компенсации собственнику всех убытков (потерь) и затрат, включая налоговые последствия увеличения стоимости его имущества. Условия п. 4.7 Договора прямо и недвусмысленно указывает на компенсацию налоговых затрат, а не на компенсацию «увеличенной налоговой нагрузки» как разницы. Размер 20% от стоимости результата работ – это согласованный сторонами в Договоре механизм расчета размера такой компенсации.

Ответчиком по первоначальному иску представлен расчет, основанный на стоимости работ, что соответствует условиям Договора.

Также суд отклоняет доводы Истца по первоначальному иску об обязанности Ответчика по первоначальному иску передать исполнительно-техническую документацию на реконструируемый объект, как основанный на ошибочном толковании норм права и условий Договора.

Положения ст. 726 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В данном случае Истец по первоначальному иску не является эксплуатирующей организацией и в дальнейшем также не будет осуществлять эксплуатацию газопровода. Газопроводы остаются в собственности и на балансе Ответчика по первоначальному иску, которое и осуществляет их дальнейшую эксплуатацию в соответствии с требованиями промышленной безопасности, при этом обязанность хранения исполнительной документации

лежит на эксплуатирующей организации (п. 6 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531).

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных требований первоначального иска и требований встречного иска, установленных фактических обстоятельств спора и представленных в материалы дела доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу, что первоначальные исковые требования не подлежат удовлетворению, а встречные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Суд отмечает, что не отражение в судебном акте всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны, не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки (Определения Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2017 № 305-КГ17- 13690, от 13.01.2022 № 308-ЭС21-26247).

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить.

Обязать ООО «Воздвижение» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключить с АО «Мособлгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):

- Дополнительное соглашение № 1/269-5523-2025 к договору о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства от 11.02.2020 № 01/1534-20 на условиях, определенных АО «Мособлгаз» в следующей редакции:

Акционерное Общество «Мособлгаз» (сокращенное наименование АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице директора филиала АО «Мособлгаз» «Север» ФИО3, действующего на основании доверенности от 27.10.2025 № 12-07/1457, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Воздвижение» (сокращенное наименование ООО «Воздвижение»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору № 01/1534-20 о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства от 11.02.2020 (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. Руководствуясь пунктами 1.2, 4.6 и 4.7 Договора, Стороны в настоящем Дополнительном соглашении определяют размер компенсации Собственнику затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) Сооружения и стоимости оплаты подготовки технического плана, материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого (переносимого) Сооружения и внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) (каталога координат и текстового (при необходимости) и графического описания для внесения в ЕГРН изменений в сведения об основных характеристиках Сооружения и описание местоположения охранной зоны.

2. Условия и порядок расчетов.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что размер компенсации определен в Расчете компенсации (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) и составляет: 1 387 360,16 руб. (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста шестьдесят рублей 16 копеек) НДС не облагается.

Стоимость подготовки технического плана составляет: 151 800,08руб. (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот рублей 08 копеек), в том числе НДС 20 % – 25 300,01руб.

Общая стоимость работ по дополнительному соглашению (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению) составляет: 1 539 160,24 руб. (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят рублей 24 копейки), в том числе НДС 20 % от стоимости подготовки технического плана – 25 300,01 руб.

2.2. Заказчик обязан компенсировать Собственнику затраты, определенные п. 1.1. и в размере, определенном п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. Оплата осуществляется на основании счета, выставленного Собственником.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате считается надлежащим образом, исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Собственника.

4. Действие настоящего Дополнительного соглашения.

4.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5. Прочие условия.

5.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, тексты которых идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от 11.02.2020г. № 01/1534-20.

6. Приложения.

6.1 Приложение № 1 – Сводный расчет стоимости. 6.2 Приложение № 2 – Расчет стоимости компенсации.

7. Подписи Сторон.

Собственник: Заказчик:

АО «Мособлгаз» ООО «Воздвижение»

Адрес местонахождения: Юридический адрес: 117218,

143082, МО, Одинцовский район, Академический р-н, г. Москва, ул.

<

...> километр Рублево- Кржижановского, д. 15, к. 5

Успенского шоссе, Почтовый адрес: 117218,

дом 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901 Академический р-н, г. Москва, ул.

Филиал АО «Мособлгаз» «Север» Кржижановского, д. 15, к. 5 Почтовый адрес: 141002, МО, ИНН/КПП 

<

***> / 772701001

<

...> Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО

Тел.: 

<

***> "Совкомбанк" ИНН/КПП: 

<

***> / 502943001 БИК 044525360

Банковские реквизиты: р/сч 

<

***> р/с: 

<

***> к/с 30101810445250000360 Банк: Банк ГПБ (АО) г. Москва ОГРН 

<

***>

к/с: 301018810200000000823

БИК: 044525823 ОКПО 23754003 Тел.: 

<

***>

e-mail: info@vzdv.ru

Директор филиала Генеральный директор АО «Мособлгаз» «Север» ООО «Воздвижение»

____________ ФИО3 ________________ ФИО4

(подпись) М. П.

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 01/269-5523-2025

к Договору № 01/1534-20 от 11.02.2020

ООО «Воздвижение»

Расчет компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных

платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) сооружения.

№ п/п

Выполненные работы по

реконструкции

Стоимость выполненных

работ без НДС,

руб.

Сумма компенсации 20 %

1

Проектные работы

812 023,69

162 404,74

2

Работы по подготовке

технического плана и материалов и сведений, необходимых для

принятия уполномоченным органом решения об изменении

границ зон с особыми условиями использования территории

реконструируемого

(переносимого) Сооружения.

126 500,07

25 300,01

3

Строительно-монтажные работы

4 803 435,34

960 687,07

4

Работы по врезке

1 194 841,69

238 968,34

Итого размер компенсации, руб.

1 387 360,16

Собственник: АО «Мособлгаз» Заказчик: ООО «Воздвижение» Директор филиала Генеральный директор АО «Мособлгаз» «Север»

______________/ ФИО3 / __________________/ ФИО4 /

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № 01/269-5523-2025

к Договору № 01/1534-20 от 11.02.2020

Сводный расчёт стоимости мероприятий по реконструкции (переносу)

Объект газового хозяйства:

– газовой распределительной сети высокого давления от ГРС г. Хотьково, протяженностью, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Пушкинский муниципальный район, кадастровый номер 50:05:0000000:77539, инв. бух. № 01-007455(C00020526).

– газораспределительная сеть г. Хотьково, протяженностью, по адресу: Московская область, городское поселение Хотьково, город Хотьково, кадастровый номер 50:05:0000000:3411, являющейся собственностью АО «Мособлгаз», в части газопровода низкого давления, инв. бух. № 01-007455 (C00020526)

№ п/п

Наименование мероприятий по

реконструкции (переносу)

Обоснование расчёта

Стоимость (руб.), в том числе НДС 20%

1

Компенсация затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) газопровода высокого и низкого давления бух. инв. бух. № 01-007455(C00020526).

Расчет компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с увеличением стоимости

имущества в результате выполнения работ по реконструкции (переносу) сооружения.

1 387 360,16 (НДС не облагается)

2

Подготовка технического плана, материалов и сведений, необходимых для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) реконструируемого

(переносимого) Сооружения и внесения соответствующих сведений в ЕГРН (каталога координат и текстового (при необходимости) и графического описания для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в части демонтажа 250 п.м. и восстановленного участка 425 п.м. ,изменений в сведения об основных характеристиках Сооружения и описание местоположения охранной зоны.

КП на комплекс мероприятий по реконструкции

151 800,08

И Т О Г О

1 539 160,24

Сумма НДС 20 % - 25 300,01 (руб.)

Собственник: Заказчик:

АО «Мособлгаз» ООО «Воздвижение»

Директор филиала Генеральный директор АО «Мособлгаз» «Север»

____________ ФИО3 ______________ ФИО4

- Дополнительное соглашение № 1 к договору о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства от 11.02.2020 № 01/1534-20 на условиях, определенных АО «Мособлгаз» в следующей редакции:

Акционерное Общество «Мособлгаз» (сокращенное наименование АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице директора филиала АО «Мособлгаз» «Север» ФИО3, действующего на основании доверенности от 27.10.2025 № 12-07/1457, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Воздвижение» (сокращенное наименование ООО «Воздвижение»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору № 01/1534-20 о реконструкции (переносе) объекта газового хозяйства от 11.02.2020 (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. Руководствуясь пунктом 1.2 Договора, Стороны в настоящем Дополнительном соглашении определяют размер компенсации Собственнику затрат, связанных с уплатой государственной пошлины за вынесение изменений в ЕГРН в части сведений о характеристиках Сооружения и его местоположении, изменившихся в результате реконструкции(переноса)(далее – государственная пошлина) и порядок оплаты Собственнику указанной выше государственной пошлины.

2. Размер компенсации и порядок оплаты.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что размер государственной пошлины определен в соответствии с федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ и составляет: 2 000,00 руб. (две тысячи рублей 00 копеек).

2.2. Заказчик обязан компенсировать Собственнику затраты, определенные п. 1.1. и в размере, определенном п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. Оплата осуществляется на основании счета, выставленного Собственником.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате считается надлежащим образом, исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Собственника.

3. Действие настоящего Дополнительного соглашения.

3.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4. Прочие условия.

4.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, тексты которых идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от 11.02.2020г. № 01/1534-20.

5. Подписи Сторон.

Собственник: Заказчик:

АО «Мособлгаз» ООО «Воздвижение»

Адрес местонахождения: Юридический адрес: 117218, Академический 143082, МО, Одинцовский район, деревня р-н, 

<

...> Раздоры, 1 километр Рублево-Успенского Почтовый адрес: 117218, Академический р-н, шоссе, 

<

...>

дом 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901 ИНН/КПП 

<

***> / 772701001

Почтовый адрес: 141002, МО, Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО 

<

...> "Совкомбанк"

Тел.: 

<

***> БИК 044525360

ИНН/КПП: 

<

***> / 502943001 р/сч 

<

***> Банковские реквизиты: к/с 30101810445250000360

р/с: 

<

***> ОГРН 

<

***> Банк: Банк ГПБ (АО) г. Москва

к/с: 301018810200000000823 Тел.: 

<

***> БИК: 044525823 ОКПО 23754003 e-mail: info@vzdv.ru

Директор филиала Генеральный директор

АО «Мособлгаз» «Север» ООО «Воздвижение»

________________ФИО3 ________________ ФИО4 (подпись) М. П.

Взыскать с ООО «Воздвижение» (ИНН 

<

***>) в пользу АО «Мособлгаз» расходы по уплате госпошлины в размере 50 000,00 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья Е.А. Морозова