Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-86435/21-141-631

09 июня 2021 года

г.  Москва

Резолютивная часть решения объявлена                   07 июня 2021г.

Мотивированное решение изготовлено                        09 июня 2021г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел дело по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ИНН 

<

***>)

к АО «Москапремонт» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 959 208руб. 13коп.

В судебное заседание явились:

от истца – не явился, извещен, 

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы обратился с исковым заявлением к АО «Москапремонт» о взыскании 959 208руб. 13коп. неустойки по договору №ПКР-000389-18 от 31.05.2018г.

Лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении искового заявления в случае неявки сторон или какой-либо из сторон и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции.

Исковое заявление рассмотрено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, в порядке ч. 4 ст. 121, ст.ст. 123, 137 ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле материалам.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 31.05.2018г. между истцом и ответчиком заключен договор №ПКР-000389-18.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнить работы, а истец принять и оплатить их.

Согласно графику производства работ (Приложение №1 к договору) окончание срока работ по ремонту инженерных внутридомовых сетей электроснабжения – 20.04.2019г. с учетом позднего открытия объекта.

Однако ответчик свои обязательства в сроки, установленные договором не выполнил, что подтверждается актом приемки выполненных работ от 01.10.2019г.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Учитывая, что ответчиком работы выполнены с просрочкой, что подтверждается актом приемки выполненных работ, то истец просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 12.6 договора, из расчета 0,1% и 0,2% от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки, что по расчету истца составляет 959 208руб. 13коп.

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Москапремонт» (ИНН 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ИНН 

<

***>) 959 208руб. 13коп. неустойки и 22 184руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в  течении месяца со дня  принятия. 

Судья                                                                                                   А.Г. Авагимян