1111111482_3460847  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-31561/2018  

«22» апреля 2019 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, Иркутская область, город Братск,  Центральный, проспект Ленина, 37)  

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКАЯ, ГОРОД БРАТСК, ЖИЛОЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПРОСПЕКТ  ЛЕНИНА, ДОМ 37, ОФИС 13)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора -  Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, адрес: 308036, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА в рамках выполнения обязательств по муниципальным контрактам №  

Ф.2016.167591 от 18.07.2016 и № Ф.2016.171515 от 19.07.2016 безвозмездно устранить на  объекте: Иркутская область г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Гагарина, д.83 в срок до  01.08.2019 следующие недостатки результата работ по благоустройству:  

-выполнить работы по укладке асфальто-бетонного покрытия на тротуаре у южного  фасада дома № 83;  

-укрепить посевом трав по растительному слою откосы около дома № 83;  -выполнить работы по укладке асфальто-бетонного покрытия в кармане с ул. Гагарина;  

 -установить предусмотренные проектом диваны в количестве 3 штук вдоль подпорной  стенки дома № 83;  

- выполнить работы по посадке кустов багульника в количестве 5 штук на откосах,  предусмотренные проектом;  

- выполнить работы по посадке яблонь в количестве 2 штук, предусмотренные проектом; 

- выполнить работы по укладке асфальто-бетонного покрытия на автомобильной  площадке перед подъездом;  

- обустроить перила на пандусе со стороны дома № 83; 

- провести работы по восстановлению разрушенного благоустройства (заасфальтировать  проезды всей домовой территории, тротуары и подходы к лестницам);  

-провести работы по уборке строительного мусора у придомовой территории. 

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С.И. Кириченко