Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«18» марта 2022 года

Дело № А12-36144/2021

Резолютивная часть оглашена 11 марта 2022 года

Полный текст изготовлен 18 марта 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «МЕ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании штрафа.

В судебном заседании участвовал представитель истца – ФИО1 по доверенности.

           Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МЕ» (далее – ответчик) о взыскании штрафа за расторжение договора №1540235-В-СМР-2021 от 28.04.2021 в одностороннем порядке в размере 1 239 825 руб. 31 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 25 398 рублей.

            Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

28 апреля 2021 года между Унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «МЕ» (подрядчик, исполнитель) был заключен договор № 1540235-В-СМР-2021  о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Волгоградской области города Волгограда, расположенного по адресу: ул. им. Шурухина, д. 20 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений, крыши, фасада, систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения).

Договором установлены сроки выполнения работ.

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарными планами выполнения работ, которые оформляется Подрядчиком в виде календарных графиков производства работ и не могут превышать установленные договорами сроки выполнения всех работ по Объектам. 

В соответствии с п. 3.1 Договора, весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения Договора по 01 октября 2021 года.

Согласно договора  заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае  нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ) продолжительностью более 15 календарных дней, в том числе установленные графиком выполнения работ (п. 13.2.6).

Аналогичное основание для расторжения договора предусмотрено п. 226 Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

В связи с нарушениями сроков производства работ в адрес ответчика было направлено уведомление об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке. В соответствии с условиями договора, уведомление было направлено электронной почтой, одновременно на бумажном носителе посредством «Почты России».

Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления уведомления. 

В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 13.2. настоящего договора (нарушение сроков выполнения работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости настоящего договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования Заказчика. 

Указанный договор расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 13.2 договора. Исполнитель начислен штраф в размере 10% от стоимости договора. Цена договора составляет 12 398 253  руб.14 коп.  Сумма штрафных санкций, подлежащих оплате - 1 239 825 (один миллион двести тридцать девять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 31 коп. (12 398 253,14 х 10%).

  Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,    

решил :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  штраф в размере  1 239 825 руб. 31 коп. и  государственную пошлину в размере 25 398 руб.

Полный текст решения изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты принятия резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                 Т.В.Попова