51_14243924 

Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-97767/22

19 июля 2023 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  при ведении протокола секретарем А.И. Руш  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-97767/22 по исковому заявлению ООО "КОМТЕХ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "МЕДИАТОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании: 

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 27.02.2020 по работам: замена входных  дверей в подъезды, мусорокамеры на- металлические двери в энергосберегающем  исполнении (код работ 1.14) по адресу: 

<

...>, в размере: 50  050 000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 22.10.2020 по работам: ремонт межпанельных  швов (код работ 1.5) по адресу: 

<

...>, в размере: 38 300  000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 19.10.2021 по работам: ремонт межпанельных  швов (код работ 1.5) по адресу: 

<

...>, в размере: 19 700  000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 19.10.2021 по работам: Ремонт мягкой  рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного  помещения (код работ 2.1.1) по адресу: 

<

...>, в размере: 11  050 000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 20.11.2020 по работам: Ремонт межпанельных  швов (код работ 1.5) по адресу: 

<

...>, в размере: 36 700  000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 04.10.2021 по работам: Ремонт мягкой  рулонной кровли, без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного  помещения (код работ 2.1.1) по адресу: 

<

...>, в  размере: 20 800 000,00 рублей;  

- неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в течение  гарантийного срока Рекламационным актом от 01.04.2021 по работам: ремонт межпанельных  швов (код работ 1.5) по адресу: Ленинский р-н, г. Видное, пр-кт. Ленинского Комсомола,  д.74, в размере: 30 300 000,00 рублей,  

 а всего 206 900 000,00 рублей. 

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00 рублей, 

При участии в судебном заседании - согласно протоколу. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "МЕДИАТОР" в пользу ООО "КОМТЕХ" неустойку в размере  

7 453 228,87 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000  

руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов