Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5618/2022

10 октября 2022 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Главстрой"  Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 11.07.2022 №  1629/глс к обществу с ограниченной ответственностью Северная торговая компания "АЛААС"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ по акту  выявленных недостатках от 15.04.2022 по объекту «Ремонт л. Орджоникидзе на участке ул. П.  Алексеева до ул. Петровского».  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Северная торговая компания  "АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01 июня 2023 года безвозмездно  устранить недостатки по муниципальному контракту от 27.05.2020 № Р-08/2020 на выполнение  работ по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети Октябрьского округа ГО «город Якутск», а  именно:  

"Ремонт ул.Орджоникидзе на участке ул.П.Алексеева до ул.Петровского": 

 № 1 

Участок ПК 

Мероприятия по устранению недостатков 

1 

17+00 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

2 

17+20 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

3 

11+60 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

4 

11+40 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

5 

11+20 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

6 

11+00 

Устранить поперечную трещину покрытия 

дорожного полотна 

7 

1+60-11+00 

Осуществить восстановление асфальтобетонного  покрытии дорожного полотна  

8 

9+40 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

 

9 

0+80-2+40 

Осуществить восстановление асфальтобетонного  покрытия дорожного полотна  

"Ремонт ул.Петровского на участке от пр.Ленина до ул.Чайковского" 

 № 

ПК 

Недостаток 

1 

0+20-15+40 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия 

дорожного полотна 

2 

6+00 

На пересечении с ул.Ойунского в местах стыков  осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

3 

6+00-10+00 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия 

дорожного полотна 

4 

6+20 

Осуществить восстановление асфальтобетонного 

покрытия дорожного полотна 

5 

7+50 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия 

дорожного полотна 

6 

8+20 

Осуществить восстановление асфальтобетонного 

покрытия дорожного полотна 

7 

8+00-9+00 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна  

8 

8+50 

Осуществить восстановление асфальтобетонного  покрытия дорожного полотна  

9 

9+15 

Осуществить восстановление асфальтобетонного  покрытия дорожного полотна  

10 

9+50 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия 

дорожного полотна 

11 

9+50-10+00 

Осуществить восстановление асфальтобетонного 

покрытия дорожного полотна 

12 

9+70 

Осуществить восстановление асфальтобетонного 

покрытия дорожного полотна 

13 

9+90 

Осуществить восстановление асфальтобетонного 

покрытия дорожного полотна 

14 

10+00 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия 

дорожного полотна 

15 

10+30 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

16 

11+50 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

17 

11+60 

Осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна  

18 

12+00 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

19 

13+50 

Осуществить замену асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Северная торговая компания  

"АЛААС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о  времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого  арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 22:20:28Кому выдана Семенова Ульяна Николаевна