АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 июня 2018 года

Дело № А33-9509/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15 июня 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 20 июня 2018 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПСК Побратим" (ИНН 2464121464, ОГРН 1152468038084, г. Красноярск, дата регистрации 10.08.2015)

к муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Железногорск, дата регистрации 20.02.2001)

о взыскании задолженности по договору от 30.12.2016 № 168/16,

в присутствии представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 09.12.2016,

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 07.09.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПСК Побратим" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 30.12.2016 № 168/16 в размере 1 958 001 руб. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.04.2018 возбуждено производство по делу.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на исковых требованиях по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика в судебном заседании возражений по существу исковых требований не привела, отзыв на исковое заявление не представила.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 168/16 от 30.12.2016 (далее – договор), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции водопровода от ВК-26, расположенного по адресу: Красноярским край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе перекрестка ул. Поселковая-Белорусская до ВК, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Енисейская, 3 для нужд МП «Гортетоэнерго» (далее - работы) и передать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязался принять результат работ в установленном настоящим договором порядке и уплатить обусловленную договорную пену (пункт 1.1 договора).

Пунктом 1.2 договора установлено, что объем, содержание и иные требования к работам, выполняемым Подрядчиком, определяются в соответствии с выполненными, утвержденными Заказчиком и согласованными Подрядчиком:

рабочей документацией «Реконструкция водопровода Ду150 от ВК-26 до ВК в районе ул. Енисейская, 3» (Инвентарный номер Заказчика № 5491-НВ);

локальным сметным расчетом №5492 на выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК-26, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе перекрестка ул. Поселковая-Белорусская до ВК, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Енисейская, 3 для нужд МП «Гортеплоэнерго» (приложение №2 к договору).

Цена выполняемых работ определена протоколом комиссии по закупкам №119 от                    30 декабря 2016 года и составляет 2 910 000,00 рублей (два миллиона девятьсот десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 443 898,30 рублей (четыреста сорок три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 30 копеек). Для формирования справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС- 3, применяется коэффициент снижения начальной цены. Расчет коэффициента снижения начальной цены определен приложением №3 к настоящему договору (пункты 2.1 – 2.2 договора).

Пунктом 3.1 договора установлено, что оплата результата выполненных подрядчиком производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании  подписанных заказчиком без замечаний к объему и качеству выполненных работ актов «О приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справок   стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), «акта приемки – сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОС-3), счета и счета – фактуры, выставленных подрядчиком.

Счет и счет-фактура на оплату результата работ выставляются Подрядчиком в течение          5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком без замечаний к объему и качеству выполненных работ «Акта приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов» (форма ОC-3). Счет и счет-фактура должны быть оформлены в соответствии с нормативными актами, содержащими требования к их оформлению, а также должны содержать указание на номер и дату договора.

Обязательство Заказчика по оплате результата выполненных работ является встречным исполнением обязательства Заказчика, обусловленным исполнением Подрядчиком обязательства по выставлению счета и счета-фактуры.

Оплата результата работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты, следующей за датой принятия Заказчиком к оплате надлежащим образом оформленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с 01 февраля 2017 года, выполнить работы и передать их результат Заказчику не позднее «27» ноября 2017 года (пункт 4.1 договора).

Пунктом 8.1 договора установлено, что  все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края.

Дополнительным соглашением №1 от 07.09.2017 сторонами внесены изменения, в частности в пункт 2.1 договора, изложив его в следующей редакции: цена  выполняемых  Подрядчиком   по  настоящему договору  работ определена Расчетом стоимости работ по реконструкции водопровода от ВК-26, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе перекрестка ул. Поселковая-Белорусская до ВК; расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Енисейская, 3 (приложение М 6 договору) и составляет 2 877 334 рублей 66 копеек (два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать четыре рубля 66 копеек), в том числе НДС 18% в размере 438 915 рублей 45 копеек (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятнадцать рублей 45 копеек).

Дополнительным соглашением №2 от 15.12.2017 сторонами внесены изменения в пункт 3.1. договора, согласно которому оплата результата работ осуществляется Заказчиком после принятия Заказчиком к оплате надлежащим образом оформленных Подрядчиком счета и счета-фактуры в срок не позднее 31 марта 2018 года по следующему графику платежей:

до 29 декабря 2017 года (включительно) – 719 333,67 руб.;

до 31 января 2017 года (включительно) – 719 333,67 руб.;

до 28 февраля 2017 года (включительно) – 719 333,67 руб.;

до 31 марта 2017 года (включительно) – 719 333,65 руб.

итого – 2 877 334,66 руб.

Подрядчиком выполнены работы, а заказчиком без замечаний приняты предусмотренные договором работы, что подтверждается: актами выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2017 №1, от 15.09.2017 №2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3; актом о приеме – сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 15.09.2017. На оплату работ выставлен счет-фактура № 14 от 15.09.2017 на сумму 2 877 334,66 руб.

Платежными поручениями №4794 от 19.12.2017, № 16 от 10.01.2018 заказчиком частично произведена оплата выполненных работ. Задолженность составляет 1 958 001 руб.

Претензией от 01.04.2018 №75-77-78 подрядчик обратился к заказчику с требованием погасить задолженность. Претензия получена заказчиком 02.04.2018 вх. № 1304/18. 

 Письмом от 09.04.2018 №18-74/960 заказчик указал на отсутствие возможности погашения задолженности.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Правоотношения сторон по заключенному договору подряда № 168/16 от 30.12.2016 на выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК-26, расположенного по адресу: Красноярским край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе перекрестка ул. Поселковая-Белорусская до ВК, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Енисейская, 3 для нужд МП «Гортетоэнерго» регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Факт выполнения истцом работ по договору подряда № 168/16 от 30.12.2016 подтверждается подписанными сторонами: актами выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2017 №1, от 15.09.2017 №2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3; актом о приеме – сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 15.09.2017.  

Каких-либо замечаний по объемам выполненных работ, их стоимости ответчиком не указано. Претензий к качеству выполненных работ не заявлено. Принятие выполненных работ подтверждается подписью представителя общества и заверено печатью ответчика.

На оплату работ выставлен счет-фактура № 14 от 15.09.2017 на сумму 2 877 334,66 руб.

Платежными поручениями №4794 от 19.12.2017, № 16 от 10.01.2018 ответчиком частично произведена оплата выполненных работ. Задолженность составляет 1 958 001 руб.

Ответчик доказательств оплаты задолженности в полном объеме не представил. Наличие долга в указанном размере не оспорил. В силу пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которых истец основывает требования, считаются признанными ответчиком, поскольку им прямо не оспорены, возражения относительно существа заявленных требований не заявлены.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 1 958 001 руб. подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

С учетом результата рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 32 580 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края   "Гортеплоэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Железногорск, дата регистрации 20.02.2001) в пользу общества с ограниченной ответственностью                           "ПСК Побратим"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 10.08.2015) 1 958 001 руб. задолженности, 32 580 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щелокова