АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-1875/2021

г. Белгород

19 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2021 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи   Танделовой З.М. при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Лычевой К.А., рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по иску Администрации муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области (ИНН 3106001828, ОГРН 1023100737043) к ООО "ЭПБ" (ИНН 6623127983, ОГРН 1186658062360) о взыскании 1 736,38 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, ходатайство;

от ответчика: не явился, извещён надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Администрация муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области(истец) обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к ООО "ЭПБ" (ответчик) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 45 от 05.06.2020 в размере 1 736,38 руб.

От истца посредством электронного сервиса «Мой арбитр» 10.06.2021 поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд считает  иск подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 05 июня 2020 года в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее Заказчик) и Общество с Ограниченной Ответственностью «ЭПБ» (далее Исполнитель) заключили муниципальный контракт № 45 «Разработка проектносметной документации на капитальный ремонт МБДОУ «Волоконовский детский сад комбинированного вида № 1 «Березка», п. Волоконовка, Волоконовского района;> (далее-Контракт), в соответствии с которым Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению проектных работ в составе и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», заданием на проектирование и условиями Контракта по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ «Волоконовский детский сад комбинированного вида №1 «Березка», П. Волоконовка, Волоконовского района».

Согласно п. 1.2. Контракта сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30 октября 2020 года.

 Данное условие было нарушено Исполнителем, фактически обязательство было исполнено 17 декабря 2020 года, что подтверждается Актом № 15 от 17 декабря 2020 года, Актом приема-передачи № 1 от 17 декабря 2020 года. Просрочка составила 48 дней. 

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание пеней.

Согласно п. 4.6. Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем.

Таким образом, размер неустойки (штрафа, пени) составляет 1 736 (одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 38 копеек.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «6 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с ч. 6,7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случая: ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Претензию администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 22.12.2020№ 99-01/7675 о выплате пени за несвоевременное исполнение обязательств по муниципальному контракту № 45 от 05.06.2020 г. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ «Волоконовский детский сад комбинированного вида № 1 «Березка», п. Волоконовка, Волоконовского района» в размере 1 736 (одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 38 копеек Исполнитель   оставил без ответа и удовлетворения.

 Ответчик иск не оспорил.

При изложенных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

В соответствии с пп. 1.1. п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемый Верховным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления  выступающие по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов и ответчиков.

 С учетом изложенного, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с ООО "ЭПБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрация Волоконовского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 45 от 05.06.2020 в размере 1 736,38 руб.

 3. Взыскать с ООО "ЭПБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2000 руб.

 4. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в установленном законом порядке. 

Судья

Танделова З. М.

i