АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Кемерово Дело № А27-24476/2019 

«23» января 2020 года  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Власова В.В., при  ведении протокола судебного заседания без применения средств аудио записи  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  по заявлению Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской  области, г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Тибет-СВ», г. Кемерово (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании осуществить консервацию объекта при участии: 

от административного органа: ФИО2 - представитель, доверенность от  23.04.2019, диплом, сл. удостоверение;  

от правонарушителя: не явились; после объявленного перерыва стороны в судебное заседание явку не обеспечили. 

Руководствуясь статьями 49, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Тибет-СВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  зарегистрированное по адресу: 650000, 

<

...>), в течении 30 календарных дней, со дня вступления решения в законную  

силу, за свой счет осуществить мероприятия по консервации объекта  капитального строительства: «Реконструкция нежилого здания под 10  этажный 183 квартирный жилой дом со встроенно-пристроенным подземным  гаражом-стоянкой на 130 машиномест и встроенными помещениями  общественного назначения». Вторая очередь - встроенно-пристроенный  гараж-стоянка на 130 машиномест», расположенного по адресу: г. Кемерово,  ул. В. Волошиной, 13Б, а именно:  

1. принять решение о консервации объекта, в котором определить:  а) перечень работ по консервации объекта;  

б) лиц, ответственных за сохранность и безопасность объекта, в том числе  конструкций, оборудования, материалов и строительной площадки (должностное лицо  или организация);  

в) сроки разработки технической документации, необходимой для проведения  работ по консервации объекта, а также сроки проведения работ по его консервации;  

2. обеспечить подготовку технической документации; 

3. выполнить работы по консервации, в соответствии с решением и технической  документацией.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

 Судья В.В. Власов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.09.2019 8:23:32

Кому выдана Власов Вадим Владимирович