100420_1948759 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  город Пермь  

30.08.2017 года Дело № А50-6380/17 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи О.А. Бояршиновой,  при ведении протокола помощником судьи М.М Каменских,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Урал Бизнес Проект» (614010, 

<

...>/2, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  (622034, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь ст.ст. 110, 168-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента  вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить  недостатки выполненных отделочных и монтажных работ Бассейна на  объекте расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  ст. Старатель, здание (Бассейн) литер В, поликлиники № 3 НУЗ «Дорожная  больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД», в том числе:  

Провести демонтажные работы по удалению геотекстильного полотна,  ПВХ пленки и крепежных элементов по всей площади переливного лотка до  уровня верхнего стыка с ПВХ покрытием борта бассейна (предварительно  провести демонтаж водопада, пневмокнопки, лестницы, форсунок), провести  антибиокоррозионные мероприятия по обработке бетонных конструкций  основания лотка, оштукатуривание бетонных конструкций лотка; после чего  смонтировать существующие водопад, пневмокнопку, лестницу, форсунки с  обеспечением герметичности их подсоединения, в том числе:  

Произвести демонтаж ПВХ пленки с поверхности лотка в объеме 33 м.;  

Произвести демонтаж угла крепежного с поверхности лотка в объеме  

66 м.; Произвести демонтаж пневмокнопки в количестве 1 шт.; 

Произвести демонтаж водопада в количестве 1 шт.;  Произвести демонтаж лестницы в количестве 1 шт.;  Произвести демонтаж форсунок в количестве 10 шт.;  

Произвести демонтаж решетки в переливном лотке в объеме 33 м.;  Произвести демонтаж геотекстиля в объеме 40 кв.м.;  

Произвести расчистку поверхности от поврежденного штукатурного  

слоя в объеме 40 кв.м.; 

Произвести обработку поверхности антигрибковыми препаратами в  

объеме 40 кв.м.; 

Произвести монтаж закладных для лестниц под пленку в количестве 2  

шт.; Произвести монтаж геотекстиля в объему 40 кв.м.; Произвести монтаж лестницы на фланцы в количестве 1 шт.; Произвести монтаж пневмокнопки в количестве 1 шт.; Произвести монтаж адаптера для пневмокнопки в количестве 1 шт.; Произвести монтаж водопада в количестве 1 шт.; 

Произвести монтаж пленки ПВХ 1.65*25 м. «SBG 150» по периметру  

бассейна в объеме 50 кв.м.; Произвести гидроизоляцию переливного лотка в объеме 40 кв.м.; 

Произвести монтаж форсунок в переливном лотке с учетом фитингов в  

количестве 10 шт.; 

Произвести укладку решетки в переливных лотках в объеме 33 м.;  

Произвести гидроизоляцию профиля под переливную решетку в  

объеме 66 м. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Урал Бизнес Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в возмещение расходов по экспертизе 60 000 (шестьдесят тысяч)  

руб., а также в возмещение судебных расходов по оплате госпошлины 6 000  

(шесть тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  

Арбитражный суд Пермского края. 

Судья О.А. Бояршинова