Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-69716/2020

30 ноября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения изготовлена 19.10.2020

Мотивированная часть решения изготовлена 30.11.2020 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

общества с ограниченной ответственностью "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" (640014, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТРЕЙД" (195271, 

<

...> литер А, пом. 33-Н, офис 3, ОГРН: 

<

***>)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" (далее – ООО "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТРЕЙД" (далее – ООО "СТРОЙ ТРЕЙД") о взыскании 563517,64 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда от 03.07.2019 № 33/19 за период с 29.08.2019 по 04.12.2019 (далее – Договор).

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (почтовые идентификаторы 19085445496630 и 19085445496647).

Решением в виде резолютивной части от 19.10.2020 исковые требования удовлетворены частично.  

Истец подал апелляционную жалобу на решение, в связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО  "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" (заказчиком) и ООО "СТРОЙ ТРЕЙД" (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами и средствами работы по антикоррозийной защите сооружений ООО "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору).

По п. 1.2. Договора перечень и объемы выполнения работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.1. Договора срок выполнения работ – 90 календарных дней с даты заключения Договора.

В соответствии с п. 3.1. Договора стоимость выполняемых работ по Договору определена в локальных сметных расчетах (приложение № 2-6 к Договору) и составляет в текущих ценах 1150035,12 руб., в том числе НДС 20% - 191672,52 руб. 

В силу п. 3.2. Договора расчет производится заказчиком не позднее 30 календарных дней с момента сдачи всего объема работ по Договору4, подписания сторонами акта выполненных работ, с указанием всех обязательных реквизитов, согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

По пункту 5.1. Договора сдача результата работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется по окончанию выполнения всего объема работ по Договору актом выполненных работ.

В силу п. 7.1. Договора в случае нарушения подрядчиком срока начала, либо срока окончания производства работ заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Если подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора, заказчик вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, без возмещения убытков. 

Ссылаясь на обстоятельство того, что подрядчик не приступил к выполнению работ по Договору, заказчик направил подрядчику уведомление от 14.11.2019 № 2328-кт об отказе от договора по адресу, указанному в Договоре: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16, литер А, пом./ком. 16Н/1 (РПО 64000331091461). 

Ссылаясь на нарушение подрядчиком срока начала выполнения работ, заказчик начислил подрядчику неустойку и направил претензию от 21.01.2020 № 168-нт по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16, литер А, пом./ком. 16Н/1 (РПО 6400034300098).

Отказ ООО "СТРОЙ ТРЕЙД" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Ответчик в суд отзыв на исковое заявление, иных документов не представил. 

Уведомление об отказе от Договора от 14.11.2019 № 2328-кт получено ответчиком 04.12.2019, что подтверждается сведениями с сайта почты России и почтовым уведомлением, представленным в материалы дела.

Согласно уведомлению Договор прекращает свое действие с момента получения ответчиком данного уведомления. Таким образом, договор прекратил действие с 04.12.2019. 

Истцом начислена неустойка за нарушение срока начала выполнения работ за период с 29.08.2019 по 04.12.2019. 

Согласно расчету суда размер неустойки составил 356510,89 руб. за период с 04.10.2019 по 04.12.2019. Суд удовлетворят исковые требования на сумму 356510,89 руб. и отказывает в удовлетворении остальной части иска.

Согласно ч. 1 ст. 10 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТРЕЙД" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КУРГАНСКАЯ ТЭЦ" 356 510,89 руб. неустойки, 9028 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.