АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-39868/23

31 июля 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   18 июля 2024 г.

Полный текст решения изготовлен            31 июля 2024 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.П. Алмазовой

при ведении протокола секретарем судебного заседания Болдыревой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А53-39868/23

по исковому заявлению публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 72 "Красная Шапочка" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании,

3-е лицо: Отдел образования Администрации Белокалитвинского района,

встречный иск о взыскании,

 

при участии:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности № 08/20/610 от 23.06.2023,

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 25.01.2024 (онлайн),

от третьего лица: представитель не явился, 

 

установил:

публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 72 "Красная Шапочка" о взыскании задолженности по контракту № 11 от 28.05.2023 в размере 463 295 рублей, неустойку в размере 21 991,07 рублей, а также неустойку по день фактического исполнения обязательства (уточненные требования).

Определением суда от 02.11.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанным определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Отдел образования Администрации Белокалитвинского района.

В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, представления дополнительных доказательств, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, о чем 27.12.2023 вынесено определение.

От ответчика в арбитражный суд поступил встречный иск о взыскании с публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» пени по контракту № 11 от 28.05.2023 за период с 25.12.2021 по 25.06.2024 в сумме 180 376,19 рублей (уточненные требования).

Определением суда от 15.04.2024 встречное исковое заявление муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка"  принято к рассмотрению.

Представитель истца заявленные требования поддержал. Против доводов встречного иска возражал. Представил полный пакет документов, являющихся результатом работ по контракту, в том числе, графические материалы. Также представлены возражения на уточнение встречных требований.

Судом указанные документы приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика против первоначальных требований возражал. Встречный иск поддержал.

В судебном заседании, состоявшемся 15.07.2024, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  объявлялся перерыв до 18.07.2024  до 10 часов 50 минут.  Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах, в том числе об объявленных перерывах,  размещена  на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rostov.arbitr.ru. После перерыва судебное заседание в назначенное время продолжено.

Представитель истца заявленные требования поддержал. Против доводов встречного иска возражал. Ходатайствовал о приобщении к материалам дела полного пакета документов, являющихся результатом работ по контракту, в том числе, графических материалов. Также представлены возражения на уточнение встречных требований.

Судом указанные документы приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика против первоначальных требований возражал. Встречный иск поддержал. Представил возражения по доводам истца относительно встречного иска и расчета неустойки, которые судом приобщены к материалам дела.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (исполнитель) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 72 "Красная Шапочка" (заказчик) 28.05.2021 заключен контракт № 11.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта истец обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта, и сдать их результат ответчику, а ответчик обязуется принять работы и оплатить их.

Пунктом 1.2 контракта предусмотрено, что истец обязуется разработать проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС «Красная шапочка» по адресу: 347024, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ленина ул. Набережная 46 в части замены системы теплоснабжения (с установкой    автоматизированного    газоиспользующего теплоагрегата), с демонтажем и заменой системы отопления», в соответствии со сметными расчетами (сводной сметой на проектные работы и инженерные изыскания в составе: сметой № 1 на проектные работы, сметой № 2 на проектные работы) - приложение № 1 к контракту, сметой на проверку проектных решений - приложение № 2 к контракту, заданием на проектирование - приложение № 3 к контракту, дополнительными требованиями к заданию проектирование - приложение № 4 к контракту, которые являются неотъемлемой частью контракта, а ответчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и  порядке, которые установлены контрактом.

Цена контракта составляет 463 295 рублей, в том числе НДС: 77 215,83 рублей (пункт 2.1).

Согласно пункту 2.2 контракта расчет с исполнителем за выполненные в полном объеме работы осуществляется заказчиком на основании счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных заказчиком и исполнителем. Оплата заказчиком выполненных работ производится в течение 30  календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Истец указывает, что работы по контракту выполнены в полном объеме на сумму 463 295 рублей.

В соответствии с актом приема-передачи документации от 27.09.2021 результаты работ были переданы ответчику частично. 14.03.2023 ответчику направлены акты приема-передачи оставшейся части документации. Акты получены ответчиком 12.05.2023.

В соответствии с пунктом 4.3. контракта срок приемки работ составляет 5 (пять) календарных дней.

В нарушение условий контракта результаты работы ответчиком в установленный срок не приняты и оплата не произведена.

Пунктом 6.6 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

В связи с чем, истцом произведено начисление неустойки за период с 19.06.2023 по 30.10.2023 в размере 38 144,62 рублей.

Истцом 25.05.2023 направлена претензия с требованием принять и оплатить результат выполненных работ, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

В ходе рассмотрения дела истец заявленные требования уточнил, просил взыскать с ответчика задолженность по контракту № 11 от 28.05.2023 в размере 463 295 рублей, неустойку в размере 21 991,07 рублей, а также неустойку по день фактического исполнения обязательства.

Ответчик, против заявленных требований возражал, указав на то, что 27.09.2021 исполнителем по акту частично переданы результаты работы по контракту. Вместе с тем, оплате подлежат работы, выполненные в полном объеме. Исполнителем документация в полном объеме своевременно не представлена, в настоящее время заказчик  утратил интерес в выполнении работ по контракту.

В порядке ст. 132 АПК РФ предъявил встречное исковое заявление, по существу которого указал, что в соответствии с пунктом 5.1 контракта исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные контрактом в срок: с момента подписания контракта до «24» декабря 2021 г.

Согласно пункту  1.3. контракта результатом работ является: проектная документация; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС «Красная шапочка» по адресу: 347024, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ленина ул. Набережная 46, в части замены системы теплоснабжения (с установкой    автоматизированного    газоиспользующего теплоагрегата),   с демонтажем и заменой системы отопления».

В соответствии с актом приема передачи документации от 27.09.2021 ответчиком были частичном выполнены работы и переданы истцу следующие документы:

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС «Красная шапочка» по адресу: 347024, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ленина ул. Набережная 46 в 1 экз.;

- том 5.6. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения в 3 экз.;

- том 6 Проектная документация. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства в 3 экз.

Исполнителем в адрес заказчика 14.03.2023 направлены акты приемки-сдачи работ от 01.03.2023, которые получены заказчиком 12.05.2023.

Ответчик указывает, что данные документы не приняты и не подписаны со стороны заказчика, так как результат работ в соответствии с п.1.3. контракта и п. 3, п.6 дополнительных требований к заданию на проектирование (Приложение № 4 к контракту) в адрес заказчика не поступил.

В связи с нарушением срока выполнения работ, на основании пункта 6.5 контракта, заказчиком произведено начисление пени за период с  25.12.2021 по 25.06.2024 в сумме 180 376,19 рублей (уточненные требования).

Истец, возражал против встречного иска, ссылался на то, что 19.02.2024 в адрес ответчика направлена проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, которые получены ответчиком 22.02.2024.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из материалов дела, во исполнение обязательств по контракту от 28.05.2021 № 11 истцом были частично выполнены работы и переданы ответчику по акту приема-передачи документации от 27.09.2021следующие документы:

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС «Красная шапочка» по адресу: 347024, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ленина ул. Набережная 46 в 1 экз.;

- том 5.6. Проектная документация. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения в 3 экз.;

- том 6 Проектная документация. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства в 3 экз.

Также истцом в адрес ответчика посредством почтовой связи 19.02.2024 направлен акт выполненных работ от 01.03.2023, проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, которые получены ответчиком 22.02.2024. Поскольку в установленный контрактом срок для приемки работ (5 календарных дней) ответчиком мотивированного отказа от приемки работ не заявлено, истец полагает, что работы приняты ответчиком.

Оспаривая данное утверждение, ответчик ссылался на то, что указанные работы не приняты, поскольку результат работ по контракту не представлен, отсутствовали необходимые документы, а именно, графические материалы: конструктивные и объемно-планировочные решения: проект на устройство системы электроснабжения; проект на устройство систем водоснабжения и водоотведения; проект на устройство наружных тепловых сетей; проект на технологические решения. Кроме того, в представленных документах допущена ошибка в наименовании заказчика, указано «Красная шапочка», тогда как, в соответствии с уставом учреждения, наименование «Красная Шапочка», в связи с чем полученные документы в возвращены в  адрес истца письмом от 26.02.2024 № 3.

Вместе с тем, доказательств направления в адрес истца мотивированного отказа, с указанием недостатков и сроков для их устранения, ответчиком не представлено.

Ссылка ответчика на неверное написание наименования заказчика судом оценивает критически, поскольку указанное не является недостатком выполненных работ. При этом, наименование указано в соответствии с контрактом.

Кроме того, в  связи с тем, что ответчиком отрицался факт изготовления и передачи документации в полном объеме, суд предложил истцу представить результат работ по контракту.

Во исполнение определения суда, истцом в материалы дела представлены документы, которые, по мнению ответчика, не были приложены к пакету документов, полученному ответчиком 22.02.2024, в том числе, графические материалы.

Также судом учитывается тот факт, что результат работ по указанному объекту передан ответчику 27.09.2021 частично в объеме, достаточном для проведения закупочной процедуры на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт объекта МБДОУ ДС «Красная шапочка» по адресу: 347024, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ленина ул. Набережная 46 в части замены системы теплоснабжения (с установкой автоматизированного газоиспользующего теплоагрегата), с демонтажем и заменой системы отопления»).

Представленные документы подтверждают факт выполнения работ истцом в полном объеме.

Поведение ответчика отрицающего факт выполнения работ, при отсутствии заявленного мотивированного отказа и использовании результата работ, судом оценивается как недобросовестное (п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ), что не может быть предметом судебной защиты.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что истцом выполнены работы, предусмотренные контрактом, а потому на стороне ответчика возникло обязательство оплатить выполненные работы.

При таких обстоятельствах, требования о взыскании с учреждения в пользу общества задолженности за выполненные работы в размере 463 295 рублей подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 21 991,07 рублей, а также пени со дня, следующего за днем вынесения решения на сумму задолженности по день фактического исполнения обязательства.

Согласно части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (пеней, штрафом), предусмотренной законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Пунктом 6.6 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Истцом произведено начисление неустойки за период с 29.03.2024 по 25.06.2024 в размере 21 991,07 рублей.

Представленный расчет судом проверен и признан верным.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Судом самостоятельно произведен расчет неустойки за период с 26.06.2024 по 18.07.2024 (дату вынесения решения суда), размер которой составил 5 683,09 рублей.

Учитывая вышеизложенное, с ответчика подлежат взысканию 21 991,07 рублей пени за период с 29.03.2024 по 25.06.2024, 5 683,09 рублей пени за период с 26.06.2024 по 18.07.2024, а также пени, начисленные на сумму долга в размере 463 295 рублей, исходя 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, начиная с 19.07.2024г. по день фактического погашения долга.

Рассмотрев встречное требование о взыскании неустойки за период с  25.12.2021 по 25.06.2024 в сумме 180 376,19 рублей, суд пришел к следующим выводам.

Пунктом 6.5 контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Учитывая, что несвоевременное неисполнение ответчиком обязательства по контракту подтверждено материалами дела, требование о взыскании неустойки признано судом обоснованным.

Ответчиком расчет неустойки произведен за период 25.12.2021 по 25.06.2024 в размере 180 376,19 рублей, исходя из стоимости всего объема работ по контракту – 463 295 рублей.

Обществом произведен контррасчет, исходя из стоимости невыполненных работ 315 317 рублей, за период с 25.12.2021 по 22.02.2024, согласно которому размер неустойки составил 101 910,45 рублей.

Проверив представленные  сторонами расчеты, суд пришел к следующим выводам.

Начисление неустойки на общую сумму контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Кодекса, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции, в связи с чем, неустойка подлежит исчислению исходя из размера неисполненных обязательств в размере 315 317 рублей.

При этом, следует учитывать, что в полном объеме результат работ получен учреждением 22.02.2024, следовательно, неустойка подлежит начислению до указанной даты.

С учетом изложенного, суд принимает контррасчет общества как надлежащий.

Таким образом, взысканию подлежит неустойка за период с 25.12.2021 по 22.02.2024 в размере 101 910,45 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований встречного иска надлежит отказать.

Истцом по первоначальному иску уплачена государственная пошлина в размере 13 029 рублей по платёжному поручению от 23.10.2023 № 32226.

Государственная пошлина по первоначальным требованиям составляет 12 819 рублей и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по ее уплате подлежат отнесению на учреждение с взысканием в пользу истца.

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 210 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Государственная пошлина по встречному иску составляет 6 411 рублей.

При принятии встречного иска учреждению предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску подлежат отнесению на ответчика (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») пропорционально удовлетворённым требованиям, что составляет 3 622 рубля, со взысканием в доход федерального бюджета.

Государственная пошлина в размере  2 789 рублей подлежит взысканию с истца по встречному иску в доход федерального бюджета.

Ввиду удовлетворения первоначального и встречного исков и необходимости возмещения сторонами судебных расходов по оплате государственной пошлины, суд считает возможным произвести зачет встречных требований в порядке части 5 статьи 170 АПК РФ.

В результате зачета исковых требований с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка" в пользу публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подлежит взысканию 401 877,71 рублей денежных средств, а также неустойка, начисленная на сумму долга в размере 401 877,71 рублей, исходя 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, начиная с 19.07.2024г. по день фактического погашения долга (503 788,16 рублей – 101 910,45 рублей).

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) - 463 295 рублей задолженности, 21 991,07 рублей неустойки, а также неустойку, начисленную на сумму долга в размере 463 295 рублей, исходя 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, начиная с 26.06.2024г. по день фактического погашения долга, а также 12 706 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) – 101 910,45 рублей пени.

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.

Произвести зачет первоначального и встречного исков, в результате зачета взыскать с  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – 396 081,62 рублей денежных средств, а также неустойку, начисленную на сумму долга в размере 463 295 рублей, исходя 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, начиная с 26.06.2024г. по день фактического погашения долга.

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 "Красная Шапочка" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 789 рублей государственной пошлины по встречному иску.

Взыскать с публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 622 рубля государственной пошлины по встречному иску.

Возвратить публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 323 рубля государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению № 32226 от 23.10.2023г.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               З.П. Алмазова