РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-203115/23-110-1648

г. Москва

22 февраля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 февраля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КОННЕКТСТРОЙ" (142432, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРНОГОЛОВКА ГОРОД, ПЕРВАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "МОСКАПРЕМОНТ" (105484, 

<

...>, ЭТАЖ 3, КОМНАТА 70, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 18 546 354,52 руб.,

 

при участии:

от истца – ФИО3 , гендиректор,

от ответчика -  ФИО4 по дов.  от  18.01.2021, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КОННЕКТСТРОЙ" обратилось с иском к  акционерному обществу "МОСКАПРЕМОНТ" о взыскании 18 546 354,52 руб. задолженности по контракту №1-СП/П/2020 от 02.10.2020.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «КоннектСтрой» и АО «Москапремонт» был заключен Контракт №1-СП/П/2020 от 02.10.2020 г. на выполнение работ по приспособлению объектов здравоохранения г. Москвы на объекте по адресу: 

<

...>.

В обоснование своего требования истец сослался на то,  что ООО «КоннектСтрой» выполнило работы на общую сумму 25 970 802  рубля 93 копейки и после устранения замечаний к исполнительной документации и Актам выполненных работ, итоговые варианты были направлены в АО «Москапремонт» для подписания и производства оплаты. После получения Ответчиком исправленных Актов выполненных работ и исполнительной документации, замечаний, мотивированного отказа или запроса о предоставлении разъяснений в адрес Истца не поступало, оплата не произведена.

Ответчиком в рамках данного контракта в адрес Истца были произведены оплаты в размере 7 424 448 (семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста сорок восемь) рубле 41 копейка:

п/п № 998 на сумму 5 500 000, 00 рублей - авансовый платёж,

п/п № 1017 на сумму 1 000 000, 00 рублей - авансовый платёж,

п/п № 1132 на сумму 924 448, 41 рублей  - за выполненные работы.

Таким образом, сумма задолженности Ответчика за выполненные и принятые Ответчиком работы составляет 18 546 354 (восемнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 52 копейки.

В адрес Ответчика была направлена досудебная претензия, которая оставлена без ответа.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем,   согласно п. 3.1 контракта, стороны согласовали сроки выполнения работ с даты заключения контракта по 01.12.2020г. Однако истец свои обязательства в сроки, установленные контрактом, не выполнил.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

22.01.2021г. ответчиком в адрес истца направлена претензия №20-исх/21 от 22.01.2021г. с требованием о возврате суммы неотработанного аванса и содержащая уведомление об одностороннем расторжении контракта №1-СП/П/2020 от 02.10.2020г. Учитывая, что на дату расторжения контракта, ответчиком обязательства по контракту фактически не выполнены, АО «Москапремонт» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «КоннектСтрой» 7 539 966,71 руб.

Арбитражным судом города Москвы при рассмотрении вышеуказанного искового заявления установлено, что ООО «КоннектСтрой» свои обязательства в сроки, установленные контрактом №1-СП/П/2020 от 02.10.2020г., не выполнил и решением суда от 31.05.2021г. взыскал в пользу АО «Москапремонт» 7 424 448,41 руб. неосновательного обогащения. Решение суда от 31.05.2021 вступило в законную силу 01.06.2021.

При указанных обстоятельствах иск не подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОННЕКТСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>)   в федеральный бюджет госпошлину в размере 115 732 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

ФИО1