Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 16.08.2021г. 

по делу № А32-3500/2020 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Строймонтаж Плюс» (ИНН 

<

***>) ст. Староминская в  течении 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу  устранить недостатки выполненных работ в рамках контракта № 0818300021517000344- 0060683-01/114 от 31.10.2017г., путем выполнения работ по:  

- восстановлению асфальтного покрытия площадки для сушки белья, справой  стороны от объекта, площадью 105 кв.м.;  

- восстановлению деформированного уклона асфальтного покрытия въезда на  территорию справа от Объекта для стока дождевых вод;  

- восстановлению работы вентиляционной системы Объекта (при работе происходит  вибрация в групповых ячейках; в медицинском кабинете присутствует запах из кухонного  блока);  

- восстановлению работы отопительной системы на Объекте в полном объеме (в  отопительный период - система работает только в максимальном режиме);  

- установке душевых насадок на смесителях во всех предусмотренных для мытья  посуды помещениях объекта (нарушение требований СанПин);  

- установке ограждений (декоративные решетки) на отопительных радиаторах во  всех групповых ячейках (нарушение требований Сан Пин);  

- устранению течи воды в санузле средней группы (дефект гофры);  

- восстановлению в санузле подготовительной группы работоспособность сливного  механизма, в том числе устранения подачи в сливной бачок горячей воды;  

- по устранению в санузлах всех групповых ячеек (при одновременной подаче в 4  (четыре) смесителя (во время мытья детьми рук) снижения напора воды, в  подготовительной группе вода подается в смесители только горячая;  

- наладке подачи горячей воды в кухонные цеха, в овощном, мясорыбном, холодном,  раздаточном;  

- восстановлению работоспособности розетки в медицинском кабинете слева от  

входной двери; 

- восстановлению постоянной и стабильной работы розетки музыкального зала от  

входной двери справа, розетки в подготовительной группе справа от входной двери из  

музыкального зала, розетки в подготовительной груше в раздевалке справа от входной  

двери; 

- установке аварийных кранов на случай ремонтных работ водопроводам так же  

предусмотренной сантехники во всех помещениях объекта; 

- оштукатуриванию в подготовительной группе (в санузле) обсыпалась в оконном  

проеме слева внизу (ширина 15см, длина 30 см); 

- регулировке входной двери с улицы в подготовительной группе (отсутствует  

закрытие, дверь закрывается исключительно на ключ внутреннего замка); 

- устранению трещины (ширина 2 мм, 60x150x20 см) в дверном проеме в  

музыкальном зале (дверь в среднюю группу); 

- устранению трещины (ширина 1 мм, длина 2,5м) в музыкальном зале в углу слева  

от двери туалета; 

- устранению трещины (ширина 1мм, длина 50см) в музыкальном зале в углу слева  

от гимнастической лестницы; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 10 см) в медкабинете по углам: слева от  

входной двери; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 20 см) в изоляторе по углам - справа от  

входной двери; 

- устранению трещины (ширина 2мм см, длина 60x150x20см) в подготовительной  

группе (в санузле) вокруг дверного проема; 

- устранению трещины (ширина 1мм, длина 1м) в подготовительной группе в  

раздевалке под подоконником ближе к углу справа (слева от входной двери с улицы); 

- устранению трещины (ширина Змм, длина 2 м) в подготовительной группе в  

санузле по всем углам, в дверном проеме; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 20см) в подготовительной группе в  

буфетной по углам; 

- устранению трещины (ширина Змм, длина 20 см) в пищеблоке (кладовая  

скоропортящихся продуктов)- (угол справа от двери); 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина1м) в пищеблоке (горячий цех) между  

вытяжкой и жаровней; t 

- устранению трещины (ширина Змм, длина 2м) в пищеблоке (овощной цех) справа  

от двери и на углу - 2мм 30см; 

- устранению трещины (ширина 1см, длина 40 см) в пищеблоке (раздаточный цех)  

вокруг вытяжной трубы; 

- устранению трещины (ширина Змм, длина 1.5 м) в пищеблоке (холодный цех) в  

дверном проеме слева; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 1м) в средней группе- внизу в углу слева  

от двери в санузел; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 1м) в средней группе в углу справа от  

двери в санузел; 

- устранению трещины (ширина 2мм, длина 10см) над дверью в групповую комнату;  - устранению трещины (ширина 2мм, длина 2 м) в дверном проеме слева (пищеблок);  

- восстановлению целостности поливной системы (5 и 6 зона), слева от объекта;  - устранения проседания тротуарной плитки, общей площадью 70см. х 1м. (участок  

средней группы, позади летней веранды); 

- устранения проседания тротуарной плитки, общей площадью 70см. х 2м (участок  

подготовительной группы, дорожка, ведущая к летней веранде). 

 Решение суда может быть обжаловано в порядке, определенном главой 34  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Пятнадцатый  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края 

Судья О.П. Миргородская