Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Краснодар 

«25» сентября 2023 года Дело № А32-21881/2023  

Резолютивная часть решения суда объявлена 25.09.2023 Полный текст решения суда изготовлен 25.09.2023. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Хмелевцевой А.С., при ведении  протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Засько Я. Ю.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 24.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ООО «БАУ Проект» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2018,  ИНН: 

<

***>), г. Краснодар  

о взыскании неустойки и штрафной санкции в размере 64 950 руб.  при участии в заседании:  

от истца: ФИО1 – доверенность, от ответчика: ФИО2 – доверенность, 

УСТАНОВИЛ:

ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 24.10.2002, ИНН: 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд  Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «БАУ Проект» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2018, ИНН:  

<

***>), г. Краснодар о взыскании неустойки и штрафной санкции в размере 64 950 руб.  

Основания исковых требований изложены в исковом заявлении.  

Представитель истца в судебном заседании уточнил (уменьшил) заявленные требования  до 32 478,67 рублей.  

Ходатайство истца удовлетворено. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения  заявленных требований.  

В судебном заседании был объявлен перерыв до 09:00 до 25.09.2023. По окончании  перерыва судебное заседание продолжено.  

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между государственным казенным учреждением  «Главное управление строительства Краснодарского края» и обществом с ограниченной  ответственностью «БАУ ПРОЕКТ» 20.12.2022 заключен государственный контракт № 161Б22на выполнение инженерных изысканий, подготовку (корректировку) проектной и рабочей  

документации объекта капитального строительства: «Пожарное депо на 2 автомобиля в с.  Шабельское муниципальное образование Щербиновский район (проектирование и  строительство)».  

В соответствии с пунктом 1.1 Контракта Подрядчик обязуется в соответствии с исходно-разрешительной документацией, настоящим контрактом, заданием на проектирование,  описанием объекта закупки, руководствуясь нормами действующего законодательства  Российской Федерации в области проектирования и строительства и иными данными,  определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, в  соответствии со сводным сметным расчетом, определяющим цену работ, выполнить  инженерные изыскания, подготовку (корректировку) проектной и рабочей документации  объекта капитального строительства: «Пожарное депо на 2 автомобиля в с. Шабельское  муниципального образования Щербиновский район (проектирование и строительство)», а  Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ  

Согласно пункту 2.1. Контракта, цепа контракта является твердой, определена па весь  срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов,  других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением  обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет 530 000  (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость  (далее НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов.  

Срок выполнения работ определен сторонами с даты заключения Контракта по  17.05.2023 (пункт 3.1 Контракта).  

Порядок и сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются заданием на  проектирование, календарным графиком и иными условиями контракта (пункт 3.2 Контракта).  

Согласно пункту 4.2.1. Контракта, Подрядчик обязался принять на себя обязательства в  соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить  инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию в целях  строительства объекта капитального строительства: «Пожарное депо па 2 автомобиля в с.  Шабельское муниципального образования Щербиновский район (проектирование и  строительство)».  

Технические, экономические, экологические и другие требования к документации,  являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать заданию на  проектирование, требованиям соответствующих ГОСТов, СПиПов, Градостроительному  кодексу Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации,  в части состава, содержания и оформления проектной документации.  

Пунктом 4.2.2. контракта определено, что подрядчик обязан своими силами и за свой  счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей  вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических  выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров,  предусмотренных в задании на проектирование.  

По состоянию на 24.04.2023 взятые па себя подрядчиком обязательства по подготовке  проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального  строительства: «Пожарное депо па 2 автомобиля в с. Шабельское муниципального  образования Щербиновский район (проектирование и строительство)» не исполнены.  

В соответствии с п. 5.4 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет  стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф  в размере 1 000 рублей 00 копеек.  

Таким образом, в рамках выполнения государственного контракта по состоянию на  24.04.2023 ООО «Bay Проект» не выполнены следующие пункты календарного графика  (Приложение № 2 к контракту)  

- п. 1.4 не представлен график выполнения разработки проектной и рабочей  документации, срок выполнения: с даты заключения государственного контракта в течение 5  календарных дней;  

- п. 1.7 не предоставлен перечень работ за границей ГПЗУ, срок выполнения: с даты  заключения государственного контракта в течение 10 календарных дней.  

Ненадлежащее исполнение п. 1.5 не предоставление на согласование Технического  задания и Программы работ для проведения инженерных изысканий, срок выполнения: с даты  заключения государственного контракта в течение 10 календарных дней, указанные  документы представлены 10.03.2023, что подтверждается входящим письмом № 1020.  

Таким образом, размер штрафных санкций составляет 4 000 рублей 00 копеек. 

Согласно пункту 5.5 Контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик оплачивает заказчику пеню.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически  исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской  Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать  причинение ему убытков.  

В рамках выполнения государственного контракта по состоянию на 24.04.2023 ООО  «Бау Проект» не выполнены следующие пункты календарного графика (Приложение № 2 к  контракту):  

п. 1.3 не предоставлен перечень исходпо-разрешителыюй документации, срок  выполнения: с даты заключения государственного контракта в течении пяти календарных  дней, т.е. до 25.12.2022.  

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 1489 от 16.03.2023 об уплате  штрафных санкций и неустойки, однако ответчик добровольно данное требование не  исполнил.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с исковым  заявлением.  

При вынесении решения суд исходит из следующего. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его  сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого  обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не  вытекает из закона или существа обязательства.  

 В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать  услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а  заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

С учетом требований статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик  обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре  возмездного оказания услуг. Фактически данная денежная сумма является неосновательным  обогащением.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и  иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую  техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с  компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать  заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.  Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия  заказчика.  

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению  договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку  становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков.  

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310)  может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об  отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения  данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,  иными правовыми актами или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не  установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик  несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных  сроков выполнения работы.  

Пунктом 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения  наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных  договором подряда сроков.  

Как следует из материалов дела, между государственным казенным учреждением  «Главное управление строительства Краснодарского края» и обществом с ограниченной  ответственностью «БАУ ПРОЕКТ» 20.12.2022 заключен государственный контракт № 161Б22на выполнение инженерных изысканий, подготовку (корректировку) проектной и рабочей  документации объекта капитального строительства: «Пожарное депо на 2 автомобиля в с.  

Шабельское муницшталыюго образования Щербиновский район (проектирование и  строительство)».  

Срок выполнения работ определен сторонами с даты заключения контракта по  17.05.2023.  

Пунктом 4.2.2. контракта определено, что подрядчик обязан своими силами и за свой  счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей  вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических  выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров,  предусмотренных в задании на проектирование.  

По состоянию на 24.04.2023 взятые па себя подрядчиком обязательства по подготовке  проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального  строительства: «Пожарное депо па 2 автомобиля в с. Шабельское муниципального  образования Щербиновский район (проектирование и строительство)» не исполнены.  

В соответствии с п. 5.4 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет  стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф  в размере 1 000 рублей 00 копеек.  

Таким образом, в рамках выполнения государственного контракта по состоянию на  24.04.2023 ООО «Bay Проект» не выполнены следующие пункты календарного графика  

- п.1.1 не назначен представитель Генерального подрядчика по доверенности, срок  выполнения: с даты заключения государственного контракта в течении 1 рабочего дня;  

-п. 1.4 не представлен график выполнения разработки проектной и рабочей  документации, срок выполнения: с даты заключения государственного контракта в течение 5  календарных дней;  

-п. 1.7 не предоставлен перечень работ за границей ГПЗУ, срок выполнения: с даты  заключения государственного контракта в течение 10 календарных дней.  

Ненадлежащее исполнение п. 1.5 не предоставление на согласование Технического  задания и Программы работ для проведения инженерных изысканий, срок выполнения: с даты  заключения государственного контракта в течение 10 календарных дней, указанные  документы представлены 10.03.2023, что подтверждается входящим письмом № 1020.  

Таким образом, размер штрафных санкций составляет 4 000 рублей 00 копеек. 

Согласно пункту 5.5 Контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик оплачивает заказчику пеню.  

Судом усыновлено, что ответчиком в рамках контракта были допущены нарушения  своих обязанностей, выразившихся в несовременном выполнении следующих пунктов  календарного графика:  

-п.1.1 не назначен представитель Генерального подрядчика по доверенности, срок  выполнения: с даты заключения государственного контракта в течении 1 рабочего дня;  

-п. 1.4 не представлен график выполнения разработки проектной и рабочей  документации, срок выполнения: с даты заключения государственного контракта в течение 5  календарных дней;  

-п. 1.7 не предоставлен перечень работ за границей ГПЗУ, срок выполнения: с даты  заключения государственного контракта в течение 10 календарных дней.  

Таким образом суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.  

При этом, судом установлено, что в процессе рассмотрения спора ответчиком в адрес  ООО «Бау Проект» на основании платежного поручения от 20.09.2023 № 1140 были  перечислены денежные средства в размере 32 478, 67 руб., основание платежа указано:  «оплата неустойки и штрафных санкций по МК № 161Б-22 от 20.12.2022г. (175/22) дело № А3221881/2023, что оценивается судом добровольным исполнением обязательств и фактически  удовлетворяет заявленные требования истца.  

От истца на момент рассмотрения спора ходатайство об уточнении размера исковых  

требований или ходатайства об отказе от искового заявления не поступило. 

Таким образом, в связи с добровольным погашением задолженности у суда отсутствуют  

основания для удовлетворения заявленных требований. 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации 

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении требований - отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение 1 месяца с даты его принятия.  

Судья А.С. Хмелевцева