АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-316/2023

14 мая 2024 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена  24.04.2024         

Полный текст решения изготовлен  14.05.2024

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Криницын И.О., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамент городского хозяйства администрации г. Евпатория к ООО «Трейд-Юг», при участии в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о взыскании

При участии:

от истца – не явился;

от ответчика –  не явился;

от третьего лица (СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) – ФИО1, представитель по доверенности от 22.11.2023;

          Обстоятельства дела:  Истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании     33 933,77 руб., штраф в сумме 5 000,00 руб.

Исковые требования обосновываются завышением стоимости работ.

Ответчиком отзыва не представлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

10.03.2020 года между департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее-Заказчик), и Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕИД-ЮГ», (далее-Подрядчик), на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона 0875300011320000013 от 20.02.2020), был заключен муниципальный контракт № 0875300011320000013 316667 на выполнение работ.

В соответствии с условиями п. 1.1. Контракта Подрядчик обязуется своевременно выполнить работы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения РК (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Состав и объем работ определялся Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Локально-сметными расчетами (Приложение № 2.1 к настоящему Контракту) (п. 1.2. контракта).

Место выполнения работ: 

<

...> объездная дорога от Новоселовского шоссе до ст. Товарная, ул. Кольцевая, ул. Татарская, проезд от Красноярского шоссе к ул. Загородная, согласно заявкам Заказчика (п. 1.3. Контракта).

Согласно п. 4.2. Контракта Подрядчик приступает к выполнению работ не позже следующего рабочего дня после получения заявки от Заказчика, с учетом требований Технического задания.

Срок выполнения работ и периодичность: Выполнение работ по заявкам Заказчика. Заявки подаются с момента заключения контракта по 01 декабря 2020г. Срок на выполнение минимальной заявки заказчика (от 5м2 до 10м2) 3 рабочих дня с момента получения заявки. Срок на выполнения заявки большего объема (более 10м2) 10 рабочих дней с момента получения заявки (п. 4.3. Контракта).

В соответствии с п. 12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

Согласно п. 2.2. Контракта общая цена Контракта составила 19 940 680,00 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Расчет цены контракта указан в сводном сметном расчете (Приложении № 2 к настоящему Контракту). В случае снижения начальной (максимальной) цены Контракта в ходе закупки к указанной в Смете, применяется коэффициент снижения стоимости работ, составляющий 1,20000000024, который определяется согласно Приложения 3 к настоящему контракту, с учетом налогообложения Подрядчика.

Дополнительным соглашением от 06.05.2020г. № 2, с учетом примененного расчета затрат на компенсацию НДС при УСН, внесены изменения в п. 2.2 Контракта, где общая цена Контракта составила 19 940 680,00 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Расчет цены контракта указан в сводном сметном расчете (Приложении №2 к настоящему Контракту), с учетом договорного коэффициента (Приложение № 3 к Контракту).

Соглашение о расторжении контракта от 30.12.2020г. муниципальный контракт от 10.03.2020г. № 0875300011320000013_316667 расторгнут по соглашению сторон на исполненную сумму в размере 19 614 303,00 (девятнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста три) рубля 00 копеек. Обязательства в оставшейся части на сумму 326 377,00 (триста двадцать шесть тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 копеек Стороны прекращают.

В соответствии с п. 3.4.1. Контракта, Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы.

Так, по состоянию на 06.11.2020г. Подрядчиком освоены денежные средства в размере 19 614 303, 00 (девятнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста три) рубля 00 копеек., НДС не облагается, подтвердив актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, указанные работы оплачены в полном объеме.

Финансирование работ осуществлялось из Субсидии бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория (главный распорядитель бюджетных средств Министерство транспорта Республики Крым) в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие «Развитие дорожного хозяйства республики Крым» и Соглашения от 27.12.2019 № 01-28/2019-04.2 о порядке и условиях предоставления в 2020 году из Бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования Республики Крым субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым».

В ходе внеплановой выездной проверки Службой финансового надзора Республики Крым, соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок для обеспечения нужд Республики Крым в департаменте городского хозяйства администрации города Евпатории Республики по вопросу соблюдения условий контракта от 10.03.2020г. № 0875300011320000013_316667 (в части ремонта улицы Татарской), по результатам которого вынесено Представление от 02.12.2021 года№ 09.1-14/2946..

Службой финансового надзора Республики Крым установлено завышение объемов работ в акте выполненных работ от 12.10.2020 №6, а именно:

- порядковый номер 15 КС-2 ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 кв.м, в количестве 121 кв.м., фактически установлено 0 кв.м., расхождение составило 121 кв.м.

- порядковый номер 21 КС-2 ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм, площадью ремонта до 5 кв.м, в количестве 20 кв.м., фактически установлено 0 кв.м., расхождение составило 20 кв.м.

Истцом приняты и оплачены предусмотренные Контрактом работы на общую сумму 33 933,77 руб. (платежное поручение № 717594 от 05.11.2020г.), которые фактически не выполнены Ответчиком, но включены в акт приемки выполненных работ №6 от 12.10.2020г.

Подрядчиком ООО «ТРЕЙД-ЮГ» не выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Татарской, общей площадью 141 кв.м., установлено завышение объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 33 933,77 руб.

Кроме того, согласно п. 8.3. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Таким образом, штраф за ненадлежащее исполнение Ответчиком ООО «ТРЕИД-ЮГ» условий муниципального контракта от 10.03.2020г. составляет в размере 5 000,00 рублей.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Согласно ч. 1 ст. 1102 ГК РФ  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

          Взыскать с       ООО "ТРЕЙД-ЮГ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 33 933,77 руб., штраф в сумме 5 000,00 руб.

Взыскать с ООО "ТРЕЙД-ЮГ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета в госпошлину в сумме 2 000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                В.И. Гайворонский