именем Российской Федерации

решение

10 октября 2018 г.                                    Дело № А40-123202/18-89-615

Резолютивная часть решения объявлена                                04.10.2018 г. 

Решение в полном объеме изготовлено                                    10.10.2018 г.

Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А.

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Давыдова Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «АБС-Строй» 

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг Проект Групп» 

о взыскании задолженности в размере 1 740 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 87 000 руб. 00 коп., госпошлины в размере 31 270 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

В судебное заседание явились: 

от истца: ФИО1, по доверенности от 29.08.18г.; ФИО2 по доверенности от 29.08.2018г., ФИО3, генеральный директор; 

от ответчика:  ФИО4, по доверенности от 06.03.18г.;

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен  о взыскании задолженности в размере 1 740 000 руб. 00 коп., неустойку в размере 87 000 руб. 00 коп., госпошлины в размере 31 270 руб. 00 коп.

Требования  заявлены  на  основании  ст. ст. ГК РФ, ст. 27, 35, 106, 110, 125, 126, АПК РФ

Истец  исковые  требования  поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по  следующим  основаниям.

Исходя из материалов дела, между ООО «АБС-Строй» (исполнитель) и ООО "ГИП ГРУПП" (заказчик) заключен договор на разработку проектной и рабочей документации № А 4.10-16 от 20.04.2016 года в соответствии с условиями которого ООО «АБС-Строй» приняло на себя обязательства по разработке раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации стадии «Проект» и стадии «Рабочая документация» для строительства здания школы на 2100 мест в составе средней старшей школы на 1700 мест (86 классов) и начальной школы (БНК) на 400 мест (16 групп-классов), общей ориентировочной площадью 35 000,00 кв.м., располагающегося по адресу: город Москва, ЮВАО, район Некрасовка, кв. 11.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора общая стоимость работ составляет 7 400 000 руб.

В соответствии с Приложением №1 к Договору стоимость работ по разработке проектной документации составляет: стадия «Проект» - 3 600 000 руб., стадия «Рабочая документация» - 3 800 000  руб.

Кроме того, между ООО «АБС-Строй» и ООО "ГИП ГРУПП" было заключено дополнительное соглашение №1 к Договору от 12.09.2016 года, в соответствии с условиями которого ООО «АБС-Строй» приняло на себя обязательство по выполнению работ по дополнению рабочей документации конструкциями строений инженерных систем (венткамер), разработке усиления консолей колонн малого актового зала в осях 16-19, Ж-Л на отм. +10,130, корректировке рабочей документации входных групп.

В соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения стоимость предусмотренных Дополнительным соглашением работ составила 1 200 000  руб.

Таким образом, общая стоимость работ по Договору составила 8 600 000 руб.

В соответствии с пунктом 3.2. Договора оплата производится в соответствии с пунктом 3.8. Договора по факту принятия заказчиком выполненных работ.

В соответствии с пунктом 3.8. Договора оплата производится в 3 этапа:

1 этап: заказчик уплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора аванс в размере 3 900 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

2 этап: заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по стадии «Проект» и получения положительного заключения Экспертизы работы в размере 2 200 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

3 этап: заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по стадии «Рабочая документация».

В соответствии с подпунктами 3.1. и 3.2. Дополнительного соглашения заказчик уплачивает аванс в размере 360 000 руб. 00 коп. в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления счета, окончательный расчет в размере 840 000 руб. 00 коп. производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Исходя из материалов дела, истец исполнил свои обязательства по разработке проектной документации, согласованию готовой проектной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, а также по передаче готовой проектной документации Ответчику.

24 августа 2017 года между ООО «АБС-Строй» и ООО "ГИП ГРУПП" подписан Акт о приемке выполненных работ (услуг) к договору №А4.10-16 от 20 апреля 2016 года №1, в соответствии с которым ООО "ГИП ГРУПП" приняло результат выполненных работ в части разработки стадии «Проект», на общую сумму 3 600 000 руб.

В соответствии с пунктом 2 указанного акта проектная документация получила положительное заключение ГАУ г. Москвы «Мосгорэкспертиза».

Результат выполненных работ по разработке проектной документации стадии «Рабочая документация» был направлен Истцом в адрес Ответчика 28 августа 2017 года.

Руководствуясь подпунктом 4.4.1. Договора, Истец сопроводительным письмом от 28 августа 2017 года за исх. №77/5 направил в адрес Ответчика комплект разработанной проектной рабочей документации стадии «Рабочая документация», которое было получено Ответчиком 28.08.2017г.

В соответствии с подпунктом 4.4.2 и пунктом 4.5. Договора сдача-приемка работы заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи проектной документации по выполненным работам.

В связи с отсутствием со стороны Ответчика замечаний к результату выполненных работ, Истец, руководствуясь подпунктом 4.4.4 Договора, сопроводительным письмом от 12 сентября 2017 года за исх. №91/5 направил в адрес Ответчика комплект разработанной проектной рабочей документации стадии «Рабочая документация», а также подписанный со стороны Истца акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату, которое было получено Ответчиком  12.09.2017г.

В связи с отсутствием со стороны Ответчика мотивированного отказа от приемки работ, а также в связи с тем, что акт сдачи-приемки выполненных работ в установленный Договором срок Ответчиком не был подписан, Истец, руководствуясь п. 3 ст. 753 ГК РФ, оформил односторонний акт сдачи результата работ, сделав в нем отметку о том, что Ответчик от подписания акта отказался.

Претензий по качеству, объему и срокам выполненных работ от ответчика не поступало.

Таким образом, ответчик принял без возражений и замечаний работы в соответствии с вышеуказанными документами.

Таким образом, общая стоимость выполненных истцом по Договору и Дополнительному соглашению проектных работ составила 8 600 000 руб.

Ответчик оплатил работы частично, в связи с чем за ним образовалась задолженность в размере 1 740 000 руб. 00 коп.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьёй 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств оплаты задолженности, суд считает, что требование о взыскании задолженности в размере 1 740 000 руб. 00 коп. заявлено правомерно и полежит принудительному взысканию с ответчика.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 87 000 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 5.6. Договора за просрочку осуществления платежей Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочку, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

Согласно представленного истцом расчета неустойка составила 87 000 руб. 00 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

Согласно Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. N 81, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суд не усматривает несоразмерности между суммой пени и последствиями нарушения обязательств, в связи с чем ст. 333 ГК РФ применению не подлежит. 

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком своих обязательств, требование истца о взыскании пени в размере 87 000 руб. 00 коп. является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом отклоняются, как необоснованные и документально не подтвержденные.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст. 309-310, 702, 711, 753 ГК РФ и ст.ст. 4, 65,69, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Инжиниринг Проект Групп»  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АБС-Строй»  задолженность в размере 1 740 000 (Один миллион семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., пени в размере 87 000 (Восемьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., госпошлину в размере 31 270 (Тридцать одна тысяча двести семьдесят) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                          О.А. Акименко