Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

26. 05. 2021 года.                                                     Дело № А40-237963/20-43-1781

Резолютивная часть решения объявлена 19. 05. 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 26. 05. 2021 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 

<

***>)

к ООО " БАМСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 333 405 руб. 24 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – ФИО2,  доверенность №ДОВ/БС/3-2021 от 22.04.2021 г.

Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд          

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 377 777 руб. 20 коп. – неустойки, с учётом заявления об уменьшении размера искового требования до 287 000 руб. 00 коп. – неустойки, на основании статей 1, 309, 310, 330 ГК РФ.

Истец не направил в судебное заседание представителя, истребованные судом документы не представил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который иск не признал по основаниям изложенным в отзыве на исковое заявление и в возражениях на дополнения истца; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве и в возражениях на дополнения истца; каких-либо ходатайств не заявили.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя истца.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Требования Истца мотивированы ненадлежащим исполнением Ответчиком обязательств по заключенному между сторонами договору №ПКР-001019-18 от 09.06.2018г. в части сроков выполнения работ. Истец указывает, что в соответствии с п. 12.6. Договора и расчетом, у ООО «БАМСТРОЙ» в пользу ФКР Москвы возникло обязательство по договору от 09.06.2018 №ПКР-001019-18 по оплате неустойки, образовавшейся в период с 20.09.2019 по 30.10.2019 в размере 1 333 405,24 рубля, связанной с невыполнением обязательств по сроку выполнения работ.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка одновременно является способом обеспечения обязательства и одной из форм гражданско-правовой ответственности.

Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Из материалов дела усматривается, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы (Заказчик, Истец) и ООО «Бамстрой» (Генподрядчик, Ответчик) 09.06.2018г. был заключен Договор №ПКР-001019-18 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме  и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Лобанова, д. 2/21 (далее - «Объект»), по условиям которого Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее «Работы») в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу(ам), предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая разработку проектной документации, выполнение строительномонтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по разработке проектной документации по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п. 4.1 Договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ. Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.

В пункте 4.2. Договора установлено, что продолжительность производства работ на Объекте(-ах) определяется Графиком производства и стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

Пунктами 4.2.1. и 4.2.2. Договора определены начальный и конечный срок выполнения работ - согласно Графика производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В соответствии с Графиком производства и стоимости работ начало и окончание срока работ на Объекте: по ремонту подъездов - 163 дня с 21.04.2019г. по 30.09.2019г.;

06.09.2019г. подписан Акт консервации объекта на 2 дня с 07.09.2019г. по 08.09.2019г.

09.09.2019г. утвержден Акт приостановки работ на 37 дней с 09.09.2019г. по 15.11.2019г.

09.09.2019г. принято Решение Комиссии по установлению факта воспрепятствования оказания услуг (или) выполнению работ по капитальному ремонту.

09.09.2019г. утвержден Акт о результатах проведения мероприятий по установлению факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту подъезда, направленного на восстановление надлежащего состояния- и проводимый при выполнения иных работ.

22.04.2019г. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы направил в адрес Ответчика факсограмму №ФКР-ЮАО-532/9 о приостановке работ на 12 дней с 01.05.2019г. по 12.05.2019г.

Работы были приостановлены на 82 дня.

30.10.2019г. сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ №14.

Срок нарушения выполнения работ составляет 31 день, что значительно меньше срока приостановки работ (82-31).

Таким образом, вина ООО «Бамстрой» в нарушении срока выполнения работ по капитальному ремонту подъездов отсутствует.

по ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений - 143 дня с 21.04.2019г. по 10.09.2019г.;

06.09.2019г. подписан Акт консервации объекта на 2 дня с 07.09.2019г. по 08.09.2019г.

10.06.2019г. утвержден Акт приостановки работ на 52 дней с 10.06.2019г.

22.04.2019г. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы направил в адрес Ответчика факсограмму №ФКР-ЮАО-532/9 о приостановке работ на 12 дней с 01.05.2019г. по 12.05.2019г.

Работы были приостановлены на 64 дня.

30.09.2019г. сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ №13.

Срок нарушения выполнения работ составляет 51 день, что значительно меньше срока приостановки работ (64-51).

Таким образом, вина ООО «Бамстрой» в нарушении срока выполнения работ по капитальному ремонту подвальных помещений отсутствует.

по ремонту внутридомовых инженерных систем - 143 дня с 21.04.2019г. по 10.09.2019г.;

06.09.2019г. подписан Акт консервации объекта на 2 дня с 07.09.2019г. по 08.09.2019г.

10.06.2019г. утвержден Акт приостановки работ на 52 дней с 10.06.2019г.

22.04.2019г. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы направил в адрес Ответчика факсограмму №ФКР-ЮАО-532/9 о приостановке работ на 12 дней с 01.05.2019г. по 12.05.2019г.

Работы были приостановлены на 64 дня.

11.10.2019г. сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ №9.

Срок нарушения выполнения работ составляет 32 день, что значительно меньше срока приостановки работ (64-32).

Таким образом, вина ООО «Бамстрой» в нарушении срока выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем отсутствует.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Исходя из п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ, является сдача результата работ заказчику.

Как установлено ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре 4 могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ч.1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Согласно пункту 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит" встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

В соответствии со ст. 328, 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации на ответчика не может быть возложена обязанность по уплате неустойки за просрочку выполнения обязательств по договору, поскольку она произошла по вине заказчика, не исполнившего свои встречные обязательства по договору.

В соответствии с п.3 ст.405 и ст.406 Гражданского Кодекса РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом или договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

При изложенных обстоятельствах, требование о взыскании 1 333 405 руб. 24 коп. – неустойки, заявлено истцом необоснованно и  удовлетворению не подлежит.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на Истца в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 

<

***>) к ООО " БАМСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 333 405 руб. 24 коп. – неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья:

ФИО1