АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025, 

тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001  

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-14937/2023 

11.02.2025 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" (адрес: 664511, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, НОВОЛИСИХА ДЕРЕВНЯ, ДОРОЖНАЯ УЛИЦА, 1 А, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПМК - 7" (адрес: 664075, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА, 244/3, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третье лицо - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) (адрес: 664003, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА, 15, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>); ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (далее ООО "АЛЬЯНС) (664516, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, МОЛОДЕЖНЫЙ ПОСЕЛОК, СОЛНЕЧНАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.04.2017, ИНН: 

<

***>).  

об обязании устранить недостатки, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПМК - 7" в рамках гарантийных обязательств безвозмездно устранить недостатки результатов выполненных работ, в полном соответствиями с условиями договора субподряда № 2020177101542031094009413/1-МЧС от 16.02.2021 на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства: Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Иркутской области» по адресу 

<

...>, в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, а именно:  

- заменить гаражные ворота в количестве 11 штук (распашные) в соответствии с проектной документацией, требованиям технических норм и правил, применяемых при строительстве;  

- выполнить примыкание к полу (устройство полов) всех гаражных ворот в количестве 13 штук, устранить просветы;  

- выполнить настройку турникетов СКУД на входе в здания; 

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции, установить заглушки на подоконнике на всех окнах в комнате отдыха диспетчеров (103 каб.) (административное здание);  

- устранить трещины на стенах по всему периметру в помещение гаража;  

- устранить нарушения в работе вытяжки и демонтировать силовой кабель из стены. (помещение гараж - сушилка);  

- произвести окраску несущих конструкций на всех гаражных воротах (помещение гараж);  

- устранить нарушения в работе приточной вентиляции (помещение гараж - Венткамера);  

- произвести замену плитки пола (1 шт.) (помещение гараж – Компрессорная); 

- устранить трещины в стенах, произвести замену подоконника (помещение гараж – Тепловой узел);  

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции (помещение гараж – склад МИГ);  

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции (административное здание – санузел);  

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции (административное здание - помещение каб. 201 (начальник смены);  

- устранить повреждение отделки стен (коридор 2 этажа административного здания  

(около венткамеры и санузла); 

- устранить нарушения в работе приточной вентиляции и устранить повреждения  

отделки помещения Венткамеры 2 этаж (административное здание); 

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции в санузле (административное  

здание 2 этаж); 

- устранить следы выщелачивания на кирпичной кладке в чердачном помещение  

(административное здание); 

- обеспечить водоотвод. Устранить провал колодца напротив административного  

здания с пожарным депо; - устранить коррозию на входной двери в здание Боксохранения; 

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции в помещении хранения  

инвентаря; 

- устранить недостатки стяжки полов (устранить несоответствия параметров допуска)  

в помещении Мастерская; 

- устранить нарушения в работе вытяжной вентиляции в помещении технического  

осмотра; 

- устранить деформацию откоса дорожных (гаражных) ворот, устранить разрыв  

теплового контура в помещении поста Мойки; 

- устранить деформацию гаражных откосов в боксе хранения резервной техники  

(теплый бокс); 

- устранить разрыв теплового контура в боксе хранения резервной техники (теплый  

бокс); 

- устранить разрыв проводки охранной сигнализации в боксе хранения резервной  

техники (теплый бокс); 

- устранить нарушение целостности ограждений конструкций в боксе хранения  

резервной техники (холодный бокс); 

- устранить повреждения ливневого стока бокса хранения резервной техники  

(холодный бокс); 

- устранить выкрашивание асфальтобетонного покрытия, трещины в асфальте на  

территории улицы, около Боксов хранения резервной техники (теплый, холодный);  

- устранить повреждения фасадных конструкций (сэндвич) в боксах хранения  

резервной техники (теплый, холодный); 

- устранить нарушение высотного положения отметки отмостки, просадку отмостки  

(территория улицы, около Боксов хранения резервной техники (теплый, холодный);  

- устранить просадку тротуарной плитки рядом с АБЗ (административно-бытовым  

зданием); 

- устранить нарушения подачи горячего водоснабжения в административном здании  

и пожарном депо; 

- устранить нарушения технологии монтажа керамической плитки на стене в  

помещении теплового комплекса АБЗ (административно-бытовое здание); 

- установить водоотвод на уличной территории около АБЗ (административно-бытового здания);  

- устранить отхождение тротуарной плитки на входе в АБЗ (административно-бытовое здание);  

- устранить повреждения входной группы в АБЗ (административно-бытовом здании); - выполнить настройку автоматики во всех зданиях.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПМК - 7"  

в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТЕЛЬ" 6 000 руб. - расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья С.И. Кириченко