1 2027_2902442  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-13709/2016

г. Уфа

10 августа 2017 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой  И. Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Шитовой Э.И., рассмотрев дело по исковому заявлению  

МКУ Отдел ЖКХ Администрации ГО г.Стерлитамак (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ООО "Центр корпоративных решений", г.Уфа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третье лицо - ООО «Стройзаказчик», г.Стерлитамак  об обязании выполнить обязательства, взыскании 754 782 руб. 66 коп.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования МКУ Отдел ЖКХ Администрации ГО  г.Стерлитамак (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Обязать ООО "Центр корпоративных решений" выполнить в 30  дневный срок со дня вступления решения в законную силу на объекте  «Пешеходные галереи через ул.Худайбердина и Вокзальная в  г.Стерлитамаке» следующие работы:  

- осуществить замену поврежденного монолитного поликарбоната  толщиной S+4мм размерами 1050х8800мм, общей площадью 510,1 м2  

включая фасонные части и затраченные саморезы в соответствующем  количестве для его крепления, подлежащих 100% замене;  

- очистить поверхность ферм от краски и произвести покраску каркасов  пешеходной галереи в осях 4-1 при длине пролета L=25,6м и А-Г при длине  пролета L=30,2м. огнезащитной краской марки САЭ-56М (ТУ3212008- 2769171-2003) при толщине сухого слоя 1,7мм (послойно, три слоя с  промежуточной сушкой каждого слоя не менее 12 часов) общим объемом  190,0м2,  

- произвести ремонт гранитного покрытия ступеней входных групп,  общим объемом 1.35м2;  

- произвести окраску поврежденных коррозией металлических  элементов ступеней лестничных маршей – площадью 25,0м2;  

- восстановить панели, находящиеся на входными группами общей  площадью 3,5м2;  

- закрепить ограждения (перила) в соответствии с ГОСТ 4264-80  ручная дуговая сварка и ГОСТ 14771-76 дуговая сварка в защитном газе.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ООО "Центр корпоративных решений", г.Уфа (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева