80_9696807 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-98614/19

08 июня 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Е.М. Новиковой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.И.Смирновой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ОК" к ООО "ГРАДСТРОЙ" об обязании при участии – согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ГрадСтрой» в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в  законную силу устранить своими силами и за свой счет допущенные недостатки при  строительстве 7–9-ти этажного 2-х секционного многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, 

<

...>:, а именно выполнить следующие виды работ:  

1) установку люминесцентных энергосберегающих ламп с цоколем Е 27 в местах  освещения общедомовых помещений многоквартирного жилого дома, включая помещения  технического подполья, в количестве 355 штук согласно проектной документации № 12/2015.  

2) устройство в помещениях технического подполья пяти дренажных приямков  размерами 500*500*500мм, с установкой в каждый из них погружного дренажного насоса  МиниГНОМ Q= 7,0м3/ч, Н-7,0м.вод.ст. N=0,6кВт с присоединением к домовой канализации  путем прокладки напорного трубопровода из трубы 32*2,8 (черной), установкой запорного  вентиля и обратного клапана, а также устройством подъема и установкой сифона Ø50мм.  перед врезкой согласно проектной документации № 12/2015.  

3) демонтаж трубы, не присоединенной к инженерным коммуникациям жилого дома,  проложенной в месте прохода трубопроводов канализации через стены тех.подполья к сетям  наружной канализации, с заделкой отверстия после демонтажа и восстановлением  гидроизоляции стены технического подполья.  

4) устройство рядового покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в 3  слоя, устройство дополнительного слоя в местах примыканий кровли к парапетным стенам,  вентканалам, кирпичным стенам и иным вертикальным поверхностям, с выполнением  демонтажа существующего покрытия и устранением дефектов основания кровельного  пирога (включая скрытые дефекты плоской совмещенной кровли), устройство свесов кровли,  окантовки парапетных стен из оцинкованного листового металла с креплением кровельными  саморезами с резиновой прокладкой с шагом не более 600 мм., устройство кладки  

вентканалов с выступами верхних рядов кирпичной кладки от стен вентканалов для  обеспечения водоотвода, устройство узлов водосточных воронок с увеличением уклона к  воронкам в радиусе 500мм. с устройством системы кабельного электрического обогрева  внутреннего водостока в соответствие с проектной документацией № 12/2015 и СП  17.13330.2011.  

Взыскать с ООО "ГРАДСТРОЙ" в пользу ООО "ОК" 6 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в