АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Решение

Дело № А03-3409/2020

г. Барнаул

24 августа 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2020 года. Полный текст решения изготовлен 24 августа 2020 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Транссвет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,

к Администрации Панкрушихинского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Панкрушиха,

о взыскании 152 728 руб. 47 коп. задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по установке светофоров и нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в с. Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края № 03173000613190000020001 от 23.05.2019, в том числе 144 922 руб. основного долга и 7 806 руб. 47 коп. пени,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Управления Администрации Панкрушихинского района Алтайского края по экономическому развитию и имущественным отношениям (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Панкрушиха,

Управления федерального казначейства по Алтайскому краю (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, уведомлен надлежащим образом, 

от ответчика – не явился, уведомлен надлежащим образом,

от третьих лиц – не явились, уведомлены надлежащим образом,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Транссвет» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к Администрации Панкрушихинского района Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании о взыскании 151 298 руб. 57 коп. задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по установке светофоров и нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в с. Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края № 03173000613190000020001 от 23.05.2019 (далее контракт), в том числе 144 922 руб. основного долга и 6 376 руб. 57 коп. пени.

Исковые требования обоснованны статьями 309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору.

К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Управление Администрации Панкрушихинского района Алтайского края по экономическому развитию и имущественным отношениям, Управление федерального казначейства по Алтайскому краю.

Стороны в судебное заседание не явились. Ответчик отзыв на исковое заявление не предоставил. В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены надлежащим образом, в связи с чем, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Третье лицо представило ходатайство о замене ненадлежащего ответчика.

Определением от 04.06.2020 произведена процессуальная замена ответчика.

Исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные истцом в обоснование своих требований, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Гражданские правоотношения между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) возникли из контракта, в соответствии с условиями которого, подрядчик обязуется выполнить работы по установке светофоров и нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в с. Павнкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края. В соответствии с техническим заданием заказчика определяющим объем и содержание работ, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

Согласно пункту 1.6 контракта срок выполнения работ – с момента заключения контракта в течение 20 календарных дней. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ заказчиком (пункт 1.7 контракта).

Пунктом 2.1 контракта цена контракта составляет 349 000 руб., в том числе НДС 20 % -58 166 руб. 67 коп. включает в себя все затраты подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе на закупку , доставку материалов и оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В соответствии с пунктом 2.3 контракта оплата за выполнение работы производится в течение 30 календарных дней безналичным путем (путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика) с даты получения счета, счета-фактуры от подрядчика, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Истец выполнил обязательства предусмотренные контрактом в полном объеме, что подтверждается универсальным передаточным документом, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, актом о приемки выполненных работ, актом сверки, подписанными ответчиком без замечаний (л.д. 13-16).

Поскольку ответчик оплату за выполненные работы  в полном объеме не произвел, у него образовалась задолженность в размере 144 922 руб.

Претензия, направленная в адрес ответчика, оставлена без ответа.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате послужило основанием для предъявления настоящего иска.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных работ в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации производится заказчиком в сроки и в порядке, которые установлены договором  подряда. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Факт выполнения истцом работ, наличие и размер задолженности ответчика подтверждаются контрактом, универсальным передаточным документом, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, актом о приемки выполненных работ, актом сверки, подписанными ответчиком без замечаний, доводами истца, содержащимися в исковом заявлении и отсутствием возражений со стороны ответчика. 

Согласно статьям 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 5.3.2 контракта предусмотрено начисление неустойки (пени) за просрочку оплаты в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от неуплаченной в срок суммы.

Ответчик допустил просрочку в оплате, в связи с чем, требование о взыскании неустойки, начисленной на задолженность, суд находит законным.

Истец начислил ответчику неустойку за период с 15.07.2019 по 10.03.2020 в размере 6 376 руб. 57 коп. Расчет судом проверен и признан правильным. Произведенный истцом расчет, права ответчика не нарушает. 

Согласно статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Ответчик не представил доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Ответчик отсутствие вины не доказал. Оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации у арбитражного суда не имеется.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Ответчик не оспорил заявленные истцом требования, несогласие ответчика с требованием о взыскании задолженности из материалов дела не усматривается. Доказательств уплаты долга ответчик суду не предоставил.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования  заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).  

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом, при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 5 582 руб.  

После подачи иска истец уменьшил исковые требования в связи с чем, государственная пошлина в размере 43 руб. подлежит возврату истцу на основании пункта 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина в размере 5 539 руб., подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в возмещение его расходов.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

взыскать с Администрации Панкрушихинского района Алтайского края в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транссвет» 151 298 руб. 57 коп. задолженности, в том числе 144 922 руб. основного долга и 6 376 руб. 57 коп. неустойки за период с 15.07.2019 по 10.03.2020, а также 5 539 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Транссвет» из федерального бюджета 43 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 269 от 11.03.2020.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Разъяснить сторонам, что в силу положений части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Судья                                                                                                 В.Н. Прохоров