Арбитражный суд Тамбовской области

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

http://tambov.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А64-7501/2023

12 декабря 2023года

г. Тамбов

Резолютивная часть решения объявлена 05.12.2023г.

В полном объеме решение изготовлено 12.12.2023г.

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи  Н.Ю. Макаровой 

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи помощником судьи О.И. Долгополовым 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

Администрации города Уварова Тамбовской области, г.Уварово Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ООО «Дорспецстрой», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 

об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом ;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Администрация города Уварова Тамбовской области, г.Уварово Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО «Дорспецстрой», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) об устранении недостатков работ, выполненных ими в соответствии с п1.1 ст.1 муниципального контракта № 51 от 28.09.2020г., возникшие в период действия гарантийного срока, предусмотренного п.11.1 ст.1 Контракта, а именно:

- устранить повреждения в виде проседания асфальтового покрытия тротуара в городе Уварово Тамбовской области по ул.Шоссейная (левая сторона) от ул.Интернациональная до ул.Ленинская.

В процессе рассмотрения спора истцом уточнены требования. Истец просит суд обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСПЕЦСТРОЙ" безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в соответствии с п. 1.1 статьи 1 муниципального контракта № 51 от 28.09.2020 года, возникшие в период действия гарантийного срока, предусмотренного п. 11.1 статьи 11 Контракта, а именно:

- устранить повреждения в виде проседания асфальтового покрытия тротуара в городе Уварово Тамбовской области по ул. Шоссейная (левам сторона) от ул. Интернациональная до ул. Ленинская в срок до 1 июля 2023 года.

Судом принято уточнение истцом исковых требований (ст. 49 АПК  РФ).

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания по настоящему делу, своих представителей в судебное заседание не направили.

Согласно ст. 156 АПК РФ судебное разбирательство проводится в отсутствие представителей сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

28 сентября 2020 года между Администрацией города Уварово Тамбовской области, именуемой в дальнейшем - Истец, в лице главы города Уварово ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью "ДОРСПЕЦСТРОЙ", именуемым в дальнейшем — Ответчик в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, по итогам проведения электронного аукциона (протокол единой комиссии №0164200003020002542 от 17.09.2020), заключили МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 51 (далее - Контракт).

По условиям Контракта, Ответчик принял на себя обязательство выполнить ремонт тротуаров в г, Уварово Тамбовской области, далее - Работы, в объеме Локального сметного расчета (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту), являющихся его неотъемлемой частью, а Истец обязался принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 7.1 статьи 7 Контракта Ответчик гарантировал выполнение всех Работ с надлежащим качеством, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту), в полном соответствии с требованиями Локального сметного расчета (приложение №1 к Контракту). Так же, согласно п. 7.4 и 7.5 Статьи 7 Контракта, гарантировал выполнение в полном объеме всех своих обязательств, в том числе - своевременное устранение по требованию заказчика выявленных недостатков и дефектов в работе, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке выполненных работ, а также в течение гарантийного срока своими средствами за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Истца информации об обнаружении таких недостатков.

Ответчик исполнил свои обязательства, относительно объема выполненных работ, а Истец принял и оплатил их в соответствии с условиями Контракта, что истец подтверждает актами формы КС-2и КС-3.

Согласно п. 11.1 статьи 11 Контракта срок действия гарантийных обязательства на выполненные работы: 4 года со дня подписания акта выполненных работ.

Обнаружившиеся в течение этого срока недостатки, связанные с ненадлежащим качеством Работ, должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком,

В ходе эксплуатации тротуаров в г. Уварова Тамбовской области, в период течение гарантийного срока, Истцом были выявлены недостатки. 

В соответствии с п. 14.1 статьи 14 Контракта все спорные вопросы, возникающие при его исполнении, решаются Сторонами путем переговоров.

Истец направил в адрес Ответчика претензию от 30.05.2023 года с исх. №2183, в которой просил Ответчика устранить указанные выше недостатки в срок до 22.06.2023 года.

Претензия была направлена Ответчику по электронной почте на адрес ответчика. Данная претензия была оставлена Ответчиком без ответа, а указанные в ней требования без удовлетворения.

Истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском с учетом уточнения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению. При этом суд руководствовался следующим. 

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- также Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Как следует из материалов дела,  28 сентября 2020 года между Администрацией города Уварово Тамбовской области и Обществом с ограниченной ответственностью "ДОРСПЕЦСТРОЙ" по итогам проведения электронного аукциона (протокол единой комиссии №0164200003020002542 от 17.09.2020), заключили МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 51 (далее - Контракт).

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из Контракта, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда, а также Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ (в редакций, действовавшей на момент спорных правоотношения), под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу ст. 737 ГК РФ в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

В соответствии с п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившимися результат  работы,  или  с  иными  недостатками,   которые  делают  его  не   пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлен законом или договором, потребовать от подрядчика, в том числе безвозмездного устранена недостатков в разумный срок.

Ответчик исполнил свои обязательства, относительно объема выполненных работ, а Истец принял и оплатил их в соответствии с условиями Контракта, что истец подтверждает актами формы КС-2и КС-3.

Согласно п. 11.1 статьи 11 Контракта срок действия гарантийных обязательства на выполненные работы: 4 года со дня подписания акта выполненных работ.

Суд приходит к выводу, что  повреждения в виде проседания асфальтового покрытия тротуара в городе Уварово Тамбовской области по ул. Шоссейная (левая сторона) от ул. Интернациональная до ул. Ленинская, материалами дела доказана, и ответчиком не оспорены.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком документы истца не оспорены. Опровергающие доводы истца документы не представлены.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Представленные по делу и исследованные судом доказательства и установленные обстоятельства, согласно заявленных оснований, предмета иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

По изложенным обстоятельствам и на основании указанных норм закона требования по иску правомерны.

Согласно ст. 110 АПК РФ госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, 

 

СУД  РЕШИЛ:

 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСПЕЦСТРОЙ" безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в соответствии с п. 1.1 статьи 1 муниципального контракта № 51 от 28.09.2020 года, возникшие в период действия гарантийного срока, предусмотренного п. 11.1 статьи 11 Контракта, а именно:

- устранить повреждения в виде проседания асфальтового покрытия тротуара в городе Уварово Тамбовской области по ул. Шоссейная (левам сторона) от ул. Интернациональная до ул. Ленинская в срок до 1 июля 2023 года.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСПЕЦСТРОЙ", 

<

...> (ОГРН 

<

***>, дата регистрации  05.06.2019, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6000руб.

Истцу (по заявлению), налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению.

 

Судья                                                                        Макарова Н.Ю.