АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, 

<

...>

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6896/2025

г. Чебоксары

04 февраля 2026 года

Резолютивная часть решения вынесена 21 января 2026 года.

Полный текст решения изготовлен 04 февраля 2026 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Павловой О.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гурьевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа, г. Цивильск

к обществу с ограниченной ответственностью «Канцэнерго», м.о. ФИО1, Чувашская Республика – Чувашия

о взыскании 1 182 112 руб. 76 коп.,

при участии: не участвовали, извещены надлежащим способом,

установил:

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» (далее – ООО «Канцэнерго», Общество, ответчик) о взыскании 1 182 112 руб. 76 коп.

Исковое заявление мотивировано тем, что ответчиком не исполнено решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 22.08.2024 по делу № А79-5337/2024, которым было удовлетворено исковое заявление администрации Цивильского муниципального округа о возложении на ООО «Канцэнерго» обязанности устранить в рамках гарантийных обязательств недостатки и дефекты выполненных работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Зеленая д.ФИО2 (от дома № 4 до дома № 26А).

Длительное неисполнение судебного акта ООО «Канцэнерго» привело Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа к необходимости заключить с ООО «Строитель» муниципальный контракт от 31.07.2025 на ремонт участка по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома № 8 до дома № 23) Цивильского

муниципального округа на сумму 599 208 руб. 87 коп., а также с ООО «Строитель Поволжья» муниципальный контракт от 07.07.2025 № 07-07 на ремонт участка автодороги по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома № 23 до дома № 33) Цивильского муниципального округа на сумму 582 903 руб. 89 коп.

Определением суда от 14.10.2025 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Строитель», общество с ограниченной ответственностью «Строитель Поволжья».

Определением суда от 24.11.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

Лица, участвующие в деле, о дате и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие данных лиц.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Обстоятельства дела свидетельствуют, что 28.07.2021 между администрацией Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики (заказчиком) и ООО «Канцэнерго» (подрядчиком) заключен муниципальный контракт № 380-21/112 на ремонт грунтовой дороги в д.ФИО2 Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района (ИКЗ 21 32115903080211501001 0006 003 4211 244). Предметом контракта являются обязательства подрядчика, связанные с выполнением работ по ремонту грунтовой дороги в д.ФИО2 Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района в соответствии с Техническим заданием на сумму 4 610 104 руб. 80 коп.

Разделом 7 муниципального контракта № 380-21/112 предусмотрено, что подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ (пункт 7.1 муниципального контракта).

Срок гарантии на выполняемые работы составляет 3 года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. Срок гарантии на материалы и оборудование определяется в соответствии с гарантийным сроком, установленным заводом-изготовителем (пункт 7.2 муниципального контракта).

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил (пункт 7.3 муниципального контракта).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов (пункт 7.4 муниципального контракта).

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня подписания указанного в пункте 7.4 акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика (пункт 7.5 муниципального контракта).

Из акта осмотра от 06.06.2024 следует, что проведенным инструментальным обследованием с использованием технического средства Рейка дорожная универсальная РДУ-КОНДОР, 50111-18 № 7845 (Свидетельство о поверке № С-АР/04-10-2023/283802497 до 03.10.2024) установлено, что на покрытии проезжей части автомобильной дороги по ул. Зеленая в д.ФИО2 Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (от дома № 4 до дома № 26А) выявлены недостатки дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, проломов и колейности размерами:

- длиной – 3,7 м, глубиной – 6,5 см, шириной – 3 м;

- длиной – 2,5 м, глубиной – 10 см, шириной – 90 см; - длиной – 5,8 м, глубиной – 11 см, шириной – 90 см; - длиной – 6,7 м, глубиной – 12 см, шириной – 3,5 м, общей площадью более 5,2 м².

В рамках дела № А79-5337/2024 администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» об обязании устранить вышеуказанные недостатки работ и взыскании 5000 руб. штрафа.

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в виде резолютивной части от 22.08.2024 по делу № А79-5337/2024 общество с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» обязали устранить недостатки дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, проломов и колейности размерами:

- длиной 3,7 м., глубиной 6,5 см, шириной 3 м, - длиной 2,5 м., глубиной 10 см, шириной 90 см, - длиной 5,8 м., глубиной 11 см, шириной 90 см, - длиной 6,7 м., глубиной 12 см, шириной 3,5 м

на покрытии проезжей части автомобильной дороги по ул. Зеленая в д. ФИО2 Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (от дома № 4 до дома № 26А) в порядке исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 28.07.2021 № 380-21/112 в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Также с общества с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» в пользу администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики взыскано 5 000 руб. штрафа, установленного п.п. б) пункта 8.8 контракта.

Данное решение обжаловано не было и вступило в законную силу. Решение суда ООО «Канцэнерго» не исполнено по настоящее время.

В соответствии с пунктом 1.2 Положения об Управлении по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 27.01.2023 № 10-15 (далее – Положение), Управление по благоустройству и развитию территорий

администрации Цивильского муниципального округа является отраслевым (функциональным) органом администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (структурным подразделением администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики), учреждено в форме муниципального казенного учреждения и обладает правами юридического лица.

Раздел II Положения устанавливает основные задачи Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. Основными задачами Управления являются:

2.1.1. Организация работы в сфере благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

2.1.2. Обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на территории муниципального округа.

2.1.3. Реализация полномочий и осуществление необходимых действий по решению вопросов местного значения муниципального округа в рамках компетенции Управления.

2.1.4. Развитие инфраструктуры на территории округа, в т.ч. инженерной: сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, связи, дорожно-транспортных коммуникаций.

Согласно статье 397 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Длительное неисполнение ответчиком требований вышеуказанного решения Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в виде резолютивной части от 22.08.2024 по делу № А79-5337/2024 привело Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа к необходимости заключения новых муниципальных контрактов с другими организациями для устранения соответствующих недостатков.

Так, 07.07.2025 между Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа (заказчиком) и ООО «Строитель Поволжья» (подрядчиком) заключен муниципальный контракт № 07-07 на ремонт участка автодороги по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома 23 до дома 33) Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, по условиям которого заказчик передает, а подрядчик принимает обязательства на выполнение работ по ремонту участка автодороги по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома 23 до дома 33) Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Объект) в соответствии с локальной сметой (приложение № 1 к контракту) (пункт 1.1 муниципального контракта).

Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 582 903 руб. 89 коп. (пункт 2.1 данного муниципального контракта).

Оплата работ по настоящему контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем контракте на основании подписанных сторонами акта (актов) о приемке выполненных работ (этапов выполненных работ) формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры (счета)в течение 7 рабочих дней при условии, что работы выполнены подрядчиком надлежащим образом в согласованные сроки, предусмотренные настоящим контрактом (пункт 2.2 данного муниципального контракта).

31.07.2025 между Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа (заказчиком) и ООО «Строитель» (подрядчиком) заключен муниципальный контракт на ремонт участка автодороги по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома 8 до дома 23) Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, по условиям которого заказчик передает, а подрядчик принимает обязательства на выполнение работ по ремонту участка автодороги по улице Зеленая в деревне ФИО2 (от дома 8 до дома 23) Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Объект) в соответствии с локальной сметой (приложение № 1 к контракту) (пункт 1.1 муниципального контракта).

Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 599 208 руб. 87 коп. (пункт 2.1 муниципального контракта).

Оплата работ по настоящему контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем контракте на основании подписанных сторонами акта (актов) о приемке выполненных работ (этапов выполненных работ) формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры (счета) в течение 7 рабочих дней при условии, что работы выполнены подрядчиком надлежащим образом в согласованные сроки, предусмотренные настоящим контрактом (пункт 2.2 муниципального контракта).

Во исполнение обязательств по муниципальным контрактам от 07.07.2025 № 07-07, от 31.07.2025 ООО «Строитель Поволжья» и ООО «Строитель» выполнили работы, в подтверждение в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ (л.д. 6, 10).

Ссылаясь на привлечение заказчиком для устранения недостатков других организаций с возмещением своих расходов за счет подрядчика ООО «Канцэнерго» в порядке пункта 7.5 муниципального контракта от 28.07.2021 № 380-21/112, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пункт 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

В пункте 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Названная норма предусматривает презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и предполагает безвозмездное устранение подрядчиком недостатков в выполненных работах в случае доказанности факта допущенного подрядчиком отступления от требований нормативно-технической, проектной документации или условий договора.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанных норм основанием для оплаты выполненных работ является фактическое выполнение предусмотренных договором подряда работ и их передача заказчику.

Факт выполнения другими организациями ООО «Строитель Поволжья» и ООО «Строитель» работ в рамках муниципальных контрактов от 07.07.2025 № 07-07, от 31.07.2025 на общую сумму 1 182 112 руб. 76 коп. подтверждается актами о приемке выполненных работ от 07.08.2023 № 1, от 04.08.2025 № 1, справками стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2025, от 04.08.2025.

Наличие задолженности в размере 1 182 112 руб. 76 коп. ответчик не оспорил, доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункт 7.5 муниципального контракта от 28.07.2021 № 380-21/112, не представил.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании суммы задолженности в размере 1 182 112 руб. 76 коп. подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 182 112 руб. 76 коп. (Один миллион сто восемьдесят две тысячи сто двенадцать рублей семьдесят шесть копеек) основного долга.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Канцэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 60 463 руб. (Шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят три рубля) государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Л. Павлова