АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-5669/17

г. Уфа

26 июля 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 июля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 26 июля 2017 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе  судьи Воронковой Е.Г., при ведении протокола  секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО "СФ № 2" ОАО "Трест СТС" (ОГРН: 

<

***>) 

к ООО "Стерлитамакстрой» (ОГРН: 1060268026807)

о взыскании 17896747 руб. 06 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 директора общества

от ответчика – ФИО3 представителя по дов. № 150 от 27.03.2017

       ООО "СФ № 2" ОАО "Трест СТС" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "Стерлитамакстрой о взыскании 19 876 051 руб. 86 коп. суммы долга, 1 715 030 руб. 29 коп. сумму пени, 546 637 руб. 32 коп. суммы расходов по оплате вынужденного простоя.          

      21.06.2017 от истца поступило заявление об уменьшении исковых требований в части суммы долга до 17 896 747 руб. 06 коп. в связи с оплатой после возбуждения производства по делу, а также уменьшение иска в части пени до 1 695 236 руб. 08 коп.

Уменьшение иска судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

           В судебном заседании представитель истца заявил об отказе от части исковых требований в части суммы пени в размере 1 695 236 руб. 08 коп. и в части 546 637 руб. 32 коп. суммы расходов по оплате вынужденного простоя

            Производство по делу в данной части требований подлежит прекращению, о чем вынесен отдельный судебный акт.

Представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель истца сумму долга признал.

Исследовав представленные доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

08 февраля 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная фирма № 2 ОАО «Трест Стерлитамакстрой» (сокращенное название - ООО «СФ № 2 ОАО «Трест СТС») (далее - Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Стерлитамакстрой» (далее - Ответчик) был заключён договор подряда № 3 (далее - «Договор»).

В соответствии со статьёй 1.1. Договора ООО «СФ № 2 ОАО «Трест СТС» (далее - «Истец») приняло на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных   работ на объекте: «Жилой дом девятиэтажный четырехсекционный № 25 блок-секции А,Б,В,Г» расположенного по адресу: 

<

...> жилого района «Прибрежный».

В рамках этого Договора, Истцом была выполнена надлежащим образом большая часть строительно-монтажных работ на сумму 197 783 371,03 (Сто девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят один рубль три копейки), о чём свидетельствуют акты о приёмке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), и выставленные счета-фактуры.

На основании п.9.1 Договора оплата выполненных Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания форм КС-2, КОЗ и выставленной счёт - фактуры.

За время выполнения работ, Ответчиком, производилась оплата на сумму 177 907 319,17 (Сто семьдесят семь миллионов девятьсот семь тысяч триста девятнадцать рублей семнадцать копеек).

В результате образовалась задолженность Ответчика перед Истцом за Октябрь 2016г., Ноябрь 2016г., Декабрь 2016г., Январь 2017г. составляет 19 876 051,86 (девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят один рубль 86 копеек) о чем свидетельствует Акт сверки от 06.03.2017г.

Расчет суммы долга:

№№ п/п

дата

подтверждающие документы

Увеличение

суммы долга,

руб.

Уменьшен.

суммы долга,

руб.

Долг, руб.

1

2

3

4

5

6

1

30.06.2014г.

с.ф№ 159 от 30.06.14г.

167 895,04

167 895,04

2

31.07.2014г.

с.ф№ 221 от 31.07.14г.

1 499 048,49

1 666 943,53

3

31.08.2014г.

с.ф.№263от31.08.14г

2 196 408,75

3 863 352,28

4

30.09.2014г.

с.ф. №288 от 30.09.14г

3 249 137,08

7 112 489,36

5

31.10.2014г.

с.ф. №310; 314; 315; 316; 326 от 31.10.14г.

741 491,04

7 853 980,40

6

30.11.2014г.

с.ф. №№ 352; 354; 355; 356 от ЗОЛ 1.14г.

1 067 270,85

8 921251,25

7

31.12.2014г.

с.ф №392 от 31.12.14г.

1 603 341,52

10 524 592,77

8

31.01.2015г.

с.ф. №15 от 31.01.15г.

2 717 331,14

13 241 923,91

9

28.02.2015г.

с.ф. №№ 37; 38 от 28.02.15г.

3 757 197,88

16 999 121,79

10

30.04.2015г.

с.ф. №114; 115; 116; 122 от 30.04.15г.

5 535 675,00

22 534 796,79

11

с

14.05.2015г. по 29.05.2015г.

плат.поруч.№ 310 от 14.05.15г.; №329 от 27.05.15г.; №331 от 29.05.15г.

480 000,00

22 054 796,79

12

с

23.06,2015г. по 26.06.2015г.

плат.поруч. № 358 от 23.06.15г.; №365 от 24.06.15г.; №397 от 25.06.15г.; №411 от 26.06.15г.

3 727 460,06

18 327 336,73

13

30.06.2015г.

с.ф. №175; 176; 177; 178 от 30.06.15г.

5 652 081,86

23 979 418,59

Взаимозачёт № 19 от

14

30.06.2015г.

30.06.15г.

17 270 617,78

6 708 800,81

с

плат.поруч. № 431 от

01.07.2015г.

01.07.15г.; №432 от

по

02.07.15г.; №493 от

15

24.07.2015г.

24.07.15г.

1 500 000,00

5 208 800,81

с.ф.№208;209;210;

16

31.07.2015г.

211 от 31.07.15г.

4 633 902,48

9 842 703,29

плат.поруч. № 567 от

17

14.08.2015г.

14.08.15г.

100 000,00

9 742 703,29

с.ф.№259;260;261;

18

31.08.2015г.

262 от 31.08.15г.

5 891 047,34

15 633 750,63

плат.поруч. № 601 от

с

02.09.15г.; №614 от

02.09.2015г.

07.02.15г.; №634 от

по

16.09.15г.; №649 от

19

28.09.2015г.

28.09.15г.

1 575 000,00

14 058 750,63

с.ф. № 298; 299; 300;

20

30.09.2015г.

301 от 30.09.15г.

6 977 422,60

21 036 173,23

плат.поруч. № 667;

668 от 09.10.15г.; №

с

691 от 14.10.15г.; №

09.10.2015г.

706 от 20.10.15г.; №

по

717 от 23.10.15г.; №

21

27.10.2015г.

725 от 23.10.15г.

3 535 000,00

17 501 173,23

с.ф.№319;320;321;

22

31.10.2015г.

322 от 31.10.15г.

6 458 036,16

23 959 209,39

плат.поруч. № 737 от

05.11.15г.; №753 от

13.11.15г.; №756 от

05.11.2015г.-

17.11.15г.; №810 от

23

24.11.2015г.

24.11.15г.

11850 503,30

12 108 706,09

с.ф.№360;361;362;

24

30.11.2015г.

363 от 30.11.15г.

9 539 243,90

21 647 949,99

плат.поруч. №830 от

02.12.15г.; №840 от

08.12.15г.; №857 от

14.12.15г.; №868 от

17.12.15г.; №871; 872

от 21.12.15г.; №877;

02.12.2015г.-

876 от 23.12.15г.; №

25

30.12.2015г.

883 от 30.12.15г.

6 571 984,58

15 075 965,41

с.ф. № 384; 385; 386;

26

31.12.2015г.

387 от 31.12.15г.

14 075 508,46

29 151 473,87

плат.поруч.№ 29 от

25.01.2016г.-

25.01.16г.; №39 от

27|29.01.2016г.

29.01.16г.

1 351 500,00

27 799 973,87

28

с

12.02.2016г. по 16.02.2016г.

плат.поруч. № 51 от 12.02.16г.; №54 от 16.02.16г.

32 616,00

27 767 357,87

29

29.02.2016г.

с.ф. № 33; 34; 35; 36 от 29.02.16г.

13 078 207,86

40 845 565,73

30

с

01.03.2016г. по 28.03.2016г.

плат.поруч. № 29; 30 от 01.03.16г.; №77; 86 от 18.03.16г.; № 121 от 22.03.16г.; № 141 от 28.03.16г.

22 495 189,80

18 350 375,93

31

31.03.2016 г.

с.ф. № 52; 53; 54; 55 от 31.03.16г.

7 012 705,78

25 363 081,71

32

с

15.04.2016г. по 28.04.206г.

плат.поруч. № 171 от 15.04.16г.; №262 от 28.04.16г.

20 678 208,92

4 684 872,79

33

30.04.2016г.

с.ф.№ 75; 76; 77; 78 от 30.04.16г.

11466 533,18

16 151 405,97

34

с

06.05.2016г. по 27.05.2016г.

плат.поруч. № 285 от 06.05.16г.; №311 от 16.05.16г.; №320 от 23.05.16г.; №336 от 27.05.16г.

12 650 000,00

3 501 405,97

35

31.05.2016 г.

с.ф. № 96; 97; 98; 99 от 31.05.16 г.

8 243 970,88

11745 376,85

36

с

01.06.2016г. по 24.06.2016г.

плат.поруч. № 368; 385; 388 от 01.06.16г.; №400 от 07.06.16г.; № 405 от 08.06.16г.; №5; 6 от 15.06.16г.; №19 от 24.06.16г.

5 690 000,00

6 055 376,85

37

30.06.2016г.

с.ф.№ 130; 131; 132; 133 от 30.06.16г.

12 103 907,82

18 159 284,67

38

с

08.07.2016г. по 18.07.2016г.

плат.поруч. № 30 от 08.07.16г.; №36 от 14.07.16г.; №64 от 15.07.16г.; №73 от 18.07.16г.

8 318 905,96

9 840 378,71

39

31.07.2016г.

с.ф. №151; 152; 153; 154 от 31.07.16г.

12 189 027,12

22 029 405,83

40

с

05.08.2016г. по 31.08.2016г.

плат.поруч. № 465 от 05.08.16г.; №475 от 11.08.16г.; №111 от 12.08.16г.; №487 от 26.08.16г.; №112 от 30.08.16г.; №130 от 31.08.16г.

10 855 000,00

11 174 405,83

41

31.08.2016г.

с.ф. №174; 175; 176; 177 от 31.08.16г.

15 282 613,06

26 457 018,89

Соглашение об

уступке № 1 от

42

05.09.2016г.

05.09.16г.

1 469 305,00

24 987 713,89

плат.поруч. № 137 от

06.09.16г.; №516 от

с

07.09.16г.; №529 от

06.09.2016г.

09.09.16г.; №536 от

по

14.09.16г.; №572 от

43

26.09.2016г.

26.09.16г.

7 609 379,96

17 378 333,93

с.ф.№198;199;200;

44

30.09.2016г.

201 от 30.09.16г.

15 300 588,00

32 678 921,93

с 12.10.2016г.

плат.поруч. № 597 от

по

12.10.16г.; №605 от

45

26.10.2016г.

26.10.16г.

650 000,00

32 028 921,93

с.ф.№ 222; 223; 224;

46

31.10.2016г.

225 от 31.10.16г.

11962 815,22

43 991 737,15

плат.поруч. № 621 от

с

10.11.16г.; №630 от

10.11.2016г.

17.11.16г.; №634; 641

по

от 23.11.16г.; №644 от

47

25.11.2016г.

25.11.16г.

129 000,00

43 862 737,15

с.ф. № 243; 244; 249;

250; 251; 252; 253 от

48

30.11.2016г.

30.11.16г.

13 006 623,16

56 869 360,31

Договор перевода

долга № 3 от

49

30.11.2016г.

30.11.16г.

3 415 234,10

53 454 126,21

АКТ о зачете требов.

50

30.11.2016г.

№ б/нот 30.11.16г.

8 096 826,10

45 357 300,11

плат.поруч. № 653 от

02.12.16г.; №146 от

08.12.16г.;№155;162

от 09.12.16г.; №665;

с

666 от 16.12.16г.; №

02.12.2016г.

674 от 26.12.16г.; №

по

677 от 27.12.16г.; №

51

29.12.2016г.

679 от 29.12.16г.

5 127 749,46

40 229 550,65

Соглашение об

уступке требов. № 2 от

52

26.12.2016г.

26.12.16г.

6 643 491,48

33 586 059,17

Соглашение об

уступке права № 5 от

52

30.12.2016г.

30.12.16г.

1 355 000,00

32 231059,17

АКТ взаимозачета №

53

30.12.2016г.

28 от 30.12.16г.

5 717 799,58

26 513 259,59

Договор перевода

долга № 4 от

54

31.12.2016г.

31.12.16г.

556 980,00

25 956 279,59

АКТ взаимозачета №

55

30.12.2016г.

1 от 31.12.16г.

6 191 372,00

19 764 907,59

с.ф.№ 278; 279; 280;

56

31.12.2016г.

281 от 31.12.16г.

1 880 258,02

21 645 165,61

плат.поруч. № 5 от

с

13.01.17г.; №10 от

13.01.2017г.

18.01.17г.; № 24; 25от

по

30.01.17г.; №34 от

57

31.01.2017г.

31.01.17г.

204 600,00

21 440 565,61

58

31.01.2017г.

С.ф.№ 15 от 31.01.17г.

494 081,34

21934 646,95

плат.поруч. № 41; 43

от 03.02.17г.; №49;

с

57; 58 от 09.02.17г.; №

03.02.2017г.

59 от 17.02.17г.; №81

по

от 27.02.17г.; №89 от

59

28.02.2017г.

28.02.17г.

2 058 595,09

19 876 051,86

ИТОГО:

197 783 371,03

177 907 319,17

19 876 051,86

« 06 » февраля 2017г. в адрес Ответчика за исх. № 10/ф от 06.02.2017г. было доставлено письмо о приостановки дальнейшего выполнения работ из-за возникшей длительной задолженности у Истца по выплате заработной платы и предложением добровольно оплатить задолженность Ответчика. Данное письмо осталось без ответа.

Истцом была направлена претензия № 20 от 17.02.2017 г. по выплате денежных средств по Договору, однако она также осталась без ответа.

Ответчик произвел частичную оплату суммы долга в размере 816 222, 83 коп. по платежным поручениям:

№ 97 от 09.03.2017, № 104 от 13.03.2017, №106 от 15.03.2017, 

№ 107 от 15.03.2017, № 164 от 07.04.2017, № 165 от 07.04.2017, 

№ 171 от 11.04.2017, № 170 от 11.04.2017. Кроме того, 17.04.2017 между сторонами заключено Соглашение об уступке права требования (цессии) № 7 на сумму 1 297 451, 51 руб. 

Таким образом, сумма долга составляет 17 896 747 руб. 06 коп., которая подтверждается двусторонним актом сверки на 24.05.2017.  

Проанализировав условия представленного договора, суд приходит к выводу, что между сторонами возникли отношения по договору подряда, регулируемые Главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также да выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 740 ГК РФ).

                В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору у подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором , подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Поскольку исследуемый договор содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части  3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком документов, подтверждающих факт оплаты выполненных работ, как и обоснованных возражений против заявленных требований не представлено, иным способом доводы истца не опровергнуты. В отзыве на исковое заявление с учётом уточнений, ответчик признал наличие задолженности в сумме 17896747 руб. 06 коп.

          Таким образом, исковые требования о взыскании долга в размере 17896747 руб. 06 коп.  законны, обоснованы, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "Стерлитамакстрой» (ОГРН: 

<

***>)

в пользу ООО "СФ № 2" ОАО "Трест СТС" (ОГРН: 

<

***>) 17896747 руб. 06 коп. сумму долга.

Взыскать с  ООО "Стерлитамакстрой» (ОГРН: 

<

***>)

в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 112483 руб. 74 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Е.Г. Воронкова