АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-7095/2022

г. Барнаул

20 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2022 года.

Полный  текст решения изготовлен 20 октября 2022 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Аринко», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 19 265 руб. 81 коп. пени, 

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 (доверенность, паспорт, диплом), после перерыва не явилась, извещена,

от ответчика: не явился, извещен,  

УСТАНОВИЛ:

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края» (далее – КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Аринко» (далее – ООО «Аринко», ответчик) о взыскании 19 265 руб. 81 коп. пени.

Исковые требования обоснованны статьями 309, 310, 329, 330, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением подрядчиком срока выполнения работ  по гражданско-правовому договору №081720000032101001/139-21ЭА от 30.08.2021.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв.

Заслушав пояснения истца до перерыва, исследовав материалы дела и представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

30.08.2021 между краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Диагностический центр Алтайского края» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Аринко» (пдрядчик)  заключен гражданско-правовой договор №081720000032101001/139-21ЭА, согласно условиям которого подрядчик обязался своевременно по заданию заказчика выполнить на условиях договора работу по капитальному ремонту подвального этажа КГБУЗ  «Диагностический центр Алтайского края» в соответствии с проектной документацией (приложение №1 к договору) и технической документацией (приложение №4) в сроки, указанные в договоре, и сдать результат работы заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена составляет 2 344 723 руб. 45 коп.

Согласно п.5.3 договора работа должна быть закончена в срок не позднее 90 дней со дня подписания договора.

Во исполнение условий договора ответчик выполнил работы на сумму 2 344 723 руб. 45 коп., что подтверждается универсальным передаточным документом №1 от 27.12.2021.

Нарушение подрядчиком срока выполнения подрядчиком работ послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Давая оценку отношениям, суд полагает, что между сторонами заключен договор подряда, к которому подлежат применению положения главы 37 Гражданского кодекса РФ, а также положения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013г. № 44 – ФЗ.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (ст.330 ГК РФ).

Согласно пунктам 9.2, 9.3 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случая неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере пени одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком.

По условиям договора работы должен быть выполнены не позднее 28.11.2021.

Согласно универсальному передаточному документу №1 от 27.12.2021 работы выполнены – 27.12.2021.

Истец за нарушение срока исполнения обязательств по договору предъявил требование о взыскании пени в размере 19 265 руб. 81 коп. за период с 29.11.2021 по 27.12.2021.

5% от цены договора составляют  117 236 руб. 17 коп., т.е. начисленная неустойка не превышает 5% от цены договора.

При этом в соответствии с частью 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

На основании указанной нормы Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила N 783).

Указанные Правила в силу пункту 1 Правил устанавливают порядок и случаи осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 списание неустойки осуществляется заказчиком в случае, если сумма начисленных пеней не превышает 5 процентов цены контракта. 

С учетом цены контракта 2 344723, 45 руб., пени за период с 29.11.2021 по 27.12.2021 составят 19 265 руб. 81 коп., что не превышает 5% от цены контракта. 

Основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном выше, является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 2021 году, подтвержденное актами приемки или иными документами (подпункт «а» пункта 5 Правил № 783).

Универсальный передаточный документ №1 от 27.12.2021 подтверждает факт выполнения работ по договору в полном объеме.

Таким образом, у истца имелись все основания для списания спорной суммы неустойки.

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 N 305-ЭС17-23242).

Постановление Правительства от 04.07.2018 № 783 направленно на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах путем финансовой поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Предоставление отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек является одной из мер поддержки поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

  С учетом того, что неустойка подлежала списанию, оснований для удовлетворения исковых требований суд не находит.

Поскольку в удовлетворении иска отказано, расходы по оплате госпошлины относятся на истца.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 27, 65, пунктом 3.1 статьи 70, 110, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                            Е.Н. Пашкова