Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-88265/25

08 декабря 2025 года

г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Г.А.Гарькушовой

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.А.Ларионовым

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ДЖС-2030» к ООО «СЗ «Монолит» о взыскании денежных средств При участии в судебном заседании представителей От истца - ФИО1 по дов. От ответчика - ФИО2 по дов.

Руководствуясь п.4 ч.1 и ч.2 ст.150, ст.ст.104, 110, 139-141, 151, 176, 184, 186 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «ДЖС-2030» и ООО «СЗ «Монолит» по делу № А41-88265/25 на следующих условиях:

«1. Стороны достигли соглашения о том, что Истец отказывается от части следующих исковых требований (с учётом условий заявления об изменении предмета иска от 05.11.2025г.) о выполнении работ по устранению дефектов/недостатков в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, ввиду их выполнения Ответчиком (подтверждается Актом об устранении дефектов/недостатков от 04.12.2025г.):

- выполнить работы по восстановлению отмостки со стороны нежилого помещения № 8 в местах провала – 2 кв.м.

2. Стороны достигли соглашения о том, что Ответчик обязуется в

срок до «31» мая 2026 года включительно выполнить следующие работы по

устранению дефектов/недостатков в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 

<

...>: - подтопление (протечки) из деформационного шва машино-места

№ 21, расположенного в паркинге 1 этажа;

- подтопление (протечки) помещения кладовой № 50; - подтопление (протечки) машино-места № 70;

- подтопление (протечки) машино-места № 82 в паркинге -1 этажа; - подтопление (протечки) машино-места № 83;

- подтопление (протечки) машино-места № 106;

- подтопление (протечки) в паркинге 1 этажа с отм. 0,00 м. в

пересечении осей Н/1-1, а также на отметке 0,00 м. в пересечении осей 10/1-С из деформационного шва;

- подтопление (протечки) из деформационного шва в паркинге -1

этажа, возле машино-мест № 89, № 90, расположенного под стилобатной

частью МКД;

- подтопление (протечки) нежилого помещения № 8; - подтопление (протечки) нежилого помещения 001; - продувание стен в квартире № 2 в помещении кухни; - продувание стен в квартире № 20 в помещении кухни и спальни;

- продувание стен в квартире № 253 в помещении спальни и

гостиной; - продувание стен в квартире № 305 в помещении кухни и спальни;

- выполнить работы по устранению отслаивания прижимной планки

на кровле многоквартирного дома в объёме 209,42 м.п.;

- закрепить незакрепленные верхние крепежные элементы оконных

блоков на техническом этаже 1 и 2 секции 2 шт. (оконные блоки);

- выполнить работы по отделке откосов оконных проемов на

техническом этаже 1 и 2 секции – 9,6 м.п. в местах их отсутствия;

- выполнить работы по восстановлению штукатурно-окрасочного

слоя на переходных балконах в местах отслоения (разрушения) – 82 кв.м.;

- выполнить работы по ликвидации трещин отделочных слоев в

лифтовых холлах, квартирных холлах МДК;

- выполнить работы по восстановлению отделочного слоя в месте

примыкания монолита и кладки, вход № 10;

- выполнить работы по восстановлению на стенах отделочного слоя

в местах проведенных гидроизоляционных работ методом инъектирования

вход № 3;

- выполнить работы по восстановлению разрушенной брусчатки на

придомовой территории в количестве 250 шт.;

- выполнить работы по восстановлению брусчатки входа № 10 в

месте вспучивания;

- выполнить работы по ликвидации течи, плесени в технических

помещениях, расположенных под рампой (паркинг -1 этаж) и их причин возникновения;

- выполнить работы по устранению нарушений технологии монтажа лотков водоотведения.

3. При заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату Истцу подлежит 70 (семьдесят) процентов суммы уплаченной им государственной пошлины на основании ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны предусматривают следующий порядок распределения судебных расходов: Ответчик возмещает Истцу понесенные Истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 000,00 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., что составляет 30% от уплаченной Истцом суммы государственной пошлины, остальная сумма в размере 35 000,00 (тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., что составляет 70% от уплаченной Истцом суммы государственной пошлины, подлежит возврату Истцу из бюджета (ст. 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации). Ответчик компенсирует Истцу в срок до «31» декабря 2025 года включительно путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам Истца:

Получатель платежа: ООО «ДЖС – 2030» Счет получателя: 40702810824414219931

Валюта счета: Рубли

Банк получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) БИК: 044525411

Корр. счёт: 30101810145250000411

Назначение платежа: оплата по мировому соглашению от 08.12.2025г. по делу № А41-88265/25.

4. Ответчик возмещает Истцу понесенные им судебные расходы в

виде расходов на оплату услуг представителя ФИО1 в размере

215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. в срок до «31» декабря

2025 года включительно путём перечисления денежных средств по

следующим банковским реквизитам Истца:

Получатель платежа: ООО «ДЖС – 2030» Счет получателя: 40702810824414219931

Валюта счета: Рубли

Банк получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) БИК: 044525411

Корр. счёт: 30101810145250000411

Назначение платежа: оплата по мировому соглашению от

08.12.2025г. по делу № А41-88265/25.

5. В случае невыполнения Ответчиком в срок до «31» мая 2026 года включительно работ, указанных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения, по устранению дефектов/недостатков в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, Ответчик уплачивает в пользу Истца неустойку в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения и до момента полного исполнения.

6. Стороны договорились и добровольно пришли к соглашению о том, что Истец, при условии исполнения Ответчиком настоящего мирового соглашения, далее не будет иметь никаких претензий к Ответчику в части исковых требований, указанных в исковом заявлении с учётом условий заявления об изменении предмета иска от 05.11.2025г. по делу № А41-88265/2025.».

2. Производство по делу прекратить.

3. В случае не исполнения ответчиком условий утверждённого судом мирового соглашения истец в порядке ст.142 АПК РФ вправе обратиться с ходатайством о выдаче исполнительного листа.

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ДЖС-2030», ОГРН 

<

***>, из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 35.000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок со дня его принятия.

Судья Г.А. Гарькушова