Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-63904/2020

10 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  10 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нетосов С.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» (адрес:  196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 

<

***>,);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ВИКИНГСТРОЙИНВЕСТ» (адрес:  197198, Санкт-Петербург, улица Зверинская, дом 17А, литер В, квартира 57, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2011, ИНН: 

<

***>);

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2 по довренности от 07.08.2020; 

- от ответчика: ФИО3 по довренности от 

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «ВИКИНГСТРОЙИНВЕСТ» (далее – ответчик) о взыскании 6 165,31 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения первого платежа по договору в период 18.02.2016 по 19.05.2016;  4 892,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения первого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.01.2018 по 09.07.2018; 2 252,46 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения третьего платежа по дополнительному соглашению в период с 11.07.2018 по 02.10.2019; 11 258,63 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.10.2018 по 25.11.2019; проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.10.2018 по дату фактического исполнения обязательства; 760 533,09 руб. неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период 03.02.2017 по 10.10.2017; 

Определением от 06.08.2020 возбуждено производство по делу, назначено предварительное и основное судебное заседание. 

Учитывая достаточность собранных по делу материалов, суд из предварительного заседания перешел к судебному разбирательству дела по существу в настоящем судебном заседании в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ.

В судебное заседание 11.02.2021 явились представители сторон. 

Истец поддержал исковые требования в редакции ходатайства об уточнении. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующему. 

Между ПАО «Ленэнерго» (Исполнитель) и ООО «ВИКИНГСТРОЙИНВЕСТ» (Заказчик)  заключен Договор № ОД-ВЭС-24279-15/29828-Э-15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2016.

Договор сторонами исполнен в полном объеме, в связи с чем подписан акт об осуществлении технологического присоединения № 242049 от 10.10.2017.

В соответствии с п. 10 раздела III договора стороны определили размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 26.12.2015 г. №526-п. 

Порядок внесения платежей установлен в п. 11 Договора.

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение, что составляет 296 311,59 руб., в том числе НДС 18% рублей, вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение, что составляет 592 623,19 руб., в том числе НДС 18% рублей, вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение, что составляет 888 934,78 руб., в том числе НДС 18% рублей, вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение, что составляет 197 541,06 руб., в том числе НДС 18% рублей, вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения;

В соответствии с п. 1 дополнительного соглашения от 12 июля 2018 г. Ответчик обязан в срок до 10 октября 2018 г. оплатить оказанные Истцом услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца в сумме 1 975 410,62 руб., в том числе НДС.

На момент подписания дополнительного соглашения Ответчиком было оплачено 1 438 934 руб., включая НДС. Оставшуюся сумму в размере 536 475 руб., включая НДС, Ответчик, согласно п. 1 дополнительного соглашения оплачивает в течение года равными платежами в сумме 134 118,96 руб. ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала: 10 января 2018 г., 10 апреля 2018 г., 10 июля 2018 г., 10 октября 2018 г.

В нарушение Ответчиком не исполнено обязательство по оплате последнего платежа в сумме 134 118,96 руб.. В связи с чем истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в общем размере 24 568,98 руб. 

По причине неоплаты задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также оставлением претензии № ВЭС/031/7624 от 22.11.2019 без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным  законом.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Учитывая, что ответчик нарушил обязательства по договору в части внесения платежей по договору , истец начислил неустойку  в следующем размере:

6 165,31 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения первого платежа по договору в период 18.02.2016 по 19.05.2016; 

 4 892,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения первого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.01.2018 по 09.07.2018;

2 252,46 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения третьего платежа по дополнительному соглашению в период с 11.07.2018 по 02.10.2019; 

11 258,63 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.10.2018 по 25.11.2019;

Суд, ознакомившись с представленным расчетом и условиями договора, установил, что истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в период 18.02.2016 по 19.05.2016 в размере 6 165,31 руб. на авансовый платеж, учитывая, что акт технологического присоединения был подписан 10.10.2017, в связи с чем в удовлетворении исковых требований в данной части полагает отказать по следующим обстоятельствам. 

Согласно п. 1 ст. 487 ГК РФ предварительная оплата представляет собой денежную сумму, уплаченную покупателем (заказчиком) продавцу (исполнителю, подрядчику) в размере полной и частичной стоимости товара (работы, услуги) до получения исполнения от контрагента. Согласно условиям договора оплата услуг технологического присоединения осуществляются 4 платежами в установленный срок в зависимости от совершения определенных сторонами действий. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 310-ЭС17-11570 по делу N А62-434/2016 по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861). 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон. Закон № 35-ФЗ, наделяя Правительство Российской Федерации правом устанавливать ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, обратившихся за технологическим присоединением, при просрочке внесения авансовых платежей. 

Действующее законодательство не позволяет взыскивать предварительную оплату по синаллагматическому (взаимному) договору, поскольку нарушение должником срока внесения предварительной оплаты влечет право кредитора по правилам пункта 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации приостановить свою часть исполнения или вовсе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации); возможность требования выплаты аванса в судебном порядке не установлена ни договором, ни законодательством в сфере регулирования технологического присоединения.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым отказать в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2016 по 19.05.2016, в остальной части суд полагает требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Абз.1 п. 8 договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом в определённый договором срок мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны согласовали в п.5 договора, в течение 12 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 02 февраля 2017 г.

В соответствии с абз.2 п.8 договора, Заявитель обязан направить уведомление в Сетевую организацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ его участка, после выполнения технических условий.

Абз.З пп. «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в редакции, действующей на дату заключения Договора (далее - Правила ТП), предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

10 октября 2017 г. стороны подписали акт об осуществлении технологического присоединения № 242049, которым подтвердили факт оказания услуги со стороны Сетевой организации по технологическому присоединению в полном объеме и без замечаний.

Размер неустойки, за период просрочки выполнения мероприятий по технологическому присоединению с 03.02.2017 г. по 10.10.2017 г. (дата подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения № 242049; 250 дней), составляет 760 533,09 руб. Расчет неустойки проверен судом признан правильным соответствующим условиям договора и нормам действующего законодательства. 

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИКИНГСТРОЙИНВЕСТ» в пользу публичное акционерное общество «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

4 892,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения первого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.01.2018 по 09.07.2018; 

2 252,46 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения третьего платежа по дополнительному соглашению в период с 11.07.2018 по 02.10.2019; 

11 258,63 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.10.2018 по 25.11.2019; 

проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку внесения четвертого платежа по дополнительному соглашению в период с 11.10.2018 по дату фактического исполнения обязательства; 

760 533,09 руб. неустойку за просрочку выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период 03.02.2017 по 10.10.2017; 

18 594 руб. расходов по оплате государственной пошлины; 

Возвратить публичному акционерному обществу «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» из федерального бюджета 2643 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №13294 от 28.11.2019.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Нетосов С.В.