АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-35291/2022

г.Нижний Новгород «20» июня 2025 года

Дата объявления резолютивной части решения «04» июня 2025 года

Дата изготовления решения в полном объеме «20» июня 2025 года   

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр дела 28-910),

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Караштиным Д.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "АВАНГАРД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

по встречному иску,

при участии представителей (до перерыва)

от истца: ФИО1 по доверенности,

от ответчика: не явился,

от третьего лица: не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (далее – ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС", истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о взыскании с Федерального казенного предприятия «Авангард» (далее – ФКП "АВАНГАРД", ответчик) 1336781 руб. 91 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договорам №06/12/2019 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019, 1140703 руб. 69 коп. неустойки за период с 15.01.2020 по 26.10.2022 и далее с 27.10.2022 по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы долга за каждый день просрочки (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Ответчик, третье лицо представили отзывы, приобщенные к материалам дела.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.02.2023 к производству принят встречный иск, в соответствии с которым ответчик просит взыскать с ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" в пользу ФКП "АВАНГАРД" неустойку по договору №06/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 472622 руб. 63 коп.; неустойку по договору №07/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 485876 руб. 13 коп.; неустойку по договору №08/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 545530 руб. 01 коп.; неустойку по договору №06/12/19 от 16.12.2019, договору №07/12/19 от 16.12.2019, договору №08/12/19 от 16.12.2019 за период с 14.02.2023 по день фактического исполнения денежного обязательства.

В судебном заседании 26.05.2025 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв. После перерыва рассмотрение дела было продолжено.

Стороны, третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку в суд после перерыва не обеспечили, что в силу статьи 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению спора. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Между ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" (далее - ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова») и ФКП "АВАНГАРД" были заключены следующие договоры №295/СОПР от 29.11.2019, №294/СОПР от 29.11.2019, №286/СОПР от 29.11.2019.

Согласно материалам дела, позиции ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»:

предметом договора №295/СОПР от 29.11.2019 является замена дверных блоков и ремонт кирпичной кладки в здании №2 (инв.№00591) цеха №19. Цена договора составила 3000464,4 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 2056915,2 руб., которая оплачена заказчиком в полном объеме, сторонами заключено соглашение о расторжении договора от 01.11.2021;

предметом договора №294/СОПР от 29.11.2019 является замена оконных блоков в здании №1 (инв.№00195) цеха №19. Цена договора составила 4417441,2 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 3501516 руб., которая оплачена заказчиком в полном объеме, между сторонами заключено соглашение о расторжении договора от 01.11.2021;

предметом договора №286/СОПР от 29.11.2019 является замена оконных и дверных блоков в здании №2 (инв. №00591) цеха №19. Цена договора составила 3729876 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 3491230,8 руб., которая оплачена заказчиком в полном объеме, сторонами заключено соглашение о расторжении договора от 01.10.2021.

В исполнение договорных обязательств перед ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», между ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) и ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) были заключены договоры №06/12/2019 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019 на выполнение строительно-монтажных работ.

Как следует из материалов дела, между ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) и ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) заключен договор от 16.12.2019 №06/12/19, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работу: «Замена дверных блоков и ремонт кирпичной кладки в здании №2 (инв.№ 00591) цеха №19 ФКП «Завода имени Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: 606002, г.Дзержинск, Нижегородская область, пр-т Свердлова, 4, в соответствии с условиями настоящего договора, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

Согласно пункту 1.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19 вид, объем, стоимость, требования и условия выполнения работ, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, определяются на основании документации:

- дефектной ведомости, с указанием вида и объема работ;

- локального сметного расчета (сметы), с указанием стоимости работ;

- локальной ресурсной ведомости, с указанием перечня ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

В силу пункта 2.1. договора от 16.12.2019 №06/12/19 общий срок выполнения работ по договору: с момента (даты) подписания договора до 25 декабря 2019 года.

Субподрядчик при исполнении договора, по согласованию с подрядчиком, имеет право досрочно или поэтапно выполнять работы и сдавать объект подрядчику (пункт 2.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

В силу пунктов 3.1.-3.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19 цена договора 2067993,26 руб., в том числе НДС 20% - 344665,54 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом №85/19. Цена договора включает в себя все виды расходов и издержек субподрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом настоящего договора, на приобретение материалов и оборудования, использование механизмов и транспорта, необходимых для выполнения работ, уплату налогов и сборов (в т.ч. НДС) и причитающееся ему вознаграждение.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (пункт 3.3. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

Согласно пункту 3.4. договора от 16.12.2019 №06/12/19 оплата работы осуществляется в следующем порядке: оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика. В течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего договора подрядчик перечисляет субподрядчику аванс в размере 30% от цены настоящего договора с учетом НДС 20% с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно акта приемки фактически выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы производится подрядчиком по факту выполнения работ, принятых подрядчиком без замечаний, на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и на основании выставленного субподрядчиком счета/счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.3, п.5 статьи 169 НК РФ с указанием реквизитов сторон в течение 30 календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм.

Обязательства подрядчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика. В случае изменения расчетного счета субподрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщит об этом подрядчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный расчетный счет, несет субподрядчик (пункт 3.6. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

Работы, выполненные субподрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, проектно-сметной документации подрядчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате подрядчиком до устранения субподрядчиком обнаруженных недостатков (пункт 3.7. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

В обязанности подрядчика согласно пунктам 4.1.1., 4.1.6., 4.1.7. договора от 16.12.2019 №06/12/19 входит:

- обеспечить предоставление субподрядчику объекта для выполнения работ, а также утвержденную техническую документацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения работы. Требовать от субподрядчика надлежащее исполнение обязательств по договору;

- по окончании выполнения субподрядчиком работ организовать и осуществить их приемку в срок и в порядке, установленные разделом 6 договора. Подрядчик имеет право требовать предоставление надлежащим образом оформленных документов по требованиям подрядчика, надлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями договора;

- обеспечить оплату выполненных субподрядчиком работ на условиях договора и соответствии с разделом 3 договора.

В обязанности субподрядчика согласно пунктам 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.15, 4.2.16., 4.2.28., 4.2.30, 4.2.31 договора от 16.12.2019 №06/12/19 входит:

- принять объект для выполнения работ. Предоставить подрядчику график производства работ;

- выполнить работу из своих материалов (основных и вспомогательных) или/и материалов подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), при помощи своего оборудования (механизмов, транспорта) или/и подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), своими силами и средствами в течение срока, установленного настоящим договором. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами (далее по тексту — СНиП), сводами правил (далее по тексту - СП), ГОСТ и др.;

- обеспечить безопасность выполнения работ и выполнение требований безопасности для жизни и здоровья работников ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и его имущества, охраны окружающей среды. Требования осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006г. №230-Ф3; Федерального закона от 21,12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- обеспечить во время производства работ на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей среды, в т.ч. требований к зеленым насаждениям и земельным участкам, и требований пропускного режима, установленного на предприятии;

- обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении условий договора. При этом субподрядчик несёт полную ответственность за выполнение своими работниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, требований промышленной и пожарной безопасности, а так же требований пропускного режима, установленного на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора направить работников для прохождения инструктажа в соответствии порядком, установленным на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения инструктажа и пропусков запрещается. Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения вводного инструктажа, нарядов - допусков и других необходимых оформленных разрешений на допуск к работам запрещается;

- по требованию Подрядчика отстранять от работы работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности;

- субподрядчик обязан поставить в известность Подрядчика об инцидентах, авариях, несчастных случаях на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», порче имущества ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Подрядчику ущерб, нанесённый по вине Субподрядчика;

- технология и качество выполняемых работ, применяемых материалов, комплектующих и оборудования должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, СП, ГОСТ);

- материалы для выполнения работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Требования о наличии сертификатов/декларации соответствия в отношении указанной продукции установлено перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». По качеству материалы должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, ОСТ; материалы должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности; все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, лабораторные анализы, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; До начала выполнения Работ, монтажа оборудования и на всех этапах выполнения работ по требованию Подрядчика предоставлять сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых и поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования. Приемка поставленного Субподрядчиком оборудования для производства монтажных работ производится на территории ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» на основании оформленного Сторонами Акта входного контроля. Доставка материалов и оборудования до площадки ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» осуществляется за счет Субподрядчика;

- обеспечить оптимальные качественные характеристики результата работ, в том числе по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением;

- организовывать и участвовать в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных), оборудования и механизмов при их приемке. Участвовать в промежуточной приемке и освидетельствовании скрытых работ на основании актов;

- осуществлять контроль и координацию оформления исполнительной документации: актов, исполнительных схем, исполнительных съемок, удостоверений, паспортов, свидетельств и сертификатов, необходимых для сдачи-приемки завершенного строительством Объекта в эксплуатацию. При приемке Работ предоставлять исполнительную документацию, оформленную в соответствии СНиП, СП, ГОСТ и других, обязательных к исполнению на территории РФ норм и правил по Акту приема-передачи. Отсутствие или не предоставление исполнительной документации Подрядчику является нарушением условий договора и является отказом в приемке выполненных работ.

Согласно пунктам 4.2.36., 4.2.36.1., 4.2.36.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19 при исполнении договора изменяется объем работ, услуг:

- в случае, если в процессе (во время) производства работ возникла необходимость в дополнительных работах (или непредвиденных работах), которые не вошли в основной объем Работ по настоящему договору, Субподрядчик направляет Подрядчику уведомление, оформленное в письменном виде. Подрядчик в течение трех рабочих дней принимает решение о необходимости проведения дополнительных работ путем оформления Акта на дополнительные работы. Выполнение работ производится только после согласования Акта на дополнительные работы, а так же подписания дополнительного соглашения к настоящему договору;

- в случае, если в процессе исполнения договора изменяются объёмы работ в сторону уменьшения и (или) отсутствует дальнейшая необходимость в выполнении работ стороны договора инициируют подписание дополнительного соглашения/соглашения в части соразмерного уменьшения объёмов работ и цены договора.

Согласно пункту 6.1. договора от 16.12.2019 №06/12/19 по окончанию работ субподрядчик уведомляет подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Вместе с уведомлением Субподрядчик представляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в двух экземплярах (или по иным формам согласно действующему законодательству РФ и оформленными в соответствии с требованиями, установленными на ФКП «Авангард»). А так же Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчетную документацию: Отчет об использовании материалов Подрядчика (если при производстве работ использовались материалы Подрядчика и производилась передача материалов Субподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону форма М-15), Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (если при производстве работ производился монтаж оборудования Подрядчика) подписанную с обеих сторон.

В силу пункта 6.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19 приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной и технической документацией, предоставления Подрядчику комплект исполнительной документации, оформленной в соответствиями с требованиями СНиП, СП и ГОСТ по Акту приема- передачи, а также после устранения всех дефектов.

Подрядчик не позднее 5 рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 осуществляет приемку результата Работ. Если Работа выполнена в требуемом объеме и качестве Подрядчик подписывает их и передает по одному экземпляру Субподрядчику (пункт 6.4. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Субподрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.2. договора от 16.12.2019 №06/12/19).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате за выполненные работы, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.4. договора от 16.12.2019 №06/12/19.

В силу пункта 10.1. договора от 16.12.2019 №06/12/19 договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 марта 2020 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Во исполнение условий договора от 16.12.2019 №06/12/19, истец выполнил работы, сторонами подписан акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 год №2 от 01.10.2021 на сумму 462463,92 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 01.10.2021; акт о приемке выполненных работ №1 от 22.04.2020 на сумму 939327,79 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 22.04.2020 на сумму 939327,79 руб. В материалы дела представлены односторонние акты: товарная накладная №1 от 26.01.2021 (договора от 16.12.2019 №06/12/19) на сумму 32000 руб., счет-фактура №1 от 26.01.2021 на сумму 32000 руб.

По расчету истца общая стоимость выполненных работ по договору от 16.12.2019 №06/12/19 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами, товарной накладной составила 1433791,71 руб.

Из позиции истца следует, что ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) по условиям договора вправе требовать от ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) оплаты согласованной сторонами твердой цены договора в размере 2067993,26 руб. ввиду отсутствия подписанного сторонами дополнительного соглашения к договору от 16.12.2019 №06/12/19 о соразмерном уменьшении объёмов работ и цены договора.

Ответчиком произведены частичные оплаты по договору от 16.12.2019 №06/12/19 на общую сумму 1401791,71 руб.

Сумма долга по договору от 16.12.2019 №06/12/19 составила 666201,55 руб.

Ввиду просрочки оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора от 16.12.2019 №06/12/19 истцом начислена неустойка с 15.01.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 26.10.2022 в размере 358452,17 руб.

Между ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) и ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) был заключен договор №07/12/2019 от 16.12.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить Работу: «Замена оконных блоков здания № 2 (инв.№ 00591) цеха № 19 ФКП «Завода имени Я.М. Свердлова», (далее - Работа), расположенного по адресу: 606002, г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, 4, в соответствии с условиями настоящего договора, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненную Работу в соответствии с условиями настоящего Договора (пункт 1.1. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

Согласно пункту 1.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 вид, объём, стоимость, требования и условия выполнения Работ, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Договора, определяются на основании документации: дефектной ведомости, с указанием вида и объема работ; локального сметного расчета (сметы), с указанием стоимости работ; локальной ресурсной ведомости, с указанием перечня ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Согласно пункту 2.1. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 общий срок выполнения Работ по договору: с момента (даты) подписания Договора до 25 декабря 2019 года.

Субподрядчик при исполнении Договора, по согласованию с Подрядчиком, имеет право досрочно или поэтапно выполнять Работы и сдавать объект Подрядчику (пункт 2.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

В силу пунктов 3.1.-3.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 цена договора 2 125 984,90 (Два миллиона сто двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС 20% - 354 330,82 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом № 83/19. Цена Договора включает в себя все виды расходов и издержек Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом настоящего Договора, на приобретение материалов и оборудования, использование механизмов и транспорта, необходимых для выполнения работ, уплату налогов и сборов (в т.ч. НДС) и причитающееся ему вознаграждение.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (пункт 3.3. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

Согласно пункту 3.4. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 оплата работы осуществляется в следующем порядке: оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика. В течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 30 % от цены настоящего Договора с учетом НДС 20% с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно акта приемки фактически выполненных работ. Окончательный расчёт за выполненные работы производится Подрядчиком по факту выполнения работ, принятых Подрядчиком без замечаний, на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета/счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.3, п.5 статьи 169 ПК РФ с указанием реквизитов Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм.

Обязательства Подрядчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. В случае изменения расчетного счета Субподрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщит об этом Подрядчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный расчетный счет, несет Субподрядчик (пункт 3.6. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, проектно-сметной документации Подрядчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Подрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков (пункт 3.7. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

В обязанности подрядчика согласно пунктам 4.1.1., 4.1.6., 4.1.7. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 входит:

- обеспечить предоставление субподрядчику объекта для выполнения работ, а также утвержденную техническую документацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения Работы. Требовать от субподрядчика надлежащее исполнение обязательств по договору;

- по окончании выполнения субподрядчиком работ организовать и осуществить их приемку в срок и в порядке, установленные разделом 6 договора. Подрядчик имеет право требовать предоставление надлежащим образом оформленных документов по требованиям Подрядчика, надлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями договора;

- обеспечить оплату выполненных субподрядчиком работ на условиях договора и соответствии с разделом 3 договора.

В обязанности субподрядчика согласно пунктам 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.15, 4.2.16., 4.2.28., 4.2.30, 4.2.31 договора №07/12/2019 от 16.12.2019 входит:

- принять объект для выполнения работ. Предоставить подрядчику график производства работ;

- выполнить работу из своих материалов (основных и вспомогательных) или/и материалов подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), при помощи своего оборудования (механизмов, транспорта) или/и подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), своими силами и средствами в течение срока, установленного настоящим договором. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами (далее по тексту — СНиП), сводами правил (далее по тексту - СП), ГОСТ и др.;

- обеспечить безопасность выполнения работ и выполнение требований безопасности для жизни и здоровья работников ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и его имущества, охраны окружающей среды. Требования осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006г. №230-Ф3; Федерального закона от 21,12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- обеспечить во время производства работ на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей среды, в т.ч. требований к зеленым насаждениям и земельным участкам, и требований пропускного режима, установленного на предприятии;

- обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении условий договора. При этом субподрядчик несёт полную ответственность за выполнение своими работниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, требований промышленной и пожарной безопасности, а так же требований пропускного режима, установленного на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора направить работников для прохождения инструктажа в соответствии порядком, установленным на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения инструктажа и пропусков запрещается. Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения вводного инструктажа, нарядов - допусков и других необходимых оформленных разрешений на допуск к работам запрещается;

- по требованию Подрядчика отстранять от работы работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности;

- субподрядчик обязан поставить в известность Подрядчика об инцидентах, авариях, несчастных случаях на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», порче имущества ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Подрядчику ущерб, нанесённый по вине Субподрядчика;

- технология и качество выполняемых работ, применяемых материалов, комплектующих и оборудования должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, СП, ГОСТ);

- материалы для выполнения работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Требования о наличии сертификатов/декларации соответствия в отношении указанной продукции установлено перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». По качеству материалы должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, ОСТ; материалы должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности; все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, лабораторные анализы, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; До начала выполнения Работ, монтажа оборудования и на всех этапах выполнения работ по требованию Подрядчика предоставлять сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых и поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования. Приемка поставленного Субподрядчиком оборудования для производства монтажных работ производится на территории ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» на основании оформленного Сторонами Акта входного контроля. Доставка материалов и оборудования до площадки ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» осуществляется за счет Субподрядчика;

- обеспечить оптимальные качественные характеристики результата работ, в том числе по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением;

- организовывать и участвовать в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных), оборудования и механизмов при их приемке. Участвовать в промежуточной приемке и освидетельствовании скрытых работ на основании актов;

- осуществлять контроль и координацию оформления исполнительной документации: актов, исполнительных схем, исполнительных съемок, удостоверений, паспортов, свидетельств и сертификатов, необходимых для сдачи-приемки завершенного строительством Объекта в эксплуатацию. При приемке Работ предоставлять исполнительную документацию, оформленную в соответствии СНиП, СП, ГОСТ и других, обязательных к исполнению на территории РФ норм и правил по Акту приема-передачи. Отсутствие или не предоставление исполнительной документации Подрядчику является нарушением условий договора и является отказом в приемке выполненных работ.

Согласно пунктам 4.2.36., 4.2.36.1., 4.2.36.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 при исполнении договора изменяется объем работ, услуг:

- в случае, если в процессе (во время) производства работ возникла необходимость в дополнительных работах (или непредвиденных работах), которые не вошли в основной объем Работ по настоящему договору, Субподрядчик направляет Подрядчику уведомление, оформленное в письменном виде. Подрядчик в течение трех рабочих дней принимает решение о необходимости проведения дополнительных работ путем оформления Акта на дополнительные работы. Выполнение работ производится только после согласования Акта на дополнительные работы, а так же подписания дополнительного соглашения к настоящему договору;

- в случае, если в процессе исполнения договора изменяются объёмы работ в сторону уменьшения и (или) отсутствует дальнейшая необходимость в выполнении работ стороны договора инициируют подписание дополнительного соглашения/соглашения в части соразмерного уменьшения объёмов работ и цены договора.

Согласно пункту 6.1. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 по окончанию работ субподрядчик уведомляет подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Вместе с уведомлением Субподрядчик представляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в двух экземплярах (или по иным формам согласно действующему законодательству РФ и оформленными в соответствии с требованиями, установленными на ФКП «Авангард»). А так же Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчетную документацию: Отчет об использовании материалов Подрядчика (если при производстве работ использовались материалы Подрядчика и производилась передача материалов Субподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону форма М-15), Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (если при производстве работ производился монтаж оборудования Подрядчика) подписанную с обеих сторон.

В силу пункта 6.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной и технической документацией, предоставления Подрядчику комплект исполнительной документации, оформленной в соответствиями с требованиями СНиП, СП и ГОСТ по Акту приема- передачи, а также после устранения всех дефектов.

Подрядчик не позднее 5 рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 осуществляет приемку результата Работ. Если Работа выполнена в требуемом объеме и качестве Подрядчик подписывает их и передает по одному экземпляру Субподрядчику (пункт 6.4. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Субподрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.2. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате за выполненные работы, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.4. договора №07/12/2019 от 16.12.2019).

В силу пункта 10.1. договора №07/12/2019 от 16.12.2019 договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 марта 2020 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Во исполнение условий договора №07/12/2019 от 16.12.2019 истец выполнил работы, сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 01.10.2021 №2 на сумму 513052,32 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2021 №2 на сумму 513052,32 руб.; акт о приемке выполненных работ за июль 2020 года от 17.07.2020 №1 на сумму 914484,43 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.07.2020 №1 на сумму 914484,43 руб.

По расчету истца общая стоимость выполненных работ по договору №07/12/2019 от 16.12.2019 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами составила 1427536,75 руб.

Из позиции истца следует, что ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) по условиям договора вправе требовать от ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) оплаты согласованной сторонами твердой цены договора в размере 2125984,90 руб. ввиду отсутствия подписанного сторонами дополнительного соглашения к договору №07/12/2019 от 16.12.2019 о соразмерном уменьшении объёмов работ и цены договора.

Ответчиком произведена частичная оплата по договору №07/12/2019 от 16.12.2019 в размере 1630100,36 руб.

Сумма долга по договору №07/12/2019 от 16.12.2019 составила 495884,54 руб.

Ввиду просрочки оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора №07/12/2019 от 16.12.2019 истцом начислена неустойка с 15.01.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 26.10.2022 в размере 368504,05 руб.

Между ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) и ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) был заключен договор №08/12/2019 от 16.12.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работу: «Замена оконных и дверных блоков здания № 1 (инв.№ 00195) цеха № 19 ФКП «Завода имени Я.М. Свердлова», (далее - Работа), расположенного по адресу: 606002, г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, 4, в соответствии с условиями настоящего договора, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

Согласно пункту 1.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 вид, объем, стоимость, требования и условия выполнения работ, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, определяются на основании документации:

- дефектной ведомости, с указанием вида и объема работ;

- локального сметного расчета (сметы), с указанием стоимости работ;

- локальной ресурсной ведомости, с указанием перечня ресурсов, необходимых для выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

В силу пункта 2.1. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 общий срок выполнения работ по договору: с момента (даты) подписания договора до 25 декабря 2019 года.

Субподрядчик при исполнении договора, по согласованию с подрядчиком, имеет право досрочно или поэтапно выполнять работы и сдавать объект подрядчику (пункт 2.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

В силу пунктов 3.1.-3.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 цена договора 2 387 004,62 (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч четыре) рубля 62 копейки, в том числе НДС 20% - 397 834,10 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом № 84/19. Цена Договора включает в себя все виды расходов и издержек Субподрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом настоящего Договора, на приобретение материалов и оборудования, использование механизмов и транспорта, необходимых для выполнения работ, уплату налогов и сборов (в т.ч. НДС) и причитающееся ему вознаграждение.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством (пункт 3.3. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

Согласно пункту 3.4. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 оплата работы осуществляется в следующем порядке: оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 30 % от цены настоящего Договора с учетом НДС 20% с последующим пропорциональным удержанием его при оплате согласно акта приемки фактически выполненных работ. Окончательный расчёт за выполненные работы производится Подрядчиком по факту выполнения работ, принятых Подрядчиком без замечаний, на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета/счета-фактуры, форме № КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета/счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.3, п.5 статьи 169 НК РФ с указанием реквизитов Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм.

Обязательства подрядчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика. В случае изменения расчетного счета субподрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщит об этом подрядчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный расчетный счет, несет субподрядчик (пункт 3.6. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

Работы, выполненные субподрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, проектно-сметной документации подрядчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате подрядчиком до устранения субподрядчиком обнаруженных недостатков (пункт 3.7. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

В обязанности подрядчика согласно пунктам 4.1.1., 4.1.6., 4.1.7. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 входит:

- обеспечить предоставление субподрядчику объекта для выполнения работ, а также утвержденную техническую документацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения работы. Требовать от субподрядчика надлежащее исполнение обязательств по договору;

- по окончании выполнения субподрядчиком работ организовать и осуществить их приемку в срок и в порядке, установленные разделом 6 договора. Подрядчик имеет право требовать предоставление надлежащим образом оформленных документов по требованиям подрядчика, надлежащим исполнением обязательств в соответствии с условиями договора;

- обеспечить оплату выполненных субподрядчиком работ на условиях договора и соответствии с разделом 3 договора.

В обязанности субподрядчика согласно пунктам 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.15, 4.2.16., 4.2.28., 4.2.30, 4.2.31 договора №08/12/2019 от 16.12.2019 входит:

- принять объект для выполнения работ. Предоставить подрядчику график производства работ;

- выполнить работу из своих материалов (основных и вспомогательных) или/и материалов подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), при помощи своего оборудования (механизмов, транспорта) или/и подрядчика (указанных в ресурсной ведомости), своими силами и средствами в течение срока, установленного настоящим договором. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество, в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами (далее по тексту — СНиП), сводами правил (далее по тексту - СП), ГОСТ и др.;

- обеспечить безопасность выполнения работ и выполнение требований безопасности для жизни и здоровья работников ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и его имущества, охраны окружающей среды. Требования осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006г. №230-Ф3; Федерального закона от 21,12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- обеспечить во время производства работ на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей среды, в т.ч. требований к зеленым насаждениям и земельным участкам, и требований пропускного режима, установленного на предприятии;

- обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении условий договора. При этом субподрядчик несёт полную ответственность за выполнение своими работниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, требований промышленной и пожарной безопасности, а так же требований пропускного режима, установленного на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора направить работников для прохождения инструктажа в соответствии порядком, установленным на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова». Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения инструктажа и пропусков запрещается. Выполнение работ и нахождение работников Субподрядчика на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без прохождения вводного инструктажа, нарядов - допусков и других необходимых оформленных разрешений на допуск к работам запрещается;

- по требованию Подрядчика отстранять от работы работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности;

- субподрядчик обязан поставить в известность Подрядчика об инцидентах, авариях, несчастных случаях на объектах ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», порче имущества ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Подрядчику ущерб, нанесённый по вине Субподрядчика;

- технология и качество выполняемых работ, применяемых материалов, комплектующих и оборудования должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, СП, ГОСТ);

- материалы для выполнения работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Требования о наличии сертификатов/декларации соответствия в отношении указанной продукции установлено перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». По качеству материалы должны соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, ОСТ; материалы должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности; все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, лабораторные анализы, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; До начала выполнения Работ, монтажа оборудования и на всех этапах выполнения работ по требованию Подрядчика предоставлять сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых и поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования. Приемка поставленного Субподрядчиком оборудования для производства монтажных работ производится на территории ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» на основании оформленного Сторонами Акта входного контроля. Доставка материалов и оборудования до площадки ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» осуществляется за счет Субподрядчика;

- обеспечить оптимальные качественные характеристики результата работ, в том числе по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением;

- организовывать и участвовать в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных), оборудования и механизмов при их приемке. Участвовать в промежуточной приемке и освидетельствовании скрытых работ на основании актов;

- осуществлять контроль и координацию оформления исполнительной документации: актов, исполнительных схем, исполнительных съемок, удостоверений, паспортов, свидетельств и сертификатов, необходимых для сдачи-приемки завершенного строительством Объекта в эксплуатацию. При приемке Работ предоставлять исполнительную документацию, оформленную в соответствии СНиП, СП, ГОСТ и других, обязательных к исполнению на территории РФ норм и правил по Акту приема-передачи. Отсутствие или не предоставление исполнительной документации Подрядчику является нарушением условий договора и является отказом в приемке выполненных работ.

Согласно пунктам 4.2.36., 4.2.36.1., 4.2.36.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 при исполнении договора изменяется объем работ, услуг:

- в случае, если в процессе (во время) производства работ возникла необходимость в дополнительных работах (или непредвиденных работах), которые не вошли в основной объем Работ по настоящему договору, Субподрядчик направляет Подрядчику уведомление, оформленное в письменном виде. Подрядчик в течение трех рабочих дней принимает решение о необходимости проведения дополнительных работ путем оформления Акта на дополнительные работы. Выполнение работ производится только после согласования Акта на дополнительные работы, а так же подписания дополнительного соглашения к настоящему договору;

- в случае, если в процессе исполнения договора изменяются объёмы работ в сторону уменьшения и (или) отсутствует дальнейшая необходимость в выполнении работ стороны договора инициируют подписание дополнительного соглашения/соглашения в части соразмерного уменьшения объёмов работ и цены договора.

Согласно пункту 6.1. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 по окончанию работ субподрядчик уведомляет подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Вместе с уведомлением Субподрядчик представляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в двух экземплярах (или по иным формам согласно действующему законодательству РФ и оформленными в соответствии с требованиями, установленными на ФКП «Авангард»). А так же Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчетную документацию: Отчет об использовании материалов Подрядчика (если при производстве работ использовались материалы Подрядчика и производилась передача материалов Субподрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону форма М-15), Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж форма ОС-15 (если при производстве работ производился монтаж оборудования Подрядчика) подписанную с обеих сторон.

В силу пункта 6.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной и технической документацией, предоставления Подрядчику комплект исполнительной документации, оформленной в соответствиями с требованиями СНиП, СП и ГОСТ по Акту приема- передачи, а также после устранения всех дефектов.

Подрядчик не позднее 5 рабочих дней с момента получения акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 осуществляет приемку результата Работ. Если Работа выполнена в требуемом объеме и качестве Подрядчик подписывает их и передает по одному экземпляру Субподрядчику (пункт 6.4. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Субподрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.2. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате за выполненные работы, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.4. договора №08/12/2019 от 16.12.2019).

В силу пункта 10.1. договора №08/12/2019 от 16.12.2019 договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 марта 2020 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

Во исполнение условий договора №08/12/2019 от 16.12.2019 истец выполнил работы, сторонами подписан акт о приемке выполненных работ за май 2020 года от 22.04.2020 №1 на сумму 574894,58 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 22.04.2020 №1 на сумму 574894,58 руб.; акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года от 01.10.2020 №2 на сумму 1637414,22 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2020 №2 на сумму 1637414,22 руб.

По расчету истца общая стоимость выполненных работ по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами составила 2212308,80 руб.

Из позиции истца следует, что ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (субподрядчик) по условиям договора вправе требовать от ФКП "АВАНГАРД" (подрядчик) оплаты согласованной сторонами твердой цены договора в размере 2387004,62 руб.

Ответчиком произведены частичные оплаты по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 на общую сумму 2212308,80 руб.

Сумма долга по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 составила 174695,82 руб.

Ввиду просрочки оплаты выполненных работ в соответствии с условиями договора №08/12/2019 от 16.12.2019 истцом начислена неустойка с 15.01.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 26.10.2022 в размере 413747,47 руб.

По расчету истца задолженность ответчика перед истцом по договорам №06/12/2019 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019 составила 2477485,60 руб., в том числе, 1336781 руб. 91 коп. долга, а также 1140703 руб. 69 коп. неустойки, что послужило основанием истцу для обращения к ответчику с претензией, а впоследствии в арбитражный суд за защитой нарушенного права.

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - Информационное письмо N 51)).

Таким образом, оплате подлежат фактически выполненные работы надлежащего качества, результат которых имеет потребительскую ценность для заказчика.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 АПК РФ).

Судом установлено, что между ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и ФКП "АВАНГАРД" заключены соглашения о расторжении договоров №295/СОПР от 29.11.2019 (соглашение от 01.11.2021), №294/СОПР от 29.11.2019 (соглашение от 01.11.2021), №286/СОПР от 29.11.2019 (соглашение от 01.10.2021). Цена договора №295/СОПР от 29.11.2019 - 3000464,4 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 2056915,2 руб. Цена договора №294/СОПР от 29.11.2019 - 4417441,2 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 3501516 руб. Цена договора №286/СОПР от 29.11.2019 - 3729876 руб. Подрядчиком выполнены работы на сумму 3491230,8 руб.

Из позиции третьего лица - ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» следует, что между сторонами в рамках договоров №295/СОПР от 29.11.2019, №294/СОПР от 29.11.2019, №286/СОПР от 29.11.2019 достигнуты договоренности по объемам работ, подрядчиком работы выполнены по качеству без замечаний, заказчиком оплата произведена полностью.

Факт выполнения истцом обязательств по договорам №06/12/19 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019 подтверждается материалами дела: 

в рамках договора №06/12/19 от 16.12.2019 - сторонами подписан акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2021 год №2 от 01.10.2021 на сумму 462463,92 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 01.10.2021; акт о приемке выполненных работ №1 от 22.04.2020 на сумму 939327,79 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 22.04.2020 на сумму 939327,79 руб. Общая стоимость выполненных работ по договору от 16.12.2019 №06/12/19 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами, составила 1401791,71 руб.;

в рамках договора №07/12/2019 от 16.12.2019 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 01.10.2021 №2 на сумму 513052,32 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2021 №2 на сумму 513052,32 руб.; акт о приемке выполненных работ за июль 2020 года от 17.07.2020 №1 на сумму 914484,43 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.07.2020 №1 на сумму 914484,43 руб. Общая стоимость выполненных работ по договору №07/12/2019 от 16.12.2019 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами составила 1427536,75 руб.;

в рамках договора №08/12/2019 от 16.12.2019 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ за май 2020 года от 22.04.2020 №1 на сумму 574894,58 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 22.04.2020 №1 на сумму 574894,58 руб.; акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года от 01.10.2020 №2 на сумму 1637414,22 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.10.2020 №2 на сумму 1637414,22 руб. Общая стоимость выполненных работ по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 в соответствии с представленными актами по форме КС-2, КС-3, счетами-фактурами составила 2212308,80 руб.

При этом, как установлено судом, работы на суммы: 1401791,71 руб. (по договору от 16.12.2019 №06/12/19), 1630100,36 руб. (по договору №07/12/2019 от 16.12.2019), 2212308,80 руб. (по договору №08/12/2019 от 16.12.2019), ответчиком оплачены, что подтверждается материалами дела и не оспаривается истцом.

Вместе с тем, иные доказательства о выполнения работ на сумму 666201,55 руб. по договору от 16.12.2019 №06/12/19; 495884,54 руб. по договору №07/12/2019 от 16.12.2019; 174695,82 руб. по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 в материалы дела не представлены.

Доводы о том, что материалами дела подтверждается выполнение подрядчиком установленного ответчиком объема работ по договорам с учетом дефектных ведомостей; сторонами не подписывались дополнительные соглашения, изменения в договоры об уменьшении его цены не вносились; цена в контракте установлена твердая; претензий по качеству не заявлено; сторонами подписаны акты выполненных работ, в связи с чем субподрядчик, по мнению истца, имеет право требовать оплаты работ по твердой цене, установленной договорами, отклоняются судом.

В соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 N 19371/13 арбитражный суд обязан исходить из того, что плата по договору оказания услуг осуществляется за фактически оказанные услуги; ошибочной является позиция о том, что цена контракта является твердой и подлежит оплате в изначально согласованном размере независимо от объема оказанных услуг, поскольку вышеуказанное противоречит принципам возмездности гражданско-правовых договоров и возмездного оказания услуг.

Вопреки доводам истца, установление в контракте цены общей стоимости предстоящих работ не означает неоспоримого факта их выполнения именно на соответствующую сумму.

Само по себе наличие арифметической разницы между твердой ценой контракта и стоимостью фактически выполненных и принятых заказчиком работ не может являться основанием для ее выплаты.

Взыскиваемая истцом сумма также не является экономией подрядчика, так как по смыслу статьи 710 ГК РФ, экономия подрядчика должна быть связана с усилиями последнего по использованию более эффективных методов выполнения работы либо вследствие изменения на рынке цен на те материалы и оборудование, которые учитывались при определении цены.

Экономия подрядчика подразумевает выгоду подрядчика, получаемую им в результате применения оптимальных и наиболее эффективных способов выполнения тех объемов работ и проектных решений, которые предусмотрены проектной документацией, а не вызваны сокращением проектных объемов работ, невыполнением работ или изменением проектных решений в сторону более дешевых и завышением расценок при составлении сметной документации.

Размер экономии подлежит доказыванию подрядчиком, который обязан доказать, что уменьшение стоимости работ произошло не за счет уменьшения объема выполненных работ, а исключительно в связи с усилиями подрядчика по использованию наиболее эффективных методов выполнения работы либо уменьшение стоимости произошло вследствие изменения на рынке цен на те материалы и оборудование, стоимость которых учитывалась при определении цены.

В определениях Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2015 по делу N 307-ЭС15-15286, от 07.08.2015 N 303-ЭС15-7919 изложена правовая позиция, согласно которой обоснованность требования разницы между твердой ценой контракта и ценой фактически выполненных работ, подлежит установлению с учетом условий контракта и обстоятельств его исполнения. Твердая цена контракта не подразумевает обязанность оплаты работ, которые фактически не выполнены или предъявлены к оплате по завышенной стоимости.

Таким образом, в момент предъявления работ к приемке у заказчика автоматически не возникает обязанность по оплате всей договорной стоимости работ независимо от объемов фактически выполненных и предъявленных к приемке работ.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну (часть 5 статьи 720 ГК РФ).

Однако такое бремя доказывания истец не исполнил.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" если экспертиза в силу АПК РФ могла быть назначена по ходатайству или с согласия участвующих в деле лиц, однако, такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле, применительно к части 2 статьи 9 АПК РФ.

В споре о взыскании задолженности за выполненные работы бремя доказывания факта выполнения работ и их стоимости лежит на подрядчике.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

В пункте 7 Постановления N 23 разъяснено, что согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

В соответствии с пунктом 22 Постановления N 23 до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

На дату судебного заседания истцом денежные средства за проведение судебнойстроительной экспертизы с учетом письменных ответов экспертных организаций на депозитный счет суда в полном объеме не внесены, в связи с чем ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы отклонено. Оснований, с учетом иных доказательств по делу, для назначения экспертизы, судом не установлено.

В связи с чем, при определении стоимости фактически выполненных работ суд исходит из подписанных сторонами актов выполненных работ, поскольку иных доказательств выполнения работ не представлено.

Исходя из положений статей 309, 310, 328, 702, 711, 753 ГК РФ, оплата осуществляется за фактически выполненные работы; оплата фактически выполненных работ меньшей стоимостью по цене, изначально согласованной сторонами независимо от объема выполненных работ, противоречит принципам возмездности гражданско-правовых договоров. 

Судом не установлено использование истцом более эффективных методов выполнения работ либо изменения на рынке цен на те материалы и оборудование, которые учитывались при определении цены контракта, равно как и иных доказательств экономии подрядчика. 

При этом суд ставил на рассмотрение сторон вопрос о назначении экспертизы о фактически выполненном объеме работ и их стоимости, соответствующее ходатайство об экспертизе истцом на дату судебного заседания не поддержано, денежные средства за проведение судебной экспертизы с учетом письменных ответов экспертных организаций на депозитный счет суда не внесены (статьи 9, 65, 82 АПК РФ). В связи с чем истец взял на себя риск несовершения процессуальных действий. 

Следовательно, с учетом материалов дела, исковые требования ООО "СК АЛМАЗ СЕРВИС" о взыскании 1336781 руб. 91 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договорам №06/12/2019 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019 удовлетворению не подлежат.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате за выполненные работы, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункты 7.4. договоров).

Истцом ответчику начислена неустойка за период с 15.01.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 26.10.2022 в размере 1140703 руб. 69 коп.

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком обязательств по договору в части сроков оплаты, в связи с чем, у истца возникло право на взыскание пеней.

Проверив расчет неустойки в размере 1140703 руб. 69 коп., часть которой начислена на авансовые платежи суд не принимает его, поскольку произведен в нарушение условий договоров.

Положениями ГК РФ не ограничена возможность начисления неустойки за нарушение сроков перечисления промежуточных платежей (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2016 № 305-ЭС16-4576).

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 N 310-ЭС17-11570).

На основании статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В силу положений статей 1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (статья 431 ГК РФ).

В силу принципа свободы договора обеспечение неустойкой своевременного внесения авансовых или промежуточных платежей само по себе не противоречит законодательству, тем более если такое условие согласовано сторонами в договоре (п. 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)). Однако раз данное условие касается ответственности, оно не должно допускать двоякого толкования. Пункт 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 «О свободе договора и ее пределах» предусматривает, что при неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон спорное условие подлежит толкованию в пользу контрагента стороны, которая проект договора подготовила.

Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа (предоплаты) в заключенных между сторонами договорах не имеется. Следовательно, требование о взыскании неустойки, начисленной на авансовые платежи, удовлетворению не подлежит.

Произведя перерасчет, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки частично в размере 177375,32 руб.: по договору от 16.12.2019 №06/12/19 – с 09.11.2021 по 18.02.2022 в размере 43944,86 руб.; по договору №07/12/2019 от 16.12.2019 – с 09.11.2021 по 30.12.2021 в размере 23031,50 руб.; по договору №08/12/2019 от 16.12.2019 – с 02.11.2020 по 11.06.2021 в размере 110398,96 руб. 

В остальной части следует отказать. 

Требование истца о взыскании с ответчика неустойки, из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения (6,25%) от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 27.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, не подлежит удовлетворению. 

В свою очередь ФКП "АВАНГАРД" заявило встречное исковое заявление о взыскании неустойки по договору №06/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 472622 руб. 63 коп.; неустойки по договору №07/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 485876 руб. 13 коп.; неустойки по договору №08/12/19 от 16.12.2019 в период с 13.02.2020 по 13.02.2023 в размере 545530 руб. 01 коп.; неустойки по договору №06/12/19 от 16.12.2019, договору №07/12/19 от 16.12.2019, договору №08/12/19 от 16.12.2019 за период с 14.02.2023 по день фактического исполнения денежного обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты (штрафов, пеней) и направить Субподрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на момент заключения от суммы настоящего договора за каждый день просрочки (пункт 7.2. договоров).

Факт просрочки выполнения работ по договорам подтверждается материалами дела.

Расчет неустойки судом проверен, признан неверным. Произведя перерасчет, с учетом доказательств, подтверждающих фактическое выполнение истцом обязательств по договорам №06/12/19 от 16.12.2019, №07/12/2019 от 16.12.2019, №08/12/2019 от 16.12.2019, суд удовлетворяет требование ответчика о взыскании неустойки частично в размере 636997,92 руб.: по договору №06/12/19 от 16.12.2019 - 257206,66 руб., по договору №07/12/19 от 16.12.2019 - 264419,37 руб., по договору №08/12/19 от 16.12.2019 - 115371,89 руб.

В остальной части следует отказать.

Иные возражения и доводы судом рассмотрены и отклонены как необоснованные (оснований для снижения размера пени, с учетом перерасчета суда, не установлено).

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

При проведении зачета суд применяет правила статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации и Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.10.2010 № 141.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "АВАНГАРД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 177375 руб. 32 коп. неустойки, а также 2533 руб. 53 коп. расходов по государственной пошлине.

В остальной части отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "АВАНГАРД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 636997 руб. 92 коп. неустойки, а также 11875 руб. 72 коп. расходов по государственной пошлине.

В остальной части отказать.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛМАЗ СЕРВИС" (ОГРН: 1195275038507, ИНН: 5249168427) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "АВАНГАРД" (ОГРН: 1020202089115, ИНН: 0268005588) 468964 руб. 79 коп. неустойки. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья С.Ю. Щукин