Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-12832/2019

г. Петрозаводск

22 мая 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена   22 мая  2020 года.

Полный текст решения изготовлен   22 мая 2020 года.

 

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погосян А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лукиной А.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  общества с ограниченной ответственностью «ТехЭксперт»

к Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»

о продлении срока выполнения работ по государственному контракту № 27аэф-18 от 08.11.2018, об обязании подписать дополнительное соглашение,

 

при участии представителей:

истца – ФИО1, действующей на основании доверенности от  02.03.2020;

ответчика – ФИО2, действующей на основании доверенности от  12.05.2020; 

 

установил:

общество  с ограниченной ответственностью «ТехЭксперт»  (ИНН 

<

***>, место нахождения: 123242, Москва город, улица Грузинская Б., дом 20, подвал, пом IV комната 2 оф. 10, далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к  Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»  (ИНН 

<

***>, КПП 100101001, место нахождения: 185028, ул. Фридриха Энгельса, д. 4,  г. Петрозаводск, Республика Карелия, далее – ответчик, Учреждение) о продлении срока выполнения работ по государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018, об обязании подписать дополнительное соглашение к государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 о продлении сроков выполнения работ. 

Истец направил ходатайство об уточнении предмета исковых требований  в части срока выполнения работ, просил продлить срок выполнения работ по государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018, установленный графиком производства работ и пунктом 9.1. контракта, до 31.08.2020; обязать ответчика подписать дополнительное соглашение  к государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 о продлении сроков выполнения работ до 31.08.2020.

В судебном заседании представитель истца поддержал направленное ранее ходатайство. 

На основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленное истцом ходатайство судом удовлетворено.  

Уточненные исковые требования представитель истца поддержал по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик  в дополнительном отзыве на иск признал требования истца в полном объеме. Представитель ответчика в судебном заседании поддержал заявление о признании иска, сроки выполнения работ  по контракту полагал разумными.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, суд установил.

08.11.2018, между Казенным учреждением Республики Карелия «Управление капительного строительства Республики Карелия» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТехЭксперт» (подрядчик), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, и на основании протокола от 25.10.2018 №27АЭФ-18 был заключен государственный контракт №27аэф-18 от 08.11.2018, (далее Контракт) (Идентификационный код закупки: (ИКЗ) 182100104131510010100100870014299414) на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения». 

Согласно пункту 2.1 Контракта, подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения» в соответствии с проектной документацией, утвержденной заказчиком, а заказчик берет на себя обязательства принять качественно выполненные работы и обеспечить их оплату в соответствии с условиями контракта и лимитами бюджетных средств. 

В силу пункта 3.1 стоимость поручаемых заказчиком работ по Контракту составляет 139 318 111 руб. 15 коп., в том числе НДС 18%.

Пунктом 9.1. Контракта установлено, что все работы, предусмотренные Контрактом, должны быть выполнены подрядчиком надлежащим образом до 01.09.2019, при этом комплекс (вид) работы, должен быть выполнен подрядчиком в соответствии с графиком производства работ. Изменение законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения Контракта приводящих к дополнительным затратам времени, является основанием для сдвига срока производства работ на период времени, которые необходимы для окончания выполнения работ. 

Работы по Контракту производятся в рамках реализации мероприятии? Федеральной Целевой программы «Адресной инвестиционная программы Республики Карелия» Утвержденная Распоряжением Правительства Республики Карелия №39р-П Российской Федерации от 27.01.2017. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии?, предоставленных бюджету Республики Карелия из федерального бюджета. 

В ходе выполнения работ по контракту подрядчиком были выявлены непредвиденные обстоятельства, связанные с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, выносом сетей связи, электросетей из пятна застройки котельной, насосной станции пожаротушения, резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализационных насосных станций поверхностных стоков №1 и №2, а так же демонтажем (сносом) здания медпункта и багажного отделения, что явилось существенным изменением обстоятельств, которые в свою очередь задержали выполнение строительных работ по Контракту на 208 календарных дней.

ООО «ТехЭксперт» обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия, дело №А26-7309/2019, с исковым заявлением к Казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» о продлении сроков окончания работ по государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 до 01.12.2019.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 29.08.2019 по делу дело №А26-7309/2019 исковые требования ООО «ТехЭксперт» были удовлетворены в полном объеме.

07.10.2019  сторонами во исполнение решения Арбитражного суда Республики Карелия от 29.08.2019 было подписано Дополнительное соглашение №3, к государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 с изменением (увеличением) срока выполнения работ (п.9.1 Контракта) до 01.12.2019.

27.11.2019 подрядчиком обнаружены не обозначенные в проекте инженерные сети, в связи с чем было подписано Дополнительное соглашение №4 от 27.11.2019, к государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 с изменением (увеличением) срока выполнения работ (п.9.1 Контракта) до 25.12.2019.

Как указывает истец, 20.12.2019 в ходе выполнения работ по Контракту подрядчиком вновь выявлены обстоятельства, не зависящие от воли сторон Контракта, влияющие на сроки производства работ по объекту и создающие невозможность выполнения работ по Контракту в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение №4 от 27 ноября 2019 года к Контракту) и п.9.1. Контракта, а именно: невозможность проведения пусконаладочных работ в части водоснабжения, водоотведения и здания котельной.

Письмом №24/27аэф от 20.12.2019 истец предложил ответчику продлить срок выполнения работ  по Контракту до  30.04.2020 для проведения пуско-наладочных работ. Поскольку от продления сроков выполнения Контракта во внесудебном порядке ответчик отказался, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Из отзыва на исковое заявление и заявления представителя ответчика в судебном заседании следует, что Управление признает требования истца в полном объеме.

Право ответчика признать иск полностью или частично установлено в части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Волеизъявление на признание иска (полностью или частично) может быть выражено в письменном виде либо в устной форме.

Согласно норме части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Следовательно, если признание иска выражает действительную волю ответчика, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом, а стороны освобождаются от доказывания фактических обстоятельств. В этом случае Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации освобождает и суд от необходимости обоснования решения, которым иск удовлетворяется: в мотивировочной части решения указывается только на признание иска ответчиком и принятие признания судом (третий абзац пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом суд не устанавливает фактических обстоятельств дела, не исследует доказательств и не указывает материально-правовые основания удовлетворения иска, таким образом, в случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.

Учитывая, что признание иска в рассматриваемом случае не противоречит закону, не нарушает прав и интересы других лиц, суд принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет требования истца. 

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.            Исковые требования удовлетворить.

2.            Продлить срок выполнения работ по государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения», установленный графиком производства работ (Приложение №2 к Контракту) и пунктом 9.1. Контракта, до 31 августа 2020 года.

3.            Обязать казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» в пятидневный срок с момента вступления решения в законную силу подписать дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ к государственному контракту №27аэф-18 от 08.11.2018 на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). Строительство инженерного обеспечения».

4.            Взыскать с казенного учреждения Республики Карелия "Управление капительного строительства  Республики Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехЭксперт" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 3600 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

5.            Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТехЭксперт" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную по платежным поручениям №1 от 24.12.2019, № 1  от 13.01.2020 государственную пошлину в сумме  8 400 рублей.

6.            Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Погосян А.А.