Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-28032/2020

«10» февраля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 3 февраля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2021 г.

               Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ИнтерВент" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обществу с ограниченной ответственностью "МСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда от 11.03.2020 г. № 4 в размере 1 331 800 руб.68 коп., неустойки в размере 133 180 руб. 07 коп.

В судебном заседании приняли участие: 

от истца -  ФИО1, по доверенности;

от ответчика – не явился, извещён.

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерВент" (далее – ООО «ИнтерВент», истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МСК"  (далее –  ООО «МСК», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 11.03.2020 г. № 4 в размере 1 331 800 руб. 68 коп., неустойки в размере 133 180 руб. 07 коп.

Истец в судебном заседании поддержал предъявленный иск.

 Ответчик, извещённый надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание не явился; письменный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ не представил; дело на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.   

Оценив доводы сторон, исследовав материалы дела, суд

установил:

11 марта 2020г. ООО «Интервент» (Подрядчик) и ООО «МСК» (Заказчик) заключили договор подряда № 4 (далее - Договор).

В соответствии с п. п. 1.1, 1.2 Договора Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлекаемыми силами и средствами по заданию Заказчика работы по монтажу системы вентиляции, теплоснабжения приточных установок на объекте: ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера» по адресу: 404120, 

<

...> (далее - Объект), согласно Приложениям №№ 1,2,3 к настоящему Договору. Работы выполняются из давальческих материалов, передаваемых Подрядчику по накладной М-15. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, согласно Акту выполненных работ, где обозначены объемы и сумма выполненных работ.

Согласно п. 2.1. Договора цена работ по настоящему Договору определяется согласно Приложений № 1,2,3 и составляет с учетом дополнительного соглашения №2 от 04.05.2020г.  3 611 400,62 руб.

В п. 2.4. Договора указано, что оплата по Договору производится в следующем порядке:

- в течение 10 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон очередного Акта выполненных работ Заказчик производит оплату Подрядчику в размере 100% от суммы, обозначенной в подписанном Акте выполненных работ;

- после завершения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору Заказчик в течение 14 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон Акта выполненных работ, предоставления комплекта исполнительной документации перечисляет на расчетный Подрядчика окончательный платёж с учетом ранее произведенных очередных платежей,

Пунктом 3.1. Договора установлены следующие сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ по настоящему Договору - в течение 2-х дней с момента настоящего Договора;

- работы по договору должны быть выполнены не позднее - 01 июня 2020г.

Дополнительным соглашением №1 от 14.05.2020г. срок окончания выполнения работ перенесён на 30.06.2020 г.

Истец указывает, что выполнил работы надлежащим образом в согласованный срок и сдал их Заказчику, что подтверждается Справками о стоимости выполненных работ п затрат №№ 1-7 за период с 11.03.2020 г. по 29.06.2020 г., а также Актами о приемке выполненных работ №№ 1-15 за период с 11.03.2020 г. по 29.06.2020 г. общей стоимостью  6 624 090,01 руб. 

С учётом частичной оплаты ответчиком работ истцом к взысканию заявлен основной долг в размере 1 331 800 руб. 68 коп., который подтверждён  актом сверки взаиморасчётов по состоянию на 30.10.2020 г. 

Согласно статьям 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется -выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком, приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами. 

Из разъяснений, данных в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании приведённых норм права суд приходит к обоснованности заявленных требований истца  о взыскании основного долга. 

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки в общем размере 133 180 руб. 7 коп. 

В п. 2.4. Договора указывается, что оплата по Договору производится в следующем порядке:

-в течение 10 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон очередного Акта выполненных работ Заказчик производит оплату Подрядчику в размере 100% от суммы, обозначенной в подписанном Акте выполненных работ;

- после завершения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору Заказчик в течение 14 рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон Акта выполненных работ, предоставления комплекта исполнительной документации перечисляет на расчетный счет Подрядчика окончательный платёж с учетом ранее произведенных очередных платежей.

Дополнительным соглашением №1 от 14.05.2020г. срок окончания выполнения работ перенесен на 30.06.2020г.

Сторонами 17.06.2020 г. подписаны акты №12 и №13 на общую сумму 477 927,17 руб. однако, ответчик согласно акту сверки взаимных расчетов произвел оплату по этим актам только на сумму 303 000 руб., и больше оплат не производил вообще, таким образом, осталась задолженность в размере 174 927,17 руб.

Следовательно, с учетом п. 2.4. Договора задолженность в размере 174 927,17 руб. должна была быть оплачена не позднее 01.07.2020 г. (т.е. в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта от 17.06.2020 г.).

В связи с несвоевременной оплатой, с учетом п. 7 Договора (неустойка в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены неоплаченных работ) была рассчитана неустойка за период с 02.07.2020г. (т.е. 11 рабочий день после подписания акта от 17.06.2020 г.) по 30.10.2020 г. (121 день) на сумму 17 492 руб. 72 коп. (с учётом предусмотренного условиями договора ограничения).

Также 29.06.2020 г. сторонами были подписаны акты №14 и №15 на общую сумму 1 156 873,51 руб. Однако, ответчик оплату до настоящего времени не произвел.

Следовательно, с учетом п. 2.4. Договора задолженность в размере 1 156 837,51 руб. должна была быть оплачена не позднее 17.07.2020г. (т.е. в течение 14 рабочих дней с момента подписания акта от 29.06.2020 г.).

В связи с несвоевременной оплатой, с учетом п. 7 Договора (неустойка в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены неоплаченных работ) была рассчитана неустойка за период с 20.07.2020 г. (т.е. 15 рабочий день после подписания акта от 29.06.2020г.) по 30.10.2020 г. (103 дня) на сумму 115 687 руб. 35 коп. (с учётом предусмотренного условиями договора ограничения).

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчёт неустойки судом проверен, признан верным. 

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИнтерВент" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 464 980 руб. 75 коп., из которых 1 331 800 руб. 68 коп. основного долга, 133 180 руб. 7 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  27 650 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     Л.В. Напалкова