1202_3432411  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99.  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А; тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761.  

http://www.irkutsk.arbitr.ru. Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-28430/2018

г. Иркутск

2 апреля 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и  ремонта» муниципального образования города Братска в срок до 1 сентября 2019 года  устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки и дефекты объекта  долевого строительства, связанные с благоустройством жилого многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун,  ул. Набережная, д. 34 (строительный адрес: Иркутская область, г. Братск, жилой район  Падун, ул. Набережная, 30, многоквартирный жилой дом № 6), а именно:  

 № муниципального контракта 

Требования по безвозмездному устранению недостатков объектов долевого строительства, выявленных в пределах гарантийного срока  

Ф.2016.398464,  Ф.2016.406781,  Ф.2017.406425  

1. Осуществить демонтаж просадочных и дефектных участков  

асфальтобетонного покрытия на: 

- тротуаре протяженностью 8м;  - тротуарах вокруг дома;  

- тротуаре, расположенном с торца дома со стороны автомобильной  дороги по улице Набережная;  

- пандусе к тротуару со стороны лицевого фасада жилого дома.  2. Произвести выравнивание и планировку территорий на:  

- тротуаре протяженностью 8м;  

- тротуарах вокруг жилого дома;  

- тротуаре, расположенном с торца дома со стороны автомобильной 

дороги по улице Набережная; 

- пандусе к тротуару со стороны лицевого фасада жилого дома.  3. Выполнить укладку нового асфальтобетонного покрытия на:  - тротуаре протяженностью 8м;  

- тротуарах вокруг дома; 

- тротуаре, расположенном с торца жилого дома со стороны  автомобильной дороги по улице Набережная;  

- пандусе к тротуару со стороны лицевого фасада жилого дома.  4. Произвести укладку плодородного слоя грунта на газоне со  

стороны заднего фасада жилого дома с последующим посевом  газонной травы.  

Взыскать с муниципального предприятия «Дирекция капитального строительства и  ремонта» муниципального образования города Братска в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Н.А. Курц