81_5136296  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-27351/21  07.04.2022 г.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Липатовой Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА  ТУЛУНА "ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" (665268, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  23.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ ПРОФИ"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664043, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ДОМОСТРОЙ ПРОФИ" в срок – не позднее трех месяцев с момента вступления решения  суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному  контракту № 01-2019 от 28.08.2019 по капитальному ремонту в здании муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад  «Аленушка», расположенного по адресу: 

<

...>, обнаруженные в  пределах гарантийного срока, а именно:  

- Восстановить дверные ручки с замком в количестве 5 шт.  

- Заменить двери и проемы, обшитые гипсокартонном, 4 шт. - Заменить керамогранитную плитку (тамбура, пищеблок) 10 шт. - Отремонтировать деревянные полы, покрытые линолеумом, 

- Заменить пороги (в межкомнатных дверных блоках) 8 шт.  

- Восстановить частично штукатурку, отделочный слой, покраску стен по всему  

периметру первого этажа (служебный коридор, прачечная, медицинский кабинет,  

групповые и служебные помещения) 

- Восстановить работу электрических тепловых полов в туалете младшей группы  - Заменить светодиодные панели 15 шт.  

-Заменить асфальтовое покрытие на прогулочном участке для детей и хозяйственном  

дворе - Восстановить по всему периметру фасада здания штукатурку с окрашиванием 

- Заменить бетонную отмостку по всему периметру здания  - Заменить лотки и водосточные трубы, протекающие по всему периметру здания.  

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ДОМОСТРОЙ ПРОФИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА "ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия. 

 Судья Ю.В. Липатова