АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-19384/2023

25 марта 2025 года

г. Новосибирск

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Васютиной О.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Левановой Л.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Мэрии города Новосибирска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г.Новосибирск  

к закрытому акционерному обществу «Новосибагрореммаш» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Новосибирск,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Новосибирск  

об обязании заключить соглашение об исполнении схемы теплоснабжения,  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

решил:

Обязать закрытое акционерное общество «Новосибагрореммаш»  

заключить с Мэрией города Новосибирска соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Новосибирска на условиях проекта соглашения, в редакции, предложенной истцом с текстом следующего содержания:  

СОГЛАШЕНИЕ об исполнении схемы теплоснабжения города Новосибирска 

город Новосибирск «___»________202__год 

 Муниципальное образование – город Новосибирск Новосибирской области, от имени которого выступает мэрия города Новосибирска в лице мэра города Новосибирска ФИО1, действующего на основании Устава города Новосибирска, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 630099, 

<

...>, е-mail: ___________, именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления», с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «Новосибагрореммаш», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

...>, e-mail: n.a.attorney@mail.ru в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Единая теплоснабжающая организация», с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), заключили настоящее Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения муниципального образования - город Новосибирск Новосибирской области (далее – Соглашение) о нижеследующем:  

I. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны обязуются исполнять свои обязательства в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования - город Новосибирск, утверждённой и актуализированной в установленном порядке (далее – Схема теплоснабжения).  

1.2. В рамках настоящего Соглашения Единая теплоснабжающая организация обязуется реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенные для неё:  

- в Приложении 1 к настоящему Соглашению (до включения мероприятий единой теплоснабжающей организации в Схему теплоснабжения),  

- в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, Схеме теплоснабжения соответственно.  

1.3. В рамках Соглашения Орган местного самоуправления обязан осуществлять контроль за исполнением Единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.  

1.4. Понятия и определения в Соглашении даны в соответствии с Законом о теплоснабжении, если не указано иное.  

1.5. Если не указано иное, действие Соглашения распространяется исключительно на деятельность Единой теплоснабжающей организации в ее зоне деятельности, определенной Схемой теплоснабжения.  

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Единая теплоснабжающая организация обязуется: 

2.1.1. достигать предусмотренных Приложением 2 к Соглашению целевых показателей исполнения мероприятий, определенных п. 1.2, 2.1.2 настоящего Соглашения;  

2.1.2. реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для неё:  

- в Приложении 1 к настоящему Соглашению (до включения мероприятий единой теплоснабжающей организации в Схему теплоснабжения);  

- в Схеме теплоснабжения (после включения мероприятий единой теплоснабжающей организации в Схему теплоснабжения);  

- в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, Схеме теплоснабжения соответственно.  

2.1.3. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных настоящим Соглашением, и наступившие в связи с этим последствия, в том числе ответственность за невыполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в Схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки в соответствии с п. 1.2, пп. 2.1.1 настоящего Соглашения, а также ответственность, предусмотренную в разделе V настоящего Соглашения.;  

2.1.4. предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом IV настоящего Соглашения;  

2.1.5. участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;  

2.1.6. ежегодно публиковать отчётную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;  

2.1.7. включить в стандарты качества обслуживания потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия Единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии региональные особенности теплоснабжения, в случае если они предусмотрены Схемой теплоснабжения;  

2.1.8. поддерживать в исправном состоянии тепловые сети, источники тепловой энергии в системах теплоснабжения;  

2.1.9. определять цены на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей организацией в порядке:  

2.1.9.1. цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключённым с единой теплоснабжающей организацией, определяются соглашением сторон договора, но не выше предельного уровня, утверждённого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), умноженного на коэффициент, определённый в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню на тепловую энергию (мощность) и срока его применения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 860 (далее – понижающий коэффициент).  

2.1.9.2. Размер понижающего коэффициента ( на i-ый год его применения определяется по формуле:  

где: 

- тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую t-й категории потребителей, действующий на дату окончания переходного периода, (рублей/Гкал);  

- первый год, на который органом исполнительной власти субъекта Российской  

 Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);  

- прогнозный показатель индекса потребительских цен, определённый в базовом  

 варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на j-й год (в среднем за год к предыдущему году - при наличии);  

 – величина, определенная сторонами соглашения об исполнении схемы  

 теплоснабжения равной 0,029 для всех категорий потребителей на весь срок действия настоящего Соглашения;  

- предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утверждённый для t-й категории потребителей (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с разбивкой для каждой категории потребителей в соответствии с частью 4 статьи 23.6 Федерального закона «О теплоснабжении») на i-й год применения коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) (рублей/Гкал).  

2.1.9.3. В случае если понижающий коэффициент, определённый в соответствии с п. 2.1.9.2 настоящего Соглашения, менее или равен нулю или более единицы, то размер понижающего коэффициента принимается равным единице.  

2.1.9.4. Срок применения понижающего коэффициента составляет 10 лет (для угольной генерации). 6 лет (для газовой генерации), но не более срока действия настоящего Соглашения.  

2.1.9.5. По истечении срока применения понижающего коэффициента Мэрия города Новосибирска вправе инициировать однократное продление срока применения понижающего коэффициента либо определение его нового размера на срок, не превышающий 10 лет (для угольной генерации), 6 лет (для газовой генерации), в порядке, установленном Правилами определения в ценовых зонах  

теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню на тепловую энергию (мощность) и срока его применения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2018 года № 860.  

2.1.10. Расчет понижающего коэффициента на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по договорам теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей организацией, и информация о ценах на тепловую энергию (мощность), рассчитанная в соответствии с п. 2.1.9.2 Соглашения, подлежит размещению на официальном сайте Единой теплоснабжающей организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2.1.11. Исполнять требования Органа местного самоуправления об устранении обнаруженного нарушения при расчете размера понижающего коэффициента и его применении;  

2.1.12. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до конца каждого календарного года предоставлять Органу местного самоуправления планы-графики работ по исполнению Схемы теплоснабжения на следующий год;  

2.1.13. Предоставлять Органу местного самоуправления информацию выполненных работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных п. 1.2. 2.1.2 Соглашения по формам отчетности, указанным в запросе Органа местного самоуправления в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления запроса;  

2.1.14. Обеспечить во время выездной проверки представителям уполномоченных Органом местного самоуправления или юридическим лицам, осуществляющих контроль за исполнением условий Соглашения, и привлечённых ими организаций, доступ на объекты тепловых сетей источников тепловой энергии, а также возможность ознакомления с документацией. Относящейся к предмету выездной проверки;  

2.1.15. Исполнять требования Органа местного самоуправления об устранении обнаруженного нарушения требования по обеспечению достижения целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения в зоне деятельности Единой теплоснабжающей организации по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения;  

2.1.16. Нести иные обязательства в соответствии с действующим законодательством.  

2.2. Единая теплоснабжающая организация вправе: 

2.2.1. запрашивать и получать от Органа местного самоуправления необходимую для выполнения обязательств информацию и документацию;  

2.2.2. проводить совместные совещания, встречи по вопросам выполнения условий настоящего Соглашения с участием представителей Органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Новосибирской области, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;  

2.2.3. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением, Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации.  

2.3. Орган местного самоуправления обязан: 

2.3.1. участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;  

2.3.2. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных настоящим Соглашением;  

2.3.3. в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия настоящего Соглашения;  

2.3.4. ежегодно публиковать отчётную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации;  

2.3.5. обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенные для неё в Схеме теплоснабжения;  

2.3.6. В целях обеспечения достижения, установленного Схемой теплоснабжения (Приложение 2) целевого показателя по доле бесхозяйных тепловых сетей, осуществить обращение в суд в соответствии со ст. 225 ГК РФ с требованием о признании права муниципальной собственности на выявленные и поставленные на учёт бесхозяйные тепловые сети, указанные в Схеме теплоснабжения и к окончанию 2026 года доля указанных бесхозяйных сетей должна составлять 0 %;  

Стороны пришли к соглашению, что установленный Схемой теплоснабжения (Приложение 2) целевой показатель по доле бесхозяйных тепловых сетей рассчитан и подлежит достижению в отношении бесхозяйных тепловых сетей, перечисленных в Схеме теплоснабжения на дату подписания настоящего Соглашения.  

2.3.7. не допускать разглашения сведений конфиденциального характера; 

2.3.8. ежегодно осуществлять муниципальный контроль за выполнением Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определённых для неё в Схеме теплоснабжения в порядке, предусмотренном Законом о теплоснабжении;  

2.3.9. нести иные обязательства в соответствии с действующим законодательством.  

2.4. Орган местного самоуправления вправе: 

2.4.1. запрашивать и получать от Единой теплоснабжающей организации информацию о ходе выполнения условий настоящего Соглашения;  

2.4.2. проводить совместные совещания, встречи по вопросам выполнения условий настоящего Соглашения с участием представителей Единой теплоснабжающей организации, органов исполнительной власти Новосибирской области, теплоснабжающих и теплосетевых организаций;  

2.4.3. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением, Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации.  

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие по исполнению Соглашения путём:  

2.5.1. осуществления всех необходимых мероприятий в целях практической  

реализации положений Закона о теплоснабжении, Схемы теплоснабжения и  

положений Соглашения; 

2.5.2. оперативного предоставления друг другу информации, необходимой  

для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением;  

2.5.3. проведения совместных совещаний, встреч по вопросам выполнения  

условий Соглашения; 2.5.4. привлечения для исполнения обязательств Соглашения третьих лиц; 

2.5.5. создания при необходимости и обеспечения деятельности совместных  

рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов; 2.5.6. принятия мер по мирному урегулированию спорных ситуаций. 

III. Распределение имущественных прав 

на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты 

теплоснабжения 

3.1. Стороны пришли к соглашению о распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты теплоснабжения в следующем порядке:  

Право собственности на объекты системы теплоснабжения, созданные, реконструируемые или модернизируемые в соответствии с залеченным Единой теплоснабжающей организацией концессионным соглашением, определяется в соответствии с условиями концессионного соглашения и законодательством о концессионных соглашениях.  

Право собственности на иные объекты системы теплоснабжения, созданные, реконструируемые и (или) модернизируемые Единой теплоснабжающей организацией устанавливается в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.  

IV. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению 

4.1. Единая теплоснабжающая организация обязана предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям действующего законодательства.  

4.2. Банковская гарантия предоставляется Единой теплоснабжающей организацией Органу местного самоуправления на первый календарный год действия Соглашения и на каждый последующий календарный год действия Соглашения на сумму, равную 5% от объема инвестиционных обязательств Единой теплоснабжающей организации на период, соответствующий году действия банковской гарантии. Под объемом инвестиционных обязательств Единой теплоснабжающей организации понимается стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, завершение выполнения которых предусмотрено в период, соответствующий году действия банковской гарантии, в соответствии с утвержденной в установленном порядке Схемой теплоснабжения и Приложением 1 в редакции, действующей на дату предоставления банковской гарантии.  

Банковская гарантия на первый год действия Соглашения вступает в силу не позднее, чем через 30 календарных дней с момента вступления в силу Соглашения и действует по 31 декабря. Банковская гарантия на последующий календарный год действия Соглашения предоставляется Единой теплоснабжающей организацией Органу местного самоуправления не позднее 25 декабря года, предшествующего году предоставления очередной банковской гарантии.  

4.3. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее размер и сроки банковской гарантии для соглашений об исполнении схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения, условия банковской гарантии Соглашения подлежат изменению в соответствии с вступившими в силу требованиями соответствующих нормативных правовых актов.  

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению и наступившие, в связи с этим последствия, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  

5.2. Единая теплоснабжающая организация несёт ответственность за допущенное по ее вине неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе повлекшее последствия для потребителей в части обеспечения надлежащего качества, надёжности и непрерывности теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения.  

5.3. Единая теплоснабжающая организация, допустившая по своей вине нарушение условий настоящего Соглашения, обязана возместить документально подтвержденные реальные убытки, причинённые Органу местного самоуправления, юридическим лицам, физическим лицам в результате такого нарушения.  

5.4. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обязательств непреодолимой силы.  

VI. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.  

6.2. В случае недостижения согласия в результате проведённых переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.  

6.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VII. Размещение информации 

7.1. Настоящее Соглашение в течение десяти дней со дня его подписания подлежит размещению Органом местного самоуправления на официальном Интернет-сайте города Новосибирска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.  

7.2. Стороны Соглашения ежегодно публикуют отчётную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. Условия Соглашения о выполнении Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, в соответствии с перечнем мероприятий, применяются к отношениям Сторон, возникшим со дня вступления в силу распоряжения Правительства РФ от 21.01.2022 № 55-р об отнесении муниципального образования городской округ – город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения.  

8.2. Настоящее Соглашение заключено на срок – 6 лет (для газовой генерации) с момента его вступления в силу в соответствии с п. 8.1. Соглашения. Стороны по окончании указанного срока вправе подписать дополнительное соглашение о продлении срока действия Соглашения или заключить новое соглашение. Окончание срока действия Соглашения не влечёт прекращение обязательств сторон по Соглашению, возникших в период его действия и неисполненных до окончания срока действия Соглашения. В случае прекращения действия Соглашения его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных сторонами в период его действия, до надлежащего исполнения обязательств сторон по Соглашению.  

При досрочном расторжении Соглашения или отмене распоряжения Правительства РФ от 21.01.2022 № 55-р обязательства сторон прекращаются в день расторжения Соглашения или в день отмены указанного распоряжения соответственно.  

8.3. Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Органа местного самоуправления и один экземпляр для Единой теплоснабжающей организации.  

8.4. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключённые в момент подписания настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные Приложения и дополнения считаются действительными, если  

они письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Мэрия города Новосибирска ЗАО «Новосибагрореммаш»  

Адрес: 630099, Российская Федерация, 630001 

<

...>  

Новосибирская область, г. Новосибирск, р/с 

<

***> 

пр-кт Красный, 34 Сибирский банк Сбербанка г Новосибирска  

ИНН 

<

***> к/c 30101810500000000641 КПП 540601001 БИК 045004641  

ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> 

Мэр города Новосибирска Генеральный директор 

 ЗАО «Новосибагрореммаш» _____________ / ФИО3 /  

м.п. _____________ / ФИО2 /  

 м.п. 

 Приложение 1 к соглашению об исполнении  

схемы теплоснабжения города 

Новосибирска от «_______»  

_____________________ 202_г. 

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации  

объектов теплоснабжения 

Закрытого акционерного общества «Новосибагрореммаш» в системе  

теплоснабжения № 47, 

планируемые для включения в схему теплоснабжения города Новосибирска 

 № п/п  

Наименование 

мероприятия  

Обоснование  

эффективности затрат 

Период 

реализации мероприятия  

Затраты тыс. 

руб. 

1 

Ревизия и ремонт запорной арматуры ТС  

Повышение надежности  

2 

Ревизия и ремонт запорной арматуры ХВС  

Повышение надежности  

3 

Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов  

Повышение надежности  

4 

Техническое обслуживание водонагревателей  

Повышение надежности  

5 

Техническое обслуживание и ремонт технологической и электрической части энергетического  

оборудования 

Повышение надежности  

6 

Текущий ремонт насосов  

Повышение надежности  

7 

Формирование  

необходимого количества  

резервного топлива для прохождения  

отопительного периода  

Повышение надежности  

8 

Поверка манометров, термометров, напоромеров, расходомеров  

Повышение надежности  

9 

Обучение персонала в учебном центре по  

программе «Тех. 

эксплуатация тепловых установок»  

Повышение надежности  

10  

Гидравлические испытания  

тепловой сети котельной и  

наружных трубопроводов на плотность и прочность  

Повышение надежности  

11  

Текущий ремонт тепловых сетей  

Повышение надежности  

 № п/п  

Наименование 

мероприятия  

Обоснование эффективности  

затрат 

Период реализации мероприятия  

Затраты тыс.  

руб. 

12  

Регламентные работы на оборудовании котельной для прохождения  

отопительного периода 

Повышение  

энергетической эффективности  

Итого: 

150 000 руб.  

Мэрия города ЗАО Новосибирска «Новосибагрореммаш» 

Адрес: 630099, 630001 

<

...>  

Федерация, р/с 

<

***> 

Новосибирская Сибирский банк Сбербанка область, г Новосибирска  

г. Новосибирск, пр-кт к/c 30101810500000000641 Красный, 34 БИК 045004641  

 ИНН 

<

***> ИНН 

<

***>  

КПП 540601001 ОГРН 

<

***> 

Мэр города Новосибирска Генеральный директор ЗАО «Новосибагрореммаш»  

_____________ / ФИО3 / _____________ / ФИО2 / м.п. м.п. 

Приложение 2  

к соглашению об исполнении 

схемы теплоснабжения города Новосибирска  

от «_______» 

____________________ 202_ г.  

Целевые показатели исполнения мероприятий по строительству,  

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения Закрытого  

акционерного общества «Новосибагрореммаш» в системе теплоснабжения № 

схемы теплоснабжения города Новосибирска Закрытого акционерного 

общества «Новосибагрореммаш» 

 как единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне города  

Новосибирска 

(система теплоснабжения № 47, источник теплоснабжения – котельная по ул.________________________)  

 № п/п  

Наименование 

показателя 

Мероприятия, направленные на  

улучшение показателя  

Ед-

ца изм. 

202__  

202__  

202__  

… 

 1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

… 

1. 

Доля выполненных 

мероприятий по 

строительству, реконструкции(или) модернизации объектов  

теплоснабжения,  

необходимых для развития,  

повышения надежности и 

энергетической эффективности системы  

теплоснабжения в  

соответствии с перечнем и  

объемом денежных  

средств, указанных в схеме теплоснабжения  

% 

2. 

Количество аварийных 

ситуаций при теплоснабжении в ценовых  

зонах: 

2.1.  

на источниках тепловой  

энергии 

ед./год  

2.2.  

на тепловых сетях  

ед./год  

3. 

Продолжительность  

дней 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

… 

планового перерыва в  

горячем водоснабжении в  

связи с производством  

ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического  

обеспечения горячего 

водоснабжения в межотопительный период в  

ценовой зоне теплоснабжения  

ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического  

обеспечения горячего 

водоснабжения в межотопительный период в  

ценовой зоне теплоснабжения  

4. 

Коэффициент  

использования установленной тепловой  

мощности источников 

тепловой энергии в  

ценовой зоне  

теплоснабжения  

5. 

Доля бесхозяйных  

тепловых сетей,  

находящихся на учете бесхозяйных недвижимых  

вещей более 1 года, в 

ценовой зоне  

теплоснабжения  

% 

6. 

Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой  

зоне 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

… 

7. 

Отсутствие фиксированных 

фактов нарушения антимонопольного  

законодательства 

(выданных предупреждений,  

предписаний) в сфере теплоснабжения, а также  

отсутствие применения  

санкций, предусмотренных 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, за  

нарушения  

законодательства РФ в  

сфере теплоснабжения, антимонопольного  

законодательства РФ о  

естественных монополиях  

 т е у в т с т у с т О 

8. 

Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в  

ценовой зоне теплоснабжения  

(отношение фактических  

потерь к отпуску тепловой  

энергии с коллекторов)  

% 

Мэрия города Новосибирска ЗАО «Новосибагрореммаш»  

Адрес: 630099, Российская Федерация, 630001 

<

...> 

Новосибирская область, р/с 

<

***> 

<

...> Сибирский банк Сбербанка  

 г Новосибирска 

ИНН 

<

***> к/c 30101810500000000641 КПП 540601001 БИК 045004641  

ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> 

Мэр города Новосибирска Генеральный директор ЗАО «Новосибагрореммаш»  

_____________ / ФИО3 / _____________ / ФИО2 / м.п. м.п. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Новосибагрореммаш» 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Судья О.М. Васютина