1257/2017-93745(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 26 апреля 2017 года 

по делу А33-2179/2017 Красноярск 

19 апреля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Россий- ской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования  удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт № 0119300006214000156-0185943-03 от  14.11.2014, изложив пункт 3.1. контракта в следующей редакции:  

«Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с даты заключения контракта; за- вершение работ – до 30.06.2018»;  

пункт 10.1. контракта читать – действует до 31 декабря 2018 года; пункт 2.2. контракта читать в следующей редакции: 

«Авансирование не предусмотрено. Лимит финансирования на 2017 год по настоящему  контракту составляет 702 852,56 рублей 56 коп. Оплата в 2017 году производится за факти- чески выполненные работы согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и осуществ- ляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», не позднее  15-ти банковских дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет «Заказчика»,  при условии предоставления подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, накладной на передачу Заказчику разработанной проектной документации в 4 (четырех)  экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на оптическом носителе (СБ - диск) и  счета-фактуры.  

Лимит финансирования на 2018 год по настоящему контракту составляет 600 000,00  рублей. Окончательный расчет за выполненные работы производится в 2018 году после  предоставления Исполнителем документов, подтверждающих получение необходимых со- гласований с заинтересованными службами и организациями, в том числе положительного  заключения экспертизы проектной документации, подписанного сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ и счета-фактуры и осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», не позднее 15-ти банковских дней со дня по- ступления денежных средств на лицевой счет «Заказчика»».  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Управление строительства и жи- лищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" (ИНН 2450021195, ОГРН  1062450000470, г. Канск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Краснояр- ская Проектно-Инженерная Компания" (ИНН 2464209662, ОГРН 1082468034439, г. Красно- ярск) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красно- ярского края.  

Судья О.С. Щёлокова