128/2017-48571(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Тамбов 

«20» сентября 2017 года Дело № А64-4477/2017  

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2017 года Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2017 года 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог», г.Тамбов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Айди-Партнер», г.Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

об обязании выполнить обязательства при участии в судебном заседании: до перерыва: от истца: ФИО1, доверенность от 30.12.2016, от ответчика: не явился, извещен. после перерыва: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен. установил: 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция городских дорог» обратилось в  Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Айди-Партнер» об обязании устранить выявленные и  зафиксированные дефекты асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в  рамках муниципальных контрактов № 115333 от 17.10.2012, № 115335 от 15.10.2012,   № 115327 от 17.10.2012, № 115329 от 17.10.2012, № 116375 от 29.10.2012 по адресам,  согласно акта комиссионного обследования.  

В порядке статьи 49 АПК РФ истцом были уточнены исковые требования, истец  просит обязать общество с ограниченной ответственностью «Айди-Партнер» в течение  тридцати дней с момента вступления решения в законную силу исполнить гарантийные  обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами № 115333 от 17.10.2012,   № 115335 от 15.10.2012, № 115327 от 17.10.2012, № 115329 от 17.10.2012, № 116375 от  29.10.2012, в части устранения дефектов асфальтобетонного покрытия:  

на ул.генерал майора ФИО2: -разрушение отмостоки колодца подземных инженерных коммуникаций напротив детского садика (1,5 м2); 

-разрушение а/б покрытия на примыкании к ул.ФИО4 (1 м2),  

20 сентября 2017 года 

на ул.Свободная,  

-разрушение продольного шва напротив дома № 77 (2,5 м2);  -разрушение а/б покрытия перед пересечением с ул.Гиляровского (1,5 м2);  

-разрушение а/б на остановке общественного транспорта «ФИО2» (1,5 м2);  -разрушение продольного шва на остановке общественного транспорта  

«Гиляровского) (4 м2); 

-разрушение тротуара справа от остановки общественного транспорта  «Рылеева» (3,5 м2).  

-шелушение и выбоина а/б покрытия на примыкании к ул.Мичуринской (2м2); на ул.Радостная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (13м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 19 (3м.п.),  на ул.Лазурная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Архитектурной до дома № 20 по обоим  сторонам (20 м.п.);  

на ул.Гиляровского: 

-разрушение продольного шва перед остановкой «Радужная» (7 м.п.);  -разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении улиц Гиляровского -  

ФИО3 (20 м2); -разрушение а/б покрытия у дома № 48 б (3,5 м ); 

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Овсяной (2 м2);-разрушение а/б  покрытия на пересечении с ул.Хлеборобной (2 м2);  

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Тенистой (2 м2);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Январской (2 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 101 (1,5 м2); -разрушение а/б покрытия на остановке «Тенистая(2 м2); по ул.Январская: 

-разрушение шва перед пересечением с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушены отмостки у колодцев на всем протяжении ул.Январской (4,5 м2);  

-коллейность на остановке общественного транспорта (6 м2);  на дороге - дублер по ул.Мичуринской (от светофора за ул.Свободной до  

ул.Январской): 

-разрушение а/б покрытия на съезде с ул.Мичуринской (5 м2);  -разрушение продольного шва у дома № 319 (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 275 (2 м2); -провал у водопропускной трубы (3 м2). на ул.ФИО3: 

-разрушение продольного шва на всем протяжении улицы (640 м.п.);  -разрушение шва а/б покрытия за пересечением с ул.Гиляровского (15 м.п.);  

-шелушение а/б покрытия у пересечения с ул.Гиляровского (2 м2); -разрушение на пересечении с ул.Прямой (3 м2). на ул.Прямая: 

-разрушение продольного шва а/б покрытия на всем протяжении (813 м.п);  

-разрушение швов на примыкании со всеми улицами (32 м.п);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Снежной (1,5 м2).  

на ул.Мичуринская (от ул.Магистральной до Северного обхода);  -шелушение а/б покрытия на примыкании к ул.Магистральной, напротив  

автомагазина (3 м2); 

-провал дождеприемного колодца на остановке общественного транспорта  

-разрушение отмосток люков на дождеприемных колодцах в районе  

микрорайона ЖБИ (3 м2); -разрушение на 2 съездах к домам (15 м2); 

-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с ул.ФИО4 (15 м2);  -разрушены отмостки колодцев на пересечении с ул.ФИО4 (аварийные) (2м2);  

-выкрашивание верхнего слоя а/б покрытия за пересечением с ул.ФИО4 (20 м2);  -разрушение а/б покрытия при съезде с АЗС «Октан», глубокие ямы,  

шелушение, разрушение шва (15 м2) -провал велодорожки/тротуара напротив ТРЦ «Карусель» (15 м2); 

-провал а/б покрытия перед надземным пешеходным переходом (3 м2);  

-разрушение а/б покрытия при въезде на АЗС «Октан» (7 м2);  -разрушение отмостки люка у надземного пешеходного перехода (2 м2);  

-разрушение шва а/б покрытия длинной 20 м от надземного пешеходного 

перехода (20 м.п.);-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с  ул.Агапкина (15 м2);  

-разрушение дождеприемной решетки на пересечении с ул.Агапкина (2 м2);  -разрушение на съезде к ул. малой Мичуринской (3 м2);  

-разрушение шва на остановке «ФИО3 (5м.п.);  -разрушение технического тротуара и пешеходного тротуара у дома № 321 (5 м2);  

-разрушение поперечного шва перед стелой «Тамбов» (4 м.п.);  -разрушение продольного шва от разделительной до Северного обхода (17 м.п.);  

-разрушение поперечного шва на пересечении с ул.верхней Селезневской (4.п.);  -разрушение а/б покрытия на съезде в микрорайон Солнечный (15 м2);  

-разрушение а/б покрытия на остановке у «Центр единоборств» (6 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 142 к.2 (5 м2).  

на ул.Славянская: 

-разрушение продольного шва напротив дома № 1 (6 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 2 (30 м.п.);  -разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (6 м.п.).  на ул.Пестрая:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.ФИО3 по обе стороны (40м.п.); на ул.Проезжая: -разрушения отсутствуют. на ул.Архитектурная 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (7м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 10 (3 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (7м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 48 до ул.Гиляровского (20м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 56 (20 м.п.);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.м.Мичуринской (4 м );  

-прорастание травы на тротуаре от ул.м.Мичуринской в сторону  ул.Гиляровского (50 м.п.);  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.м.Мичуринской (1,5 м2). на ул.Ключевая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (6м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (6 м.п.).  на ул.Черноземная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 32 (50 м.п.);  на ул.Клубничная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (7 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 20 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 24 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 39 (20 м.п.);-прорастание травы  

на тротуаре напротив дома № 840 (3 м.п.). на ул.Рыбакова: 

-прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского до д. № 41 слева (15 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 37 (4,5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 37 до дома № 35 (10 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 34 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 23 (4 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 13 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (15 м.п.).  

на л.Воскресная: -прорастание травы на тротуаре от ул.Веселой по обе стороны (40 м.п.). на ул.Хлеборобная: -разрушение шва на перекрестке с ул.Гиляровского (3 м2) на ул.Овсяная: 

-разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 6 (3 м );  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 1 в строну ул.Прямой (30 м.п.); 

-прорастание травы на тротуаре от дома № 29 до ул.Прямой (40 м.п.);  -разрушение шва на примыкании с ул.Прямой (2 м2).  

на ул.Ровная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от ул.Прямой слева (30 м.п.).  на ул.Воробьиная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по правой стороне (30 м.п.). на ул.Тепличная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 31 (20 м.п.);  -провал колодца на тротуаре напротив дома № 18 (3 м2).  

на ул.Земляничная: 

-разрушение шва на примыкании к ул.Гиляровского (2 м2).  на ул.Живописная:  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.Гиляровского (4 м2); 

-прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского (30 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 12(10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 27 до дома № 31 (20 м.п.);  

на ул.Тенистая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9, в сторону  

ул.Гиляровского (30 м.п.). на ул.Старикова: 

-разрушение шва на примыкании с ул.Гиляровского (2,5 м2);  -шелушение а/б покрытия на перекрестке с ул.Прямой (3 м2).  на ул.Цветная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по обе стороны (60 м.п.);  на ул.Радужная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского в сторону ул.Рылеева  

-разрушение а/б покрытия напротив дома № 10 (2 м ). на ул.Белокаменная: -разрушение а/б покрытия на тротуаре при съезде с ул.Свободной (2 м2); -разрушение на съезде к дому № 6 (2 м2). на ул.Янтарная: 

-разрушение шва на примыкании к ул.Гиляровского (2,5 м2).  на ул.Шатрова:  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 16 до ул.Архитектурной (20 м.п.); на ул.Раздольная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 22 (7 м.п.);  на ул. Ладыгина:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (20 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (20 м.п.);  

-разрушение шва на перекрестке с ул.Рылеева (2 м2). на ул.Веселая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 17 (5 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 28 (7 м.п.).  

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования по основаниям,  

изложенным в иске и уточнении к нему от 10.08.2017. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени  

проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123  

АПК РФ. 

В соответствии со ст.156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в  

отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам, поскольку он  

надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства. В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 12.09.2017. 

После истечения срока перерыва судебное заседание продолжено в том же составе,  

в отсутствие сторон. 

В судебное заседание представители сторон не явились, о месте и времени  

проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.  

В соответствии со статьей 123 АПК РФ стороны считаются надлежащим образом  

извещенными о месте и времени судебного разбирательства. 

В соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон  

по имеющимся материалам, поскольку они извещены надлежащим образом о времени и  

месте судебного разбирательства. 

Из материалов дела следует, что между МКУ «Дирекция городских дорог» от  

имени городского округа-город Тамбов и ООО «Айди-Партнер» были заключены  

муниципальные контракты № 115335 от 15.10.2012 на выполнение работ для  

муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по объекту «Строительство  

автодорог по микрорайону «Северный» г.Тамбов», № 115327 от 17.10.2012 на выполнение  

работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по объекту  

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичуринской в границах микрорайона  

«ЖБИ» (от ул. Магистральной до ул. ФИО4) в г.Тамбове Тамбовской области»,  

 № 115331 от 17.10.2012 на выполнение работ для муниципальных нужд городского  

округа-город Тамбов по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул.  

Мичуринской в границах микрорайона «Московский» (от ул. ФИО4 до ул. Агапкина) в  

г. Тамбове Тамбовской области», № 115329 от 17.10.2012 на выполнение работ для  

муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по объекту «Реконструкция  

автомобильной дороги по ул. Мичуринской в границах микрорайона «Солнечный» (от  

ул. Свободной до Северного обхода) в г. Тамбове Тамбовской области», № 115333 от  17.12.2012 на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа-город  Тамбов по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичуринской в  границах микрорайона «Уютный» (от ул. Агапкина до ул. Свободной) в г.Тамбове  Тамбовской области», № 116375 от 29.10.2012 на выполнение работ для муниципальных нужд  городского округа-город Тамбов по объекту «Строительство сооружений и сетей инженерной  инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах улиц Агапкина, Мичуринской,  Чичерина, Северо-Западной в г. Тамбове (Автомобильные дороги). Улица генерал-майора  Глазкова».  

В соответствии с п. 6.1, п.9.1, п.9.2 муниципальных контрактов Подрядчик  (ООО «Айди-Партнер») обязался обеспечить надлежащее качество, устранение недостатков  и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, который, с  согласия Сторон, устанавливался продолжительностью: четыре года на верхний слой  асфальтобетонного покрытия.  

Согласно гарантийным паспортам, гарантийный срок по муниципальным  контрактам № 115335, № 115333, № 115331, № 115329, № 115327, № 116375  распространяется на период до 17.09.2017, 20.08.2018 и 30.09.2018.  

30.06.2017 МКУ «ДГД», было проведено дополнительное комиссионное  обследование состояния автомобильных дорог, находящихся на гарантийном  обслуживании у подрядных организаций. По результатам комиссионного  обследования установлено, что на проезжей части автомобильных дорог по ул.  генерала майора ФИО2, ул. Свободная, ул. Радостная, ул. Лазурная, ул.  Гиляровского, ул. Январская, дороге-дублере по ул. Мичуринская, ул.  ФИО3, ул. Рылеева, ул. Мичуринская имеются разрушения проезжей части,  выбоины, ямы и ямочные разрушения, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р  50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,  допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».  

26.05.2017 года в адрес Подрядчика были направлены претензии о  выполнении гарантийных обязательств по муниципальным контрактам   № 115335, № 115333, № 115331, № 115329, № 115327, № 116375, с приложением акта  комиссионного обследования от 22.03.2017 состояния дорог находящихся на гарантийном  обслуживании в ООО «Айди-Партнер», до настоящего времени ответ на претензию от  подрядчика так и не получен.  

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском. 

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы представителя истца,  суд находит иск подлежащим удовлетворению.  

При этом суд руководствовался следующим. 

В соответствии с п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по  государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

К отдельным видам договора подряда, в том числе к подрядным работам для  государственных и муниципальных нужд, положения, предусмотренные параграфом 1  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (общие положения о подряде),  

применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров (п. 2  ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество  выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а  при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к  работам соответствующего рода.  

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,  результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать  свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми  требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного  договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для  обычного использования результата работы такого рода.  

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями  делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат  работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о  качестве (пункт 1 статьи 721).  

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором  подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Согласно п.п. 1, 3 ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное  не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования,  связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено  в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования,  связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного  срока. В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ, Заказчик вправе предъявить требования,  связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.  

Согласно гарантийным паспортам, гарантийный срок по муниципальным  контрактам № 115335, № 115333, № 115331, № 115329, № 115327, № 116375  распространяется на период до 17.09.2017, 20.08.2018 и 30.09.2018.  

Выполнение работ подтверждено актами выполненных работ. 

30.06.2017 МКУ «ДГД», было проведено дополнительное комиссионное  обследование состояния автомобильных дорог, находящихся на гарантийном  обслуживании у подрядных организаций. По результатам комиссионного  обследования установлено, что на проезжей части автомобильных дорог по ул.  Генерала майора ФИО2, ул. Свободная, ул. Радостная, ул. Лазурная, ул.  Гиляровского, ул. Январская, дороге-дублере по ул. Мичуринская, ул.  ФИО3, ул. Рылеева, ул. Мичуринская имеются разрушения проезжей части,  выбоины, ямы и ямочные разрушения, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р  50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,  допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».  

26.05.2017 года в адрес Подрядчика были направлены претензии о  выполнении гарантийных обязательств по муниципальным контрактам   № 115335, № 115333, № 115331, № 115329, № 115327, № 116375, с приложением акта  комиссионного обследования от 22.03.2017 состояния дорог находящихся на гарантийном  обслуживании в ООО «Айди-Партнер» (л.д. 110-115).  

В порядке статьи 49 АПК РФ истцом были уточнены исковые требования, истец  просит обязать общество с ограниченной ответственностью «Айди-Партнер» в течение  тридцати дней с момента вступления решения в законную силу исполнить гарантийные  

обязательства, предусмотренные муниципальными контрактами № 115333 от 17.10.2012,   № 115335 от 15.10.2012, № 115327 от 17.10.2012, № 115329 от 17.10.2012, № 116375 от  29.10.2012 в части устранения дефектов асфальтобетонного покрытия:  

на ул.генерал майора ФИО2: 

-разрушение отмостоки колодца подземных инженерных коммуникаций  напротив детского садика (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия на примыкании к ул.ФИО4 (1 м2),  на ул.Свободная,  

-разрушение продольного шва напротив дома № 77 (2,5 м2);  -разрушение а/б покрытия перед пересечением с ул.Гиляровского (1,5 м2);  

-разрушение а/б на остановке общественного транспорта «ФИО2» (1,5 м2);  -разрушение продольного шва на остановке общественного транспорта  

«Гиляровского) (4 м2); 

-разрушение тротуара справа от остановки общественного транспорта  «Рылеева» (3,5 м2).  

-шелушение и выбоина а/б покрытия на примыкании к ул.Мичуринской (2м2); на ул.Радостная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (13м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 19 (3м.п.),  на ул.Лазурная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Архитектурной до дома № 20 по обоим  сторонам (20 м.п.);  

на ул.Гиляровского: 

-разрушение продольного шва перед остановкой «Радужная» (7 м.п.);  -разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении улиц Гиляровского -  

ФИО3 (20 м2); -разрушение а/б покрытия у дома № 48 б (3,5 м ); 

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Овсяной (2 м2);-разрушение а/б  покрытия на пересечении с ул.Хлеборобной (2 м2);  

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Тенистой (2 м2);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Январской (2 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 101 (1,5 м2); -разрушение а/б покрытия на остановке «Тенистая(2 м2); по ул.Январская: 

-разрушение шва перед пересечением с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушены отмостки у колодцев на всем протяжении ул.Январской (4,5 м2);  

-коллейность на остановке общественного транспорта (6 м2);  на дороге - дублер по ул.Мичуринской (от светофора за ул.Свободной до  

ул.Январской): 

-разрушение а/б покрытия на съезде с ул.Мичуринской (5 м2);  -разрушение продольного шва у дома № 319 (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 275 (2 м2); -провал у водопропускной трубы (3 м2). на ул.ФИО3: 

-разрушение продольного шва на всем протяжении улицы (640 м.п.);  -разрушение шва а/б покрытия за пересечением с ул.Гиляровского (15 м.п.);  

-шелушение а/б покрытия у пересечения с ул.Гиляровского (2 м2); -разрушение на пересечении с ул.Прямой (3 м2). на ул.Прямая: 

-разрушение продольного шва а/б покрытия на всем протяжении (813 м.п);  

-разрушение швов на примыкании со всеми улицами (32 м.п);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Снежной (1,5 м2).  

на ул.Мичуринская (от ул.Магистральной до Северного обхода);  -шелушение а/б покрытия на примыкании к ул.Магистральной, напротив  

автомагазина (3 м2); 

-провал дождеприемного колодца на остановке общественного транспорта  (1,5 м2);  

-разрушение отмосток люков на дождеприемных колодцах в районе  микрорайона ЖБИ (3 м2);  

-разрушение на 2 съездах к домам (15 м2); 

-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с ул.ФИО4 (15 м2);  -разрушены отмостки колодцев на пересечении с ул.ФИО4 (аварийные) (2м2);  

-выкрашивание верхнего слоя а/б покрытия за пересечением с ул.ФИО4 (20 м2);  -разрушение а/б покрытия при съезде с АЗС «Октан», глубокие ямы,  

шелушение, разрушение шва (15 м2) 

-провал велодорожки/тротуара напротив ТРЦ «Карусель» (15 м2);  -провал а/б покрытия перед надземным пешеходным переходом (3 м2);  

-разрушение а/б покрытия при въезде на АЗС «Октан» (7 м2);  -разрушение отмостки люка у надземного пешеходного перехода (2 м2);  

-разрушение шва а/б покрытия длинной 20 м от надземного пешеходного 

перехода (20 м.п.);-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с  ул.Агапкина (15 м2);  

-разрушение дождеприемной решетки на пересечении с ул.Агапкина (2 м2);  -разрушение на съезде к ул. малой Мичуринской (3 м2);  

-разрушение шва на остановке «ФИО3 (5м.п.);  -разрушение технического тротуара и пешеходного тротуара у дома № 321 (5 м2);  

-разрушение поперечного шва перед стелой «Тамбов» (4 м.п.);  -разрушение продольного шва от разделительной до Северного обхода (17 м.п.);  

-разрушение поперечного шва на пересечении с ул.верхней Селезневской (4.п.);  -разрушение а/б покрытия на съезде в микрорайон Солнечный (15 м2);  

-разрушение а/б покрытия на остановке у «Центр единоборств» (6 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 142 к.2 (5 м2).  

на ул.Славянская: 

-разрушение продольного шва напротив дома № 1 (6 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 2 (30 м.п.);  -разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (6 м.п.).  на ул.Пестрая:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.ФИО3 по обе стороны (40м.п.); на ул.Проезжая: -разрушения отсутствуют. на ул.Архитектурная 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (7м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 10 (3 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (7м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 48 до ул.Гиляровского (20м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 56 (20 м.п.);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.м.Мичуринской (4 м );  

-прорастание травы на тротуаре от ул.м.Мичуринской в сторону  ул.Гиляровского (50 м.п.);  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.м.Мичуринской (1,5 м2). на ул.Ключевая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (6м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (6 м.п.).  на ул.Черноземная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 32 (50 м.п.);  на ул.Клубничная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 14 (20 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 20 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 24 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 39 (20 м.п.);-прорастание травы  

на тротуаре напротив дома № 840 (3 м.п.). на ул.Рыбакова: -прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского до д. № 41 слева (15 м.п.); 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 37 (4,5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 37 до дома № 35 (10 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 34 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 23 (4 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 13 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (15 м.п.).  

на л.Воскресная: -прорастание травы на тротуаре от ул.Веселой по обе стороны (40 м.п.). на ул.Хлеборобная: -разрушение шва на перекрестке с ул.Гиляровского (3 м2) на ул.Овсяная: 

-разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 6 (3 м );  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 1 в строну ул.Прямой (30 м.п.); 

-прорастание травы на тротуаре от дома № 29 до ул.Прямой (40 м.п.);  -разрушение шва на примыкании с ул.Прямой (2 м2).  

на ул.Ровная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от ул.Прямой слева (30 м.п.).  на ул.Воробьиная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по правой стороне (30 м.п.). на ул.Тепличная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 31 (20 м.п.);  -провал колодца на тротуаре напротив дома № 18 (3 м2).  

на ул.Земляничная: 

-разрушение шва на примыкании к ул.Гиляровского (2 м2).  на ул.Живописная:  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.Гиляровского (4 м2); 

-прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского (30 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 12(10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 27 до дома № 31 (20 м.п.);  

на ул.Тенистая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9, в сторону  

ул.Гиляровского (30 м.п.). 

на ул.Старикова:  

-разрушение шва на примыкании с ул.Гиляровского (2,5 м2);  -шелушение а/б покрытия на перекрестке с ул.Прямой (3 м2).  на ул.Цветная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по обе стороны (60 м.п.);  на ул.Радужная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 7 (15 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского в сторону ул.Рылеева  

-разрушение а/б покрытия напротив дома № 10 (2 м ). на ул.Белокаменная: -разрушение а/б покрытия на тротуаре при съезде с ул.Свободной (2 м2); -разрушение на съезде к дому № 6 (2 м2). на ул.Янтарная: 

-разрушение шва на примыкании к ул.Гиляровского (2,5 м2).  на ул.Шатрова:  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 16 до ул.Архитектурной (20 м.п.);  на ул.Раздольная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 22 (7 м.п.);  на ул. Ладыгина:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (20 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (20 м.п.);  

-разрушение шва на перекрестке с ул.Рылеева (2 м2). на ул.Веселая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 17 (5 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 28 (7 м.п.).  

В соответствии со статьей 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в  

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается  

рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или  

уменьшить размер исковых требований. 

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает  

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и  

обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по  

существу. 

Расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167- 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации 

СУД РЕШИЛ: 

 1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Айди-Партнер» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней с момента вступления  решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства, предусмотренные  муниципальными контрактами  № 115333 от 17.10.2012, № 115327 от 17.10.2012, № 115329  от 17.10.2012 на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город  

Тамбов по объектам «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичуринской в  

границах микрорайона «Уютный» (от ул. Агапкина до ул. Свободной), в границах  

микрорайона «Солнечный» (от ул. Свободной до Северного обхода), в границах  

микрорайона «Московский» (от ул. ФИО4 до ул. Агапкина), в границах микрорайона  

«ЖБИ» (от ул. Магистральной до ул. ФИО4) в г. Тамбове Тамбовской области» от  

17.10.2012; муниципальным контрактом № 116375 от 29.10.2012 на выполнение работ для  

муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по объекту «Строительство  

сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона «Московский» в границах  

улиц Агапкина, Мичуринской, ФИО4, ФИО5 в г. Тамбов (Автомобильные  

дороги). Улица генерал-майора ФИО2»; муниципальным контрактом № 115335 от  

15.10.2012 на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город  

Тамбов по объекту «Строительство автодорог по микрорайону «Северный» г. Тамбова»   в части устранения дефектов асфальтобетонного покрытия: на ул.генерал майора ФИО2: 

-разрушение отмостоки колодца подземных инженерных коммуникаций  напротив детского садика (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия на примыкании к ул.ФИО4 (1 м2),  на ул.Свободная,  

-разрушение продольного шва напротив дома № 77 (2,5 м2);  -разрушение а/б покрытия перед пересечением с ул.Гиляровского (1,5 м2);  

-разрушение а/б на остановке общественного транспорта «ФИО2» (1,5 м2);  -разрушение продольного шва на остановке общественного транспорта  

«Гиляровского) (4 м2); 

-разрушение тротуара справа от остановки общественного транспорта  «Рылеева» (3,5 м2).  

-шелушение и выбоина а/б покрытия на примыкании к ул.Мичуринской (2м2); на ул.Радостная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (4м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (13м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 19 (3м.п.),  на ул.Лазурная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Архитектурной до дома № 20 по обоим  сторонам (20 м.п.);  

на ул.Гиляровского: -разрушение продольного шва перед остановкой «Радужная» (7 м.п.); 

-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении улиц Гиляровского -  ФИО3 (20 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 48 б (3,5 м ); 

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Овсяной (2 м2);-разрушение а/б  

покрытия на пересечении с ул.Хлеборобной (2 м2); 

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Тенистой (2 м2);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Январской (2 м2);  -разрушение а/б покрытия у дома № 101 (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия на остановке «Тенистая(2 м2); по ул.Январская: 

-разрушение шва перед пересечением с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушены отмостки у колодцев на всем протяжении ул.Январской (4,5 м2);  

-коллейность на остановке общественного транспорта (6 м2);  на дороге - дублер по ул.Мичуринской (от светофора за ул.Свободной до  

ул.Январской): 

-разрушение продольного шва у дома № 319 (1,5 м2);  

-разрушение а/б покрытия у дома № 275 (2 м2); -провал у водопропускной трубы (3 м2). на ул.ФИО3: -разрушение продольного шва на всем протяжении улицы (640 м.п.); 

-разрушение шва а/б покрытия за пересечением с ул.Гиляровского (15 м.п.);  -шелушение а/б покрытия у пересечения с ул.Гиляровского (2 м2);  

-разрушение на пересечении с ул.Прямой (3 м2). на ул.Прямая: 

-разрушение продольного шва а/б покрытия на всем протяжении (813 м.п);  -разрушение швов на примыкании со всеми улицами (32 м.п);  

-разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.Снежной (1,5 м2).  на ул.Мичуринская (от ул.Магистральной до Северного обхода);  

-шелушение а/б покрытия на примыкании к ул.Магистральной, напротив  

автомагазина (3 м2); 

-провал дождеприемного колодца на остановке общественного транспорта  (1,5 м2);  

-разрушение отмосток люков на дождеприемных колодцах в районе  

микрорайона ЖБИ (3 м2); -разрушение на 2 съездах к домам (15 м2); 

-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с ул.ФИО4 (15 м2);  -разрушены отмостки колодцев на пересечении с ул.ФИО4 (аварийные) (2м2);  

-выкрашивание верхнего слоя а/б покрытия за пересечением с ул.ФИО4 (20 м2);  -разрушение а/б покрытия при съезде с АЗС «Октан», глубокие ямы,  

шелушение, разрушение шва (15 м2) 

-провал велодорожки/тротуара напротив ТРЦ «Карусель» (15 м2);  -провал а/б покрытия перед надземным пешеходным переходом (3 м2);  

-разрушение а/б покрытия при въезде на АЗС «Октан» (7 м2);  -разрушение отмостки люка у надземного пешеходного перехода (2 м2);  

-разрушение шва а/б покрытия длинной 20 м от надземного пешеходного 

перехода (20 м.п.);-разрушение а/б покрытия на кольцевом пересечении с  

ул.Агапкина (15 м2); 

-разрушение дождеприемной решетки на пересечении с ул.Агапкина (2 м2);  -разрушение на съезде к ул. малой Мичуринской (3 м2);  

-разрушение шва на остановке «ФИО3 (5м.п.);  -разрушение технического тротуара и пешеходного тротуара у дома № 321 (5 м2);  

-разрушение поперечного шва перед стелой «Тамбов» (4 м.п.);  -разрушение продольного шва от разделительной до Северного обхода (17 м.п.);  

-разрушение поперечного шва на пересечении с ул.верхней Селезневской (4.п.);  -разрушение а/б покрытия на съезде в микрорайон Солнечный (15 м2);  

-разрушение а/б покрытия на остановке у «Центр единоборств» (6 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 142 к.2 (5 м2).  

на ул.Славянская: 

-разрушение продольного шва напротив дома № 1 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 2 (30 м.п.);  

-разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (6 м.п.).  на ул.Пестрая:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.ФИО3 по обе стороны (40м.п.); на ул.Проезжая: -разрушения отсутствуют. на ул.Архитектурная -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (7м.п.); 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 10 (3 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 15 (7м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 48 до ул.Гиляровского (20м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 56 (20 м.п.);  -разрушение а/б покрытия на пересечении с ул.м.Мичуринской (4 м );  

-прорастание травы на тротуаре от ул.м.Мичуринской в сторону  ул.Гиляровского (50 м.п.);  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.м.Мичуринской (1,5 м2).  на ул.Ключевая:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (6м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (6 м.п.).  на ул.Черноземная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 32 (50 м.п.);  на ул.Клубничная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 8 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 14 (20 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 20 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 24 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 39 (20 м.п.);-прорастание травы  

на тротуаре напротив дома № 840 (3 м.п.). на ул.Рыбакова: -прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского до д. № 41 слева (15 м.п.); 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 37 (4,5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 37 до дома № 35 (10 м.п.);  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 34 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 23 (4 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 13 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (15 м.п.).  

на л.Воскресная: -прорастание травы на тротуаре от ул.Веселой по обе стороны (40 м.п.). на ул.Хлеборобная: -разрушение шва на перекрестке с ул.Гиляровского (3 м2) на ул.Овсяная: 

-разрушение шва на пересечении с ул.Гиляровского (3 м2);  -разрушение а/б покрытия напротив дома № 6 (3 м );  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 1 в строну ул.Прямой (30 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 29 до ул.Прямой (40 м.п.);  

-разрушение шва на примыкании с ул.Прямой (2 м2). на ул.Ровная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от ул.Прямой слева (30 м.п.).  на ул.Воробьиная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по правой стороне (30 м.п.). на ул.Тепличная: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 31 (20 м.п.);  -провал колодца на тротуаре напротив дома № 18 (3 м2).  

на ул.Земляничная: 

на ул.Живописная:  

-разрушение тротуара на пересечении с ул.Гиляровского (4 м2); 

-прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского (30 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 12(10 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 27 до дома № 31 (20 м.п.);  

на ул.Тенистая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9 (8 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 11 (6м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 9, в сторону  

ул.Гиляровского (30 м.п.). на ул.Старикова: 

-разрушение шва на примыкании с ул.Гиляровского (2,5 м2);  -шелушение а/б покрытия на перекрестке с ул.Прямой (3 м2).  на ул.Цветная:  

-прорастание травы на тротуаре от ул.Хлеборобной по обе стороны (60 м.п.);  на ул.Радужная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 7 (15 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от ул.Гиляровского в сторону ул.Рылеева  

-разрушение а/б покрытия напротив дома № 10 (2 м ). на ул.Белокаменная: -разрушение а/б покрытия на тротуаре при съезде с ул.Свободной (2 м2); -разрушение на съезде к дому № 6 (2 м2). на ул.Янтарная: 

-разрушение шва на примыкании к ул.Гиляровского (2,5 м2).  на ул.Шатрова:  

-прорастание травы на тротуаре от дома № 16 до ул.Архитектурной (20 м.п.);  на ул.Раздольная:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 22 (7 м.п.);  на ул. Ладыгина:  

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 6 (20 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре от дома № 1 до ул.Рылеева (20 м.п.);  

-разрушение шва на перекрестке с ул.Рылеева (2 м2). на ул.Веселая: 

-прорастание травы на тротуаре напротив дома № 3 (7 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 17 (5 м.п.);  -прорастание травы на тротуаре напротив дома № 28 (7 м.п.).  

 3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айди-Партнер» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения  «Дирекция городских дорог» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные  

расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, 

<

...>).  

Судья А.В. Истомин