АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-10726/2017

г. Чебоксары

23 ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.11.2017.

Полный текст решения изготовлен 23.11.2017.  

 

 Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2, 428037, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ОГРНИП 313213016400019, ИНН 

<

***>

к акционерному обществу "ТУС", 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Мичмана ФИО3, д. 39, пом. 7, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании 1007500 руб.,

при участии:

от истца - ФИО4 по доверенности от 16.03.2017 серии 21АА №0864504 (л.д. 60),

 

индивидуальный предприниматель ФИО2 обратилась в суд с иском к акционерному обществу "ТУС" о взыскании 1007500 руб. долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате в рамках договоров: от 18.05.2016 №36/16, 37/16, 38/16; от 23.05.2016 №39/16;  от 01.06.2016 №41/16; от 12.07.2016 №51/16; от 17.10.2016 №82/16.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв суду не представил. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор на составление проекта производства маркшейдерских работ по Шешкарскому-2 месторождению строительных песков от 18.05.2016 №36/16, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по составлению проекта производства маркшейдерских работ по Шешкарскому-2 месторождению строительных песков (работа) и согласованию проекта производства маркшейдерских работ с Приволжским Управлением Ростехнадзора (г. Казань).

Согласно пункту 2.1 договора от 18.05.2016 №36/16 общая стоимость работ по договору составляет 50000 руб., без НДС.

По согласованию сторон заказчик перечисляет в течение пяти календарных дней со дня подписания договора на расчетный счет исполнителя в качестве предварительной оплаты – 25000 руб. (пункт 2.2 договора от 18.05.2016 №36/16).

В соответствии с пунктом 2.3 договора от 18.05.2016 №36/16 окончательный расчет производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.

Из пункта 3.1 договора от 18.05.2016 №36/16 следует, что сроки написания проекта и отправки его на согласование составляет 20  дней со дня получения от заказчика всех необходимых материалов для выполнения работы и оплаты авансового платежа. Согласование выполняется в сроки, установленные согласующими органами.

Согласно пункту 4.1 договора от 18.05.2016 №36/16 по завершению работ исполнитель представляет заказчику проект производства маркшейдерских работ по Шешкарскому-2 месторождению строительных песков в 1 экземпляре на бумажном носителе, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением письма о согласовании.

В соответствии с пунктом 4.2 договора от 18.05.2016 №36/16 работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 18.05.2016 №36/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 16.06.2016 №78 о выполнении работ по составлению проекта производства маркшейдерских работ по Шешкарскому-2 месторождению строительных песков на сумму 50000 руб.(л.д. 17). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор на геолого-маркшейдерское обслуживание Шешкарского-2 месторождения строительных песков на 2016 год от 18.05.2016 №37/16, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по геолого-маркшейдерскому обслуживанию Шешксарского-2 месторождения строительных песков в навигацию 2016 года.

Срок действия договора от 18.05.2016 №37/16: начало – 18.05.2016, окончание 31.12.2016 (пункт 1.3 договора).

Согласно пункту 2.1 договора от 18.05.2016 №37/16 общая стоимость работ составляет 135000 руб. без НДС.

По согласованию сторон заказчик перечисляет в течение пяти календарных дней со дня подписания договора на расчетный счет исполнителя в качестве предварительной оплаты –67500 руб. (пункт 2.2 договора от 18.05.2016 №37/16).

В соответствии с пунктом 2.3 договора от 18.05.2016 №37/16 окончательный расчет производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.

По завершению работ исполнитель передает заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ с приложением законченных материалов работ по предмету договора. Работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных работ (пункты 3.4, 3.5 договора от 18.05.2016 №37/16).

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 18.05.2016 №37/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 11.11.2016 №154 о выполнении работ по геолого-маркшейдерскому обслуживанию Шешкарского-2 месторождения строительных песков в 2016 г. на сумму 135000 руб.(л.д. 23). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (автор) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор от 18.05.2016 №38/16. по условиям которого автор обязуется осуществлять авторский надзор за разработкой "Шешкарского-2" месторождения строительных песков (объект) в 2016 году.

Согласно пункту 2.1 договора от 18.05.2016 №38/16 общая стоимость работ составляет 30000 руб. без НДС.

По согласованию сторон заказчик перечисляет в течение пяти календарных дней со дня подписания договора на расчетный счет исполнителя в качестве предварительной оплаты – 15000 руб. (пункт 2.2 договора от 18.05.2016 №38/16).

В соответствии с пунктом 2.3 договора от 18.05.2016 №38/16 окончательный расчет производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 18.05.2016 №38/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 11.11.2016 №153 о выполнении работ по авторскому надзору за разработкой Шешкарского-2 месторождения строительных песков на сумму30000 руб. (л.д. 22). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор на составление плана развития горных работ по Шешкарскому-2 месторождению от 23.05.2016 №39/16 по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по составлению плана развития горных работ по Шешкарскому-2 месторождению на 2016 года и согласованию плана развития с Приволжским Управлением Ростехнадзора (г. Казань).

Согласно  пункту 2.1 договора от 23.05.2016 №39/16 общая стоимость работ по договору составляет 135000 руб., без НДС.

По согласованию сторон заказчик перечисляет в течение пяти календарных дней со дня подписания договора на расчетный счет исполнителя в качестве предварительной оплаты – 67000 руб. (пункт 2.2 договора от 23.05.2016 №39/16).

Из пункта 3.1 договора от 23.05.2016 №39/16 следует, что сроки написания проекта и отправки его на согласование составляет 30 дней со дня получения от заказчика всех необходимой информации для выполнения работы и оплаты авансового платежа. Согласование выполняется в сроки, установленные согласующими органами.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 23.05.2016 №39/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 05.07..2016 №90 о выполнении работ по составлению плана развития горных работ на Шешкарское-2 месторождение строительных песков на 2016 г. на сумму 135000 руб. (л.д. 18). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор на выполнение проектных работ от 01.06.2016 №41/16, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проектной документации: технического проекта разработки Шешкарского-2 месторождения строительных песков, расположенного на  траверзе 1146,0-1147,5 км судового хода р. Волга Моргаушского района Чувашской Республики (работа).

Согласно  пункту 4.1 договора от 01.06.2016 №41/16 общая стоимость работ по договору составляет 800000 руб., без НДС.

Оплата производится авансовым платежом в размере 50% от договорной цены в сумме 400000 руб., без НДС. Окончательная оплата производится в течение 10 дней с момента получения заказчиком согласованной проектной документации и подписания акта выполненных работ (пункт 4.2 договора от 01.06.2016 №41/16).

Из пункта 3.1 договора от  01.06.2016 №41/16 следует, что сроки выполнения работ составляют 60 дней со дня предоставления заказчиком исходных данных для проектирования и оплаты авансового платежа. 

Согласно пункту 5.1 договора от 01.06.2016 №41/16 при завершении работ исполнитель представляет заказчику один экземпляр согласованной проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 01.06.2016 №41/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 02.09.2016 №105 о выполнении работ по составлению проектной документации на разработку Шешкарского-2 месторождения строительных песков на сумму 800000 руб. (л.д. 19). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС"  (заказчик) заключен договор на составление проекта горного отвода на Шешкарское-2 от 12.07.2016 №51/16, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по составлению проекта горного отвода на Шешкарское-2 месторождению строительных песков (работа) и согласованию проекта с Министерством природных ресурсов Чувашской Республики.

Согласно пункту 2.1 договора от 12.07.2016 №51/16 общая стоимость работ по договору составляет 95000 руб., без НДС.

По согласованию сторон заказчик перечисляет в течение пяти календарных дней со дня подписания договора на расчетный счет исполнителя в качестве предварительной оплаты – 47500 руб. (пункт 2.2 договора от 12.07.2016 №51/16).

В соответствии с пунктом 2.3 договора от 12.07.2016 №51/16 окончательный расчет производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.

Из пункта 3.1 договора от 12.07.2016 №51/16 следует, что сроки написания проекта и отправки его на согласование составляет  30 дней со дня получения от заказчика всех необходимых материалов для выполнения работы и оплаты авансового платежа. Согласование выполняется в сроки, установленные согласующими органами.

Согласно пункту 4.1 договора от 12.07.2016 №51/16 по завершению работ исполнитель представляет заказчику горноотводный акт Шешкарского-2 месторождению строительных песков.

В соответствии с пунктом 4.2 договора от 12.07.2016 №51/16 работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 12.07.2016 №51/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 01.11.2016 №142 о выполнении работ по составлению проекта горного отвода на Шешкарское-2 месторождению строительных песков на сумму 95000 руб. (л.д. 21). 

 

Индивидуальным предпринимателем ФИО2 (исполнитель) и закрытым акционерным обществом "ТУС" (заказчик) заключен договор от 17.10.2016 №82/16, по условиям которого исполнитель  обязуется выполнить работы по проведению русловой изыскательской съемки месторождения Шешкарское-2 за левой кромкой судового хода река Волга 1146,8-1148,3, а заказчик обязуется принят и оплатить работы.

Согласно пункту 1.1 договора от 17.10.2016 №82/16 срок выполнения работ – октябрь-ноябрь 2016 года.

Из пункта 3.1, 3.2 договора от 17.10.2016 №82/16 следует, что общая стоимость работ по договору составляет 125000 руб., без НДС. Заказчик оплачивает  работу в размере: 50% предоплаты от общей стоимости работы; окончательный расчет производится в течение 5 дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

В соответствии с пунктом 2.1 договора от 17.10.2016 №82/16 работа считается выполненной с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

В подтверждение выполнения истцом работ по договору от 17.10.2016 №82/16 в материалы дела представлен подписанный сторонами акт от 31.10.2016 №141 о выполнении работ по проведению русловой изыскательской съемки месторождения Шешкарское-2  месторождения строительных песков на сумму 125000 руб. (л.д. 20). 

24.07.2017 истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием оплатить задолженность в сумме 1007500 руб. по договорам от 18.05.2016 №36/16, 37/16, 38/16; от 23.05.2016 №39/16; от 01.06.2016 №41/16; от 12.07.2016 №51/16; от 17.10.2016 №82/16, которое последним оставлено без ответа.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных в рамках договоров от 18.05.2016 №36/16, 37/16, 38/16; от 23.05.2016 №39/16; от 01.06.2016 №41/16; от 12.07.2016 №51/16; от 17.10.2016 №82/16, послужило основанием для обращения истца с исковым заявлением в арбитражный суд. 

 

Оценив правоотношения сторон по оформлению договоров от 18.05.2016 №36/16, 37/16, 38/16; от 23.05.2016 №39/16;  от 01.06.2016 №41/16; от 12.07.2016 №51/16; от 17.10.2016 №82/16 суд пришел к выводу, что между сторонами установлены правоотношения, регулируемые гражданским законодательством по договору подряда.

В силу стати 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В пунктах 1 и 4 статьи 709 Кодекса предусмотрено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, суд считает доказанным факт выполнения работ:

1) по договору на составление проекта производства маркшейдерских работ по Шешкарскому-2 месторождению строительных песков от 18.05.2016 №36/16 на сумму 50000 руб.;

2) по договору на геолого-маркшейдерское обслуживание Шешкарского-2 месторождения строительных песков на 2016 год от 18.05.2016 №37/16 на сумму 135000 руб.;

3) по авторскому договору от 18.05.2016 №38/16 на сумму 30000 руб.;

4) по договору на составление плана развития горных работ по Шешкарскому-2 месторождению от 23.05.2016 №39/16 на сумму 135000 руб.;

5) по договору на выполнение проектных работ от 01.06.2016 №41/16 на сумму 800000 руб.;

6) по договору  на составление проекта горного отвода на Шешкарское-2 от 12.07.2016 №51/16 на сумму 95000 руб.;

7) по договору от 17.10.2016 №82/16 на сумму 125000 руб., всего на сумму 1370000 руб.

Истец указывает, что оплата работ ответчика по договорам от 18.05.2016 №36/16, 37/16, 38/16; от 23.05.2016 №39/16; от 01.06.2016 №41/16; от 12.07.2016 №51/16; от 17.10.2016 №82/16 произведена частично, размер долга оставляет 1007500 руб.

Ответчик сумму долга не оспорил, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства уплаты долга суду не представил.

При указанных обстоятельствах, предусмотренная законом и указанными договорами обязанность по оплате выполненных работ ответчиком исполнена ненадлежащим образом; задолженность по оплате долга составляет 1007500 руб.

При указанных обстоятельствах суд считает требование истца о взыскании с ответчика долга в сумме 1007500 руб. подлежащим удовлетворению в полном объеме как основанное на законе, обоснованное материалами дела и ответчиком не оспоренное.

Истец также просит взыскать с ответчика 10000 руб. расходов на оплату услуг представителя.  

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007   № 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах", для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт, значение имеет единственное обстоятельство: понесены ли соответствующие расходы. Независимо от способа определения размера вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты (например, только в случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы.

Таким образом, право на возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя возникает при условии фактического несения стороной затрат, получателем которых является лицо, оказывающее юридические услуги, при этом размер указанных затрат определяется соглашением между указанными лицами.

В обоснование заявления на возмещение расходов на услуги представителя в материалы дела представлены: договор на оказание  консультационных и представительских услуг от 30.08.2017, заключенный истцом и ФИО4, расписка в получении денежных средств на сумму 10000 руб. (л.д. 58-59)

Оценив представленные в дело доказательства, учитывая объем и сложность дела, суд считает разумным и обоснованным заявленный размер судебных расходов на оплату услуг представителя (составление претензии и искового заявления; сбор и подготовка документов, подтверждающих основания для подачи искового заявления), понесенных истцом в связи с рассмотрением настоящего дела в арбитражном суде. 

Расходы истца на оплату юридических услуг, а также расходы по государственной пошлине в сумме 23075 руб., подтвержденные платежным поручением от 30.08.2017 №105, суд относит на ответчика согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "ТУС" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 1007500 (Один миллион семь тысяч пятьсот) руб. долга, 23075 (Двадцать три тысячи семьдесят пять) руб. расходов по государственной пошлине, 10000 (Десять тысяч) руб. судебных издержек.     

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

Н.В. Юрусова