Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации   

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А09-11644/2021

город Брянск

20 июня 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14 июня 2023 года.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Ивашиной Я.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассматривает в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Брянской области, г. Брянск, 

к ООО «ЛиК-строймаркет», п. Путевка, Брянский р-н, Брянская область, 

третье лицо - ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области», 

о взыскании 971 071 руб. 98 коп.,    

при участии в судебном заседании:

от истца  не явились;

от ответчика – ФИО2 (доверенность от 08.04.2022);

от третьего лица - не явились, 

УСТАНОВИЛ:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов по Брянской области, г. Брянск, обратился в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к ООО «ЛиК-строймаркет», п. Путевка, Брянский р-н, Брянская обл., о взыскании 50 000 руб. 00 коп., начисленных в связи с неисполнением условий договоров №95.КР.2021 на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 29.12.2021 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением арбитражного суда от 25.02.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований до 971 071,98 руб. штрафа, начисленных в связи с неисполнением условий договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по договору  №95.КР.2021 штраф в размере 186 864 руб. 98 коп., №141.КР.2021 штраф в размере 495 923 руб. 00 коп., №174.КР.2021 штраф в размере 288 284 руб. 00 коп.

Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением суда от 10.01.2023 произведена замена судьи Земченковой Г.В. по рассмотрениюделаА09-11644/2021 на судью Ивашину Я.В. (т. 2 л.д. 114).

Ответчик исковые требования не признал, по основаниям, изложенным в письменных отзывах (т.1л.д. 74-75, л.д. 123-125,149-154). В ходе рассмотрения дела ответчик заявил ходатайство о приостановлении производства по делу, до вступления в законную силу судебного акта по делу А09-5440/2021 и А09-5446/2021.

Истец представил письменный отзыв на ходатайство о приостановлении производства по делу.

Впоследствии ходатайство о приостановлении производства по делу ответчик не поддержал.

В ходе рассмотрения дела от ответчика поступило ходатайство о фальсификации доказательств, о приостановлении производства по делу.

В последующем ответчик не поддержал заявленные ходатайства.

В судебном заседании 14.06.2023 ответчик заявил ходатайство об уменьшении неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Истец оставил рассмотрение данного вопроса на усмотрение суда.

Третье лицо, позицию по заявленным требованиям, изложило в письменном отзыве на иск (т. 12 л.д. 78-79). 

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».

Дело рассмотрено в соответствие не явившихся представителей в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Между Региональным фондом капитального ремонта МКД Брянской области (заказчиком) и ООО «ЛиК-строймаркет» (подрядчиком) были заключены договоры №95.КР.2021 от 21.05.2021, на выполнение работ по адресу: Брянская обл., пгт. ФИО3, ул. Ленина, д.22,  №141.КР.2021 от 28.05.2021 на выполнение работ по адресу: 

<

...>,  №174.КР.2021 от 31.05.2021  на выполнение работ по адресу: 

<

...>, по условиям которых подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенных в соответствии с условиями договоров  и проектной (сметной) документацией (пункт 1.1 договоров).

Сроки выполнения работ по договору №95.КР.2021 от 21.05.2021 определены сторонами с 21.05.2021 до 19.07.2021  (пункт 2.2 договора, Приложение №1 к договору).

Цена работ по договору составляет 1 868 649,80 руб. 65 коп. (без НДС) (пункт 3.1 договора, Приложение №1 к договору).

Сроки выполнения работ по договору №141.КР.2021 от 28.05.2021 определены сторонами с 28.05.2021 до 25.08.2021  (пункт 2.2 договора, Приложение №1 к договору).

Цена работ по договору составляет 4 959 230 руб. (без НДС) (пункт 3.1 договора, Приложение №1 к договору).

Сроки выполнения работ по договору №174.КР.2021 от 31.05.2021 определены сторонами с 31.05.2021 до 13.08.2021  (пункт 2.2 договора, Приложение №1 к договору).

Цена работ по договору составляет 2 882 840 руб. (без НДС) (пункт 3.1 договора, Приложение №1 к договору).

03.06.2021 комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта МКД Брянской области и организации осуществляющей  строительный контроль произведен осмотр указанных объектов, о чем составлен акт осмотра (т.1 л.д. 38-39). При визуальном осмотре установлено, что подрядная организация, ООО «ЛиК-строймаркет» не разместило информацию о проведении капитального ремонта кровли на многоквартирном доме. На момент осмотра установлено, что работы по капитальному ремонту кровли не ведутся, к работам не приступили. 

Подпунктом б) пункта 11.3 договоров предусмотрено, что заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае задержки подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно пункту 10.6 договора в случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 11.3 договора, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10% стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). Штраф должен быть уплачен в течение трех банковских дней со дня получения уведомления о расторжении. Днем получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке считается десятый день, следующий за днем направления заказчиком уведомления о расторжении, если подрядчик не получит такое уведомление ранее. 

Письмами исх.№2720 от 23.06.2021, №2719 от 23.06.2021, №2718 от 23.06.2021 Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области направил обществу «ЛиК-строймаркет» уведомления об одностороннем отказе от исполнения договоров №95.КР.2021 от 21.05.2021, №141.КР.2021 от 28.05.2021 №174.КР.2021 от 31.05.2021  по основанию, предусмотренному подпунктом б) пункта 11.3 договоров, а также просил оплатить штраф (т. 1 л.д. 40-45).

Полученные ответчиком претензии оставлены без ответа, изложенные в них требования в добровольном порядке не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 ГК РФ).

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 ГК РФ).

Подпунктом «б» пункта 226 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства России от 01.07.2016 №615 (далее - Постановление №615) установлено, что заказчик вправе расторгнуть договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

В пункте 228 Постановления №615 указано, что договор о проведении капитального ремонта должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 226 настоящего Положения, подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора о проведении капитального ремонта в порядке, установленном договором о проведении капитального ремонта. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

Аналогичные условия содержаться в п. 10.6 и п.п. б) п. 11.3 договоров №95.КР.2021 от 21.05.2021, №141.КР.2021 от 28.05.2021 №174.КР.2021 от 31.05.2021.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что обязательства по указанным договорам (выполнение работ) в установленный срок им не исполнены, в связи с чем, у заказчика на основании пункта 11.3 договоров возникло право на расторжение договоров в одностороннем порядке и взыскание штрафа по основаниям, предусмотренным пунктом 10.6 договоров.

Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области определил размер неустойки в размере 971 071,98 руб., в том числе по договору  №95.КР.2021 в размере 186 864 руб. 98 коп., №141.КР.2021 в размере 495 923 руб. 00 коп., №174.КР.2021 в размере 288 284 руб. 00 коп. в пределах 10% от стоимости работ (цены) по каждому договору.

Ответчик, не оспаривая факт невыполнения работ по заключенным договорам, указывает на то, что причиной их невыполнения стало увеличение стоимости стройматериалов. 

Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчик является коммерческой организацией (статья 50 ГК РФ), осуществляет предпринимательскую деятельность, каковой, согласно статье 2 ГК РФ, является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Субъекты предпринимательской деятельности осуществляют эту деятельность с определенной степенью риска и несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств независимо от наличия в этом их вины (абзац 3 пункт 1 статьи 2, пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Кроме того, суд учитывает, что решения о расторжении договоров №95.КР.2021 от 21.05.2021, №141.КР.2021 от 28.05.2021 №174.КР.2021 от 31.05.2021 ответчиком не оспорены, недействительными не признаны.

Таким образом, ответчик несет ответственность перед истцом за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам, в связи с чем, истец правомерно начислил ответчику штраф в общей сумме 971 071,98  руб. 

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера штрафа на основании статьи 333 ГК РФ.

 Истец оставил рассмотрение данного ходатайства на усмотрение суда.

Согласно части 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.          В силу части 2 указанной статьи уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2000 №263-О, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Суд должен установить реальное соотношение предъявленной неустойки и последствий невыполнения должником обязательства по договору, чтобы соблюсти правовой принцип возмещения имущественного ущерба, согласно которому не допускается применение мер карательного характера за нарушение договорных обязательств.

Пунктом 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума ВС РФ №7) установлено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

В пункте 77 постановления Пленума ВС РФ №7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). При этом следует учитывать, что степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел, рассматриваемым спорным правоотношениям сторон законодательством не предусмотрено. В каждом отдельном случае суд определяет такие пределы, учитывая обстоятельства каждого конкретного дела.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение.

При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Степень соразмерности заявленных истцом пени последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 АПК РФ.

Начисление неустойки по договору выполняет наряду с компенсационной также  обеспечительную функцию, целью которой является побуждение должника к надлежащему и своевременному выполнению работ.

Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области начислил штраф в связи с расторжением договоров, по причине просрочки исполнения. Но при этом Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области не указал на наличие убытков, которые у него возникли именно по причине просрочки. 

Истец не обосновал, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, соответствует начисленному штрафу.

Суд обязан учесть необходимость установления баланса интересов сторон.

Оценив условия договоров, суд пришел к выводу о чрезмерности размера штрафа, учитывая в том числе, что для заказчика и подрядчика в договоре предусмотрена неравная степень ответственности. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что установленная договором сумма штрафа в размере 10% от цены договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора является явно несоразмерной, несоизмеримой с нарушенными интересами заказчика, в связи с чем, заявленная Региональным фондом капитального ремонта МКД Брянской области к взысканию сумма штрафа подлежит снижению в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ до 97 107,10 руб. за неисполнение условий договоров №95.КР.2021 от 21.05.2021, №141.КР.2021 от 28.05.2021 №174.КР.2021 от 31.05.2021 на выполнение работ по капительному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах), составляющих 1% от цены договоров.

Данная сумма штрафа адекватна и соизмерима с нарушенным интересом, а также обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон, стимулируя стороны избегать подобных нарушений и исполнять обязательства надлежащим образом, и, в то же время, не позволяя заказчику получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд с настоящим иском, истец уплатил в бюджет 2 000 руб. государственной пошлины по платежному поручению №7220 от 11.11.2021 от первоначально заявленных 50 000 руб.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового Кодекса Российской Федерации госпошлина при цене иска 971 071,98 руб. составляет 22 421 руб.  

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2011 №81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. 

На основании вышеизложенного, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 20 421 руб. государственной пошлины доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л :

Исковые требования Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лик-Строймаркет» в пользу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области 97 107,10 руб. штрафа, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Лик-Строймаркет»  в доход федерального бюджета Российской Федерации 20 421 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

Судья                                                                                               Ивашина Я.В.