АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел. (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 50-59-57, 59-94-57; 

http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-10588/2022

03 марта 2025 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., руководствуясь 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Эффективная энергетика 7», г. Москва в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу освободить занимаемый обществом с ограниченной ответственностью «Эффективная энергетика 7» земельный участок общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «Союз-Центр» с кадастровым номером 40:03:110112:159, расположенный по адресу: 

<

...> производственная территория ООО КМДК «СОЮЗ-Центр», от остатков бетонных и металлических конструкций, строительного мусора и пр., для чего выполнить объем работ, установленный Техническим заключением ООО «ИТЦ Квалитет» № 15-22-ТЗ» по результатам обследования земельного участка № 40:03:110112:159: демонтаж металлоконструкций площадок под установку трансформаторов - 200 кг; демонтаж лотков для прокладки кабелей - 200 п.м.; демонтаж отмостки из тротуарных плит 1000х1000 мм -96 кв. м; демонтаж фундаментов под трансформаторы и РП 7шт. по 30м.куб. 7х30=210 м.кв., бетон В25 (М350); демонтаж фундаментов под опоры - 240м.куб., бетон В25 (М350); демонтаж трех труб диаметром 250х250х12мм 70 м.п.х3=210 м.п.; демонтаж металлоконструкций под опоры - 7 т.; обратная засыпка грунтом с послойной трамбовкой, глубина 1м 700м.кв. = 700 м.куб.  

Присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «Союз-Центр», г. Балабаново, Боровский район, Калужская область на случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Эффективная энергетика 7», г. Москва в трехмесячный срок решения арбитражного суда об обязании освободить занимаемый земельный участок с кадастровым номером 40:03:110112:159 судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения, по истечение 3 месяцев с даты вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эффективная энергетика 7», г. Москва в пользу общества с ограниченной ответственностью  

Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «Союз-Центр», г. Балабаново, Боровский район, Калужская область расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «Союз-Центр», г. Балабаново, Боровский район, Калужская область из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 178 169 руб., перечисленную по платежным поручениям № 10327 от 02.12.2022, № 902 от 08.02.2023.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.В. Иванова