АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-36566/2024

г. Нижний Новгород «05» февраля 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Елисейкина Евгения Петровича (шифр дела в отделе судьи 27-755), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соболевой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «СК Контур-НН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании 2 340 628 руб. 56 коп.,

в отсутствие представителей сторон,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СК Контур-НН» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородская строительная компания» о взыскании задолженности по договору подряда от 15.02.2023 № 04/2023 и от 22.01.2024 № 02/2024 в размере 2 340 628 руб. 56 коп., а также расходов по оплате госпошлины в размере 95 219 руб. 00 коп.

Определением суда от 19.11.2024 заявление принято к производству и назначено дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 05.02.2025.

Отзывом на иск ответчик исковые требования признал в полном объеме – 2 340 628 руб. 56 коп. долга.

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Изучив материалы дела, суд нашел, что признание ответчиком иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, и принял данное признание.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает дело в отсутствие представителей сторон.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующее.

Между ООО «НСК» (Генеральный подрядчик, Ответчик) и ООО «СК Контур-НН» (Субподрядчик, Истец) заключен договор подряда от 15.02.2023 № 04/2023, согласно которого Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный договором сроку выполнить работы по устройству горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей (№1 по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского».

Сроки выполнения работ определяются графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору).

Согласно п.4.1. Договора (в редакции доп. Соглашения № 1 от 17.04.2023 к договору подряда от 15.02.2023 № 04/2023): стоимость работ и материалов определена сторонами в соответствии со сметными расчетами №№ 1-2 (Приложения №№ 1.1-1.2 к Договору) и сметными расчетами №3-5 (Приложения №№1.1-1.3 к доп.соглашению №1 от 17.04.2023 к договору подряда от 15.02.2023 № 04/2023) и составляет 6 224 585 руб. 05 коп., включая НДС и оплачивается на основании графика производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора включает в себя стоимость следующих работ и материалов:

- мобилизация и демобилизация оборудования на строительную площадку;

- доставка, разгрузка, складирование и хранение материалов;

- разработка проекта производства работ;

- устройство горизонтальной гидроизоляции;

- стоимость основных (вспомогательных материалов);

- аренда машин и механизмов;

- прочие затраты, необходимые для производства работ в полном объеме.

Пунктом 5.2. Договора стороны согласовали, что Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику авансовый платеж на материалы в размере 3 694 136 руб. 74 коп., включая НДС 20% в сроки, согласованные сторонами в графике производства и финансирования работ (Приложение №2 к Договору), на основании выставленного Субподрядчиком счета.

По мере выполнения Субподрядчиком работ Генеральный подрядчик 1 (Один) раз в месяц производит текущие платежи по счетам Субподрядчика за фактически выполненные им работы, указанные в Актах по форме КС-2 и Справках по форме КС-3, подписанных Сторонами в отношении работ, выполненных в отчетном периоде.

Текущие платежи производятся в размере суммы, соответствующей стоимости работ, указанных в Акте КС-2 и Справке КС-3, за отчетный период, за вычетом: 

- суммы аванса пропорционально стоимости выполненного и принятого к оплате объема работ за отчетный период, включая НДС 20%, указанных в Акте КС-2 и Справке КС-3 (п.5.3. Договора).

Согласно п.5.4. Договора, текущие платежи производятся Генеральным подрядчиком на основании подписанных Сторонами Актов КС-2 и Справок КС-3, в следующем порядке:

а) в срок до 25-го числа каждого месяца Субподрядчик предоставляет на согласование Генеральному подрядчику следующие документы:

- счет на оплаты Субподрядчика на сумму фактически выполненных в отчетном периоде работ;

- Акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 3-х экземплярах;

- счет-фактуру;

- комплект исполнительной документации за отчетный период на выполненный объем работ (предоставляется с актами КС-2, КС-3) в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf (если не установлено иное);

- сканы накладных на поставку материалов.

б) После предоставления Субподрядчиком Генеральному подрядчику документов в соответствии с п.5.3. подпункта «а» договора, предоставленная документация рассматривается Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней и при отсутствии у Генерального подрядчика претензий и возражений Генеральным подрядчиком ежемесячно производится оплата работ не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным, с даты подписания Сторонами Акта о выполненных работах по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3.

Субподрядчик выполнил в срок и с надлежащим качеством работы на объекте и сдал их результат Генеральному подрядчику на общую сумму 6 139 869 руб. 90 коп:

- по Акту о приемке выполненных работ №1 от 31.03.2023. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.03.2023 на сумму 2 701 596 руб. 16 коп.;

- по Акту о приемке выполненных работ №2 от 15.04.2023. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 15.04.2023 на сумму 2 485 512 руб. 47 коп.; 

- по Акту о приемке выполненных работ №3 от 26.05.2023. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 26.05.2023 на сумму 952 761 руб. 27 коп.

Выполненные работы оплачены Генеральным подрядчиком по платежному поручению от 13.03.2023 №308, от 19.04.2023 №501, от 31.05.2023 №707, от 30.06.2023 №860 на общую сумму 5 832 876 руб. 41 коп.

Таким образом, задолженность ООО «НСК» в пользу ООО «СК Контур-НН» по договору подряда от 15.02.2023 № 04/2023 составила 306 993 руб. 49 коп.

22.01.2024между ООО «НСК» (Генеральный подрядчик) и ООО «СК Контур-НН» (Субподрядчик) был заключен договор подряда № 02/2024, согласно которого Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить комплекс по устройства кровли на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей №№1 по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского».

Субподрядчик обязался выполнить работы в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

Согласно п.4.1. Договора (в редакции доп. Соглашения № 1 от 01.04.2024 к Договору подряда от 22.01.2024 № 02/2024) стоимость работ и материалов, предусмотренных Договором, определена сторонами в соответствии со сметным расчетом №1 (Приложение №1 к Договору) и составляет 9 601 309 руб. 34 коп., в том числе НДС.

Цена Договора компенсирует Субподрядчику все его обязательства по настоящему Договору, включая полный комплекс затрат и издержек Субподрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе на необходимые для выполнения работ материалы основные и вспомогательные, изделия, оборудование, комплектующие, упаковку, протоколы и акты испытаний, доставку до объекта, сертификацию, таможенные сбора и пошлины, взимаемые на территории Российской Федерации (для импортной продукции), НДС, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость монтажных и демонтажных (при необходимости) работ, расходы по содержанию строительной площадки, вывоз мусора, эксплуатацию и аренду строительных машин, механизмов, обеспечение стропами, такелажем, средствами подмащивания, леса, подмости и т.п., накладные расходы, сметную прибыль, а также затраты на временное подключение и оплату временного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (п.4.2. Договора).

Пунктом 5.2. Договора стороны согласовали, что по мере выполнения Субподрядчиком работ Генеральный подрядчик 1 (Один) раз в месяц производит текущие платежи по счетам Субподрядчика за фактически выполненные им работы, указанные в Актах по форме КС-2 и Справках по форме КС-3, подписанных Сторонами в отношении работ, выполненных в отчетном периоде. Текущие платежи производятся в размере суммы, соответствующей стоимости работ, указанных в Акте КС-2и Справке КС-3 за отчетный период.

Согласно п.5.3. Договора текущие платежи производятся Генеральным подрядчиком на основании подписанных сторонами Актов КС-2 и Справок КС-3, в следующем порядке:

а) в срок до 20-го числа каждого месяца Субподрядчик предоставляет на согласование Генеральному подрядчику следующие документы:

- счет на оплаты Субподрядчика на сумму фактически выполненных в отчетном периоде работ;

- Акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 3-х экземплярах;

- счет-фактуру;

- комплект исполнительной документации за отчетный период на выполненный объем работ (предоставляется с актами КС-2, КС-3) в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf (если не установлено иное);

- сканы накладных на поставку материалов.

б) После предоставления Субподрядчиком Генеральному подрядчику документов в соответствии с п.5.3. подпункта «а» договора, предоставленная документация рассматривается Генеральным подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней и при отсутствии у Генерального подрядчика претензий и возражений Генеральным подрядчиком ежемесячно производится оплата работ не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным, с даты подписания Сторонами Акта о выполненных работах по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3.

Субподрядчик выполнил в срок и с надлежащим качеством работы на объекте и сдал их результат Генеральному подрядчику на общую сумму 9 601 309 руб. 34 коп:

- по Акту о приемке выполненных работ №1 за февраль 2024 от 29.02.2024. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 29.02.2024 на сумму 4 052 509 руб. 92 коп.;

- по Акту о приемке выполненных работ №2 за март 2024 от 31.03.2024. Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.03.2024 на сумму 5 548 799 руб. 42 коп. 

Выполненные работы оплачены Генеральным подрядчиком по платежному поручению от 27.03.2024 № 687, от 26.04.2024 № 893 на общую сумму 7 121 243 руб. 00 коп.

Таким образом, задолженность ООО «НСК» в пользу ООО «СК Конутр-НН» по договору подряда от 22.01.2024 № 02/2024 составила 2 480 066 руб. 34 коп.

Из материалов дела следует, что ООО «НСК» в пользу ООО «СК Конутр-НН» по договору подряда от 22.01.2024 № 02/2024 поставило строительные материалы, перевыставило затраты за использование башенного крана с услугами машиниста, предъявило к возмещению затраты по электричеству. Общая сумма встречных обязательств составила 446 431 руб. 27 коп.

Согласно акту взаимных расчетов за период с 01.01.2022-31.10.20244 сумма задолженности ООО «НСК» перед ООО «СК Контур-НН» составила 2 340 628 руб. 56 коп. 

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим мотивам.

Исходя из положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 14 Информационного письма N 51 при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Таким образом, оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ.

Факт выполнения истцом выполненных работ подтверждается материалами дела, а именно подписанными сторонами КС-2 и КС-3, не оспаривается ответчиком.

На основании изложенного, с учетом представленных в материалы дела доказательств, суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика задолженности по договорам подряда в размере 2 340 628 руб. 56 коп. заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК Контур-НН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 340 628 руб. 56 коп. задолженности по договору подряда от 15.02.2023 № 04/2023 и от 22.01.2024 № 02/2024, а также 28 565 руб. 70 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СК Контур-НН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 66 653 руб. 30 коп. государственной пошлины, уплаченной по платежному документу от 14.11.2024 № 1129. Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального бюджета уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Судья Е.П. Елисейкин