АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952) 24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

Дополнительное здание суда по адресу: 

 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А; тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761  

Е-mail: info@irkutsk.arbitr.ru; http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-28377/2019  

«16» марта 2020 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Липатовой Ю.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ «СИБИРИАДА» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664540,  

<

...>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО+» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 664056, 

<

...>),  

об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки, о взыскании 20 000 руб. 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО+» в срок  – не позднее трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки (дефекты), допущенные в процессе строительства многоквартирного дома по  адресу: г. Иркутск, ул. Бородина, д. 56, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а  именно:  

1. В помещении закрытой автостоянки установить лотки для сбора талой воды с  автомашин.  

2. Провести работы по гидроизоляции наружных и внутренних стен цокольного  этажа.  

3. Провести работы по засыпке с послойной утрамбовкой грунта вокруг всего  периметра многоквартирного жилого дома.  

4. Произвести ремонтно - восстановительные работы по устройству отмостки  вокруг здания в местах, где она просела и отошла от стен здания (в том числе и перед въездом  в помещении крытой автостоянки) - снять асфальтовое покрытие отмостки. выполнить  бетонирование и уложить новый слой асфальта.  

5. Укрепить склон горы металлической или полимерной решеткой для остановки  сползания грунта.  

6. Сделать подпорную стену. 

7. Укрепить наружный лестничный марш соединяющий внутренний двор и улицу  Безбокова.  

8. Восстановить монолитную железобетонную площадку, прилегающую к  наружному лестничному маршу.  

9. Выполнить финишное асфальтовое покрытие детской и спортивной площадки,  расположенной над перекрытием встроенной подземной автостоянки.  

10. Восстановить потрескавшиеся и местами обрушенные куски штукатурки на  фасадах как здания, так и парапетной части перекрытия над автостоянкой с последующей  окраской.  

11. Обработать внутренние стыки и примыкания конструкций, где обнаружены  следы протечек в помещениях цокольного этажа.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО+»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРИАДА» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 20 000 руб. – расходов по проведению инженерно- технической экспертизы, 8 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

 Судья Ю.В. Липатова