АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                               Дело  № А19-20786/2020

17.10.2022

Резолютивная часть дополнительного решения объявлена в судебном заседании           10 октября 2022 года. Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 17 октября 2022 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Болтрушко О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козодой К.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя КАРАПЕТЯНА НВЕРА РУДИКОВИЧА (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664519, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, РАЙОН ИРКУТСКИЙ, САДОВОЕ НЕКОМ-Е ТОВАРИЩЕСТВО РОМАШКА-1, ДОМ 170) 

о взыскании 361 629 руб.,

по встречному иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664519, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, РАЙОН ИРКУТСКИЙ, САДОВОЕ НЕКОМ-Е ТОВАРИЩЕСТВО РОМАШКА-1, ДОМ 170) 

к индивидуальному предпринимателю КАРАПЕТЯНУ НВЕРУ РУДИКОВИЧУ (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 438 000 руб., 

при участии в судебном заседании:

от сторон: не присутствовали,

установил:

иск заявлен, с учетом уточненных требований, о взыскании суммы 621 433 руб. основного долга по договору № 4-5-6/Б от 02.09.2019. 

24.02.2021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с встречным исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю КАРАПЕТЯН НВЕР РУДИКОВИЧУ о взыскании, с учетом уточненных требований, суммы                                       3 690 000 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по договору № 4-5-6/Б от 02.09.2019, начисленной за период с 21.02.2020 по 09.10.2020.

Определением суда от 24.02.2021 встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" по делу  принято к рассмотрению  с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.09.2022 исковые требования индивидуального предпринимателя КАРАПЕТЯНА НВЕРА РУДИКОВИЧА удовлетворены, встречные исковые требования  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" удовлетворены частично, произведен зачет встречных исковых требований и в результате зачета с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" в пользу индивидуального предпринимателя КАРАПЕТЯНА НВЕРА РУДИКОВИЧА (ОГРНИП: взыскана сумма 187 219 рублей.  

Арбитражным судом установлено, что при принятии решения по настоящему делу не разрешен вопрос о распределении судебных расходов за проведение по делу строительно-технической экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если: судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Согласно части 2 статьи 178 АПК РФ вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. 

Стороны, третье лицо в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

ИП ФИО1  понесены расходы по оплате проведенной по делу судебной экспертизы, а именно: ИП ФИО1 на депозитный счет суда внесено               60 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 35 от 05.08.2021, в назначении платежа указан номер дела А19-20786/2020.  

Определением суда от 13.09.2021 по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Перитус Артифекс» (664081, г. Иркутск, мкр. Крылатый, 12, оф. 7) эксперту ФИО2.

13.07.2022 от общества с ограниченной ответственностью «Перитус Артифекс» поступило заключение эксперта № 29/09-21 от 17.07.2022.

Определением суда от 29.09.2022 денежные средства, внесенные ИП ФИО1 на депозит Арбитражного суда Иркутской области платежным поручением № 35 от 05.08.2021 в сумме 60 000 рублей, перечислены Обществу с ограниченной ответственностью «Перитус Артифекс».

При рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов суд руководствуется общим принципом отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Поскольку в результате зачета требования ИП ФИО1 удовлетворены, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 60 000 руб. подлежат взысканию ООО «Сибирьдевелопмент» в пользу ИП ФИО1

Руководствуясь статьями 167–170, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664519, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, РАЙОН ИРКУТСКИЙ, САДОВОЕ НЕКОМ-Е ТОВАРИЩЕСТВО РОМАШКА-1, ДОМ 170) в пользу индивидуального предпринимателя КАРАПЕТЯНА НВЕРА РУДИКОВИЧА (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму 60 000 руб. – расходов за проведение экспертизы.

Дополнительное решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия и по истечении этого срока вступает в законную силу.

Судья                                                                             О.В. Болтрушко