Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-7767/2018

05 сентября 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 05 сентября 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного общества "СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 620085, 

<

...>) к публичному акционерному обществу "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 115035, 

<

...>), обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) о взыскании 72 933 997 рублей 98 копеек, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно спора: общество с ограниченной ответственностью "ЮГАНСКОЕ ВЫШКОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>), общество с ограниченной ответственностью "РН-БУРЕНИЕ" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 119071, 

<

...>),

при участии представителей:

от истца - конкурсный управляющий ФИО2 на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 02.07.2018 по делу № А60-36451/2015,

от публичного акционерного общества "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" - ФИО3 по доверенности от 31.10.2017,

от общества с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" - ФИО4 по доверенности от 25.01.2018 № 113/18,

от общества с ограниченной ответственностью "РН-БУРЕНИЕ" - ФИО5 по доверенности от 12.12.2017 № 992,

установил:

открытое акционерное общество "СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (далее – ответчик) о взыскании 72 933 997 рублей 98 копеек, в том числе 57 537 213 рублей 35 копеек – основной задолженности, 15 396 784 рублей 63 копеек – процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленных за период с 28.05.2015 по 25.05.2018. В качестве основания для удовлетворения требований истец ссылался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору на выполнение работ по вышкостроению, бурению и освоению эксплуатационных скважин от 28.04.2014 № 15-2014-ЭБ (далее – Договор).

Пунктом 16.2. Договора предусмотрено, что споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при недостижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На основании статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное дело рассмотрено как подсудное Арбитражному суду Ханты-мансийского автономного округа - Югры.

Определением суда от 26.06.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", общество с ограниченной ответственностью "ЮГАНСКОЕ ВЫШКОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ".

Определением суда от 02.08.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено: общество с ограниченной ответственностью "РН-БУРЕНИЕ".

В рамках судебного заседания 29.08.2018 публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" привлечено в качестве второго ответчика.

Изучив материалы дела и доводы участвующих в деле лиц, суд установил нижеследующее.

В рамках указанного искового заявления истец заявил требования о взыскании задолженности за выполненные работы по Договору на общую сумму 57 537 213 рублей 35 копеек, в соответствии с:

- Актом формы КС-2 о приемке выполненных работ № 2 от 25.05.2015 года по скважине № 43771 куст № 373.2 Приобского месторождения (этапы 3.3, 3.4) на сумму 11 109 139 рублей 78 копеек;

- Актом формы КС-2 о приемке выполненных работ № 2 от 25.05.2015 года по скважине № 8814 куст №339.1 Приобского месторождения (этапы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) на сумму 19 496 933 рублей 57 копеек.

- Актом формы КС-2 о приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2015 года по скважине № 11324 куст № 339.2 Приобского месторождения (этап 2) на сумму 26 931 140 рублей.

28 апреля 2014 года между истцом (подрядчик) и акционерным обществом "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (заказчик) заключен Договор.

В соответствии с пунктом 3.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по вышкостроению, бурению и освоению эксплуатационных скважин на кустах: № 339.2; № 339.1; № 373.2; № 64, в соответствии с проектной документацией и графиком выполнения работ (приложение № 1) и совмещенным графиком выполнения работ по бурению скважин (приложение № 1.1) , передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

Стоимость работ определена в разделе 4 Договора.

- пункт 4.1.: стоимость работ по Договору носит договорной характер и определяется в соответствии с протоколом соглашения договорной цены работ отдельно по каждому объекту работ, указанному в приложении № 2 и сметной стоимости строительства скважины (приложение №3) к настоящему Договору.

- пункт 4.3.: увеличение (уменьшение) стоимости работ, вызванное изменением конструкции скважин, объемов перфорации, объектов освоения на скважине, забоев скважин, и иными подобными основаниями, производится на основании соответствующих дополнительных соглашений, подписанных сторонами настоящего Договора.

- пункт 4.4.: дополнительные затраты подрядчика, неподтвержденные документально и предварительно несогласованные заказчиком в письменной форме, осуществляются за счет средств подрядчика и к оплате заказчиком не принимаются.

- пункт 4.7.: ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 1 553 682 679 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 18% - 237 002 442 рубля 56 копейки, в том числе: 2014 год - 1 039 126 531 рубль 67 копеек с учетом налога на добавленную стоимость 18 %; 2015 год - 514 556 147 рублей 33 копейки с учетом налога на добавленную стоимость 18 %.

Оплата выполненных работ производится заказчиком в порядке и в сроки, установленные Договором.

- пункт 4.8.: этап работ, выполненный в соответствии с проектом и принятый заказчиком, подлежит оплате.

Порядок расчетов и приемка этапов работ определены в разделе 5 договора:

- пункт 5.1.: расчет за выполненные работы производится заказчиком по выполнению этапов работ:

I      этан - мобилизация оборудования и бригадного хозяйства на объект проведения Работ;

II    этап - подготовительные и вышкомонтажные работы; 

III этап – бурение и крепление скважины:

3.1  - страхование буровых работ;

3.2  - бурение, крепление направления кондуктора; 33 -бурение, крепление эксплуатационной колонны; 3*4 - бурение, крепление хвостовика;

3.5 - геофизические работы.

IV   этап - прочие (дополнительные) работы;

V    этап - освоение скважины;

VI   этап - демобилизация оборудования и бригадного хозяйства (при необходимости); 

II, V этапы - оплата производится по окончании этапа работ.

III   этап - оплата производиться по окончанию работ: кондуктора, колонны, хвостовика и предъявляется Заказчику на оплату вместе с оформленными справками на материально- технические ресурсы заказчика (приложение № 16 к Договору). Возможен расчет по фактическому объему проходки по скважине за отчетный период.

IV   этап - оплата производится на основании подтверждающих документов при условии подписания сторонами по договору соответствующего дополнительного соглашения.

- пункт 5.2.: о готовности к сдаче выполненных этапов работ подрядчик в письменной форме извещает Заказчика за три дня до начала приемки (с подтверждением за сутки).

- пункт 5.3.: подрядчик в течение 3 дней с момента окончания этапа работ, но не позднее 22-го числа текущего месяца, передает заказчику 2 экземпляра следующих первичных документов, подтверждающих выполнение этапа работ:

•   акты о приемке выполненных работ (приложение № 19);

•   справку о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 20);

•   оригинал счёта-фактуры на выполненные работы;

•   другие, подтверждающие документы (копии договоров, первичных документов с подрядными организациями, дополнительные расчеты).

Указанные документы передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи документов уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Документы должны быть оформлены согласно законодательно установленным требованиям. В случае непредставления подрядчиком оригиналов первичных документов в установленные сроки, заказчик имеет право не принимать выполненный объем работ.

- пункт 5.4.: заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает представленную в соответствии с пунктом 5.3. Договора документацию и при отсутствии замечаний по качеству и срокам выполненных работ подписывает ее.

- пункт 5.7.: оплата выполненных по Договору работ осуществляется заказчиком в течение 60 календарных дней, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись работы (этап работ), на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (приложение № 19 к Договору), справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 20 к Договору), при наличии предъявленного оригинала счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам подрядчика.

Оплата выполненных работ возможна путем погашения взаимных обязательств иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

- пункт 5.9.: в предъявляемых счетах-фактурах подрядчик в обязательном порядке указывает номер Договора и договора по исполнению функций техзаказчика № 100013/0576Д от 01.01.2014, заключенного между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть».

- пункт 5.10.: принятие выполненных объемов работ производится только после предоставления экологических справок по выполнению природоохранного законодательства, подписанных представителем УДНГ оформленных согласно приложению к Стандарту ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П2-05.01 С-0043 ЮЛ-099 версия 2.00. «Требования по согласованию и размещению подрядивши организациями сооружений и оборудования, включая временные здания и сооружения на месторождениях, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз».

- пункт 5.11.: первичные учетные документы, указанные в пункте 5.3. Договора, составляемые во исполнение обязательств сторон по Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора.

В пункте 8.33 Договора установлено, что подрядчик имеет право взыскать с заказчика проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской федерации, но не более 3 % годовых за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата.

На основании пунктов 8.64, 8.65 Договора подрядчик принял на себя обязательства подготовить и передать заказчику общие журналы выполнения работ по Договору по всем скважинам запланированных к бурению, за двадцать календарных дней до начала бурения куста. Журналы должны быть распечатаны, пронумерованы и прошнурованы, подписаны уполномоченным представителем подрядчика. Подрядчик обязан в течение 7  календарных дней после окончания выполнения работ на скважине по Договору передать журналы работ заказчику вместе с исполнительной документацией для проведения итоговой проверки.

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента их получения (пункт 16.3 Договора).

01 января 2014 года между публичным акционерным обществом "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (застройщик) и обществом с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" (техзаказчик) заключен договор на выполнение функций технического заказчика № 100013/05760Д (далее – Договор техзаказа).

В соответствии с пунктом 1.1 Договора техзаказа технический заказчик обязуется за счет средств застройщика осуществлять юридические и иные действия по выполнению функций технического заказчика на всех этапах инвестиционного процесса по объектам, сооружаемым (реконструируемым) на территории Ханты-Мансийского автономного округа, согласно перечням объектов строительства, являющимся приложениями к Договору (приложение № 1/1, № 1/2, № 1/3, № 1/4, № 1/5, № 1/6, № 1/7). 

Застройщик уполномочивает техзаказчика осуществлять от имени застройщика и по его поручению функции технического заказчика по заключению договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве (в том числе, реконструкции) объектов капитального строительства, по подготовке задания на выполнение указанных видов работ, предоставлению лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство (в том числе, реконструкцию) объектов капитального строительства, материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов работ, подписанию документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и осуществлению иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Техзаказчик осуществляет заключение договоров но согласованной застройщиком форме и содержанию с соблюдением применимых закупочных процедур застройщика.

Если иное прямо не оговорено в Договоре техзаказа, при совершении сделок с третьими лицами по поручению застройщика в рамках данного договора техзаказчик обязуется указывать в преамбуле ссылку на то, что действует в качестве технического заказчика от имени в интересах и за счет ОАО «НК «Роснефть» на основании настоящего договора.

На основании пунктов 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 договора в области организации строительства техзаказчик:

- пункт 2.2.11.: осуществляются совместно с подрядной организацией приемку выполненных работ (оказанных услуг) по законченным этапам и конструкций, которые будут скрыты при производстве последующих работ с составлением соответствующих актов.

- пункт 2.2.12.: участвует в комиссиях по проведению индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

- пункт 2.2.13.: организует выполнение пусконаладочных работ.

- пункт 2.2.14.: от имени и за счет средств застройщика осуществляет приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов, формирует приемочные комиссии и организует их работу.

- пункт 2.3.4.: в соответствии с настоящим договором техзаказчик по поручению застройщика и за его счет осуществляет расчеты по договорам, заключенным техзаказчиком с третьими лицами, резидентами Российской Федерации, от имени и за счет застройщика, в том числе: производит оплату товаров, работ, услуг; осуществляет арендные платежи в соответствии с условиями заключенных договоров аренды (субаренды) земельных и лесных участков.

Оплата нерезидентам Российской Федерации осуществляется застройщиком.

- пункт 2.3.4.1.: при осуществлении платежа в адрес третьего лица от поручению застройщика техзаказчик обязан использовать банковский счет открытый специально под платежи по поручению застройщика. Осуществлять платежи с данного счета не по договорам застройщика запрещается.

- пункт 2.3.4.2.: при осуществлении платежа в адрес третьего лица от имени застройщика техзаказчик обязан сделать в платежных поручениях соответствующую отметку - «оплата по договору дата 01.01.2014 № 100013/05760Д от имени и за счет ОАО «ПК «Роснефть» (счет дата номер).

- пункт 2.3.4.5.: застройщик обязуется обеспечить финансирование строительства объектов по настоящему договору путем наделения техзаказчика денежными средствами в соответствии с подготовленными и согласованными с застройщиком реестрами платежей в адрес подрядчиков. Наделение денежными средствами производится путем платежа на специальный счет, указанный в пункт 2.3.4.1. настоящего договора. При осуществлении платежа в адрес техзаказчика застройщик обязан сделать в платежных поручениях соответствующую отметку - «наделение денежными средствами техзаказчика по договору дата 01.01.2014 №100013/05760Д для исполнения платежей по договорам от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть».

- 2.5. В области строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов:

- пункт 2.5.1. техзаказчик осуществляет:

- строительный контроль и технический надзор за ходом строительства, реконструкцией (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ), которые должны осуществляться в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями договоров и требованиями ГОСТ, СНИП и других нормативных-технических документов. Принимает участие в проводимых Застройщиком контрольных обмерах на объектах Застройщика;

- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- контроль соответствия строящихся объектов корпоративному стилю ОАО «НК «Роснефть» согласно утверждённым Стандартам;

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, ее применения в Российской Федерации, пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимости строительства. В случае появления после момента передачи подрядчику проектно-сметной документации новых нормативных положений, обращается в соответствующий орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России - Ростехнадзор России с предложением о предъявлении или не предъявлении новых нормативных требований к находящимся в строительстве, реконструкции объектов;

- контроль за своевременным выполнением геодезических работ в процессе строительства;

- освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно- монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- с участием представителей генподрядной и специализированной4 (монтажной) организаций, а также проектных организаций, промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений опор и пролетных строений, несущих металлических и железобетонных конструкций т.п.;.

- контроль за соответствием объема выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей и исполнительной документации; контроль ведения подрядной организацией общего журнала работ по форме РД 11-05-2007;

- контроль исполнения подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов архитектурно-строительного надзора, относящихся к качеству выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, материалов и оборудования;

- предусмотренные проектом геодезические измерения деформаций основных зданий и сооружений, контрольные съемки и по их результатам наносит все изменения в исполнительную документацию.

- пункт 2.5.2.: обеспечивает своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов.

- пункт 2.5.3.: принимает участие:

- в проверках, проводимых органами государственного надзора, состояния и соответствия проекту поступающего в монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке;

- в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

- в работе комиссий по проверке соответствия строящихся объектов корпоративному стилю ОАО «НК «Роснефть» и требованиям промышленной и экологической безопасности согласно утверждённым Стандартам;

- в организации освидетельствования объектов, подлежащих консервации, и оформления документации на консервацию или временное прекращение строительства, реконструкции, реставрации объектов, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ.

На основании пунктов 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 застройщик обязан:

- пункт 3.2.: обеспечивать своевременное финансирование строительства, реконструкции объектов в соответствии с условиями заключенных техническим заказчиком договоров и настоящим договором.

- пункт 3.5.: своевременно оказывать техзаказчику необходимое содействие в исполнении настоящего договора, в том числе по запросам техзаказчика предоставлять информацию о принятых решениях в течение 10  рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

- пункт 3.6.: возмещать фактические расходы техзаказчика, понесенные им в рамках исполнения настоящего договора по поручению застройщика, на основании копий документов, подтверждающих данные расходы.

- пункт 3.7.: принимать от техзаказчика в установленные п. 2.3.3. настоящего договора сроки всё исполненное последним в соответствии с настоящим договором, а также принимать результаты ранее (до заключения настоящего договора) выполненных в интересах застройщика, работ.

- пункт 3.10.: своевременно исполнять обязанности по договорам, заключенным Техзаказчиком от имени и за счет Застройщика в соответствии с настоящим договором.

- пункт 5.2.: техзаказчик обязуется по поручению застройщика совершать от своего имени и за счет застройщика юридические и иные действия по организации закупки материально-технических ресурсов, работ и услуг по организации использования земельных и лесных участков, водных объектов, используемых для строительства объектов.

- пункт 5.3.: по сделкам, заключенным техзаказчиком в рамках настоящей статьи договора права и обязанности возникают непосредственно у техзаказчика, даже если застройщик упомянут в договоре.

- пункт 5.6.: по договорам, заключенным техзаказчиком с третьими лицами от своего имени, но за счет застройщика, застройщик обязуется обеспечить финансирование путем наделения техзаказчика денежными средствами в соответствии с графиком производства работ (услуг), графиком поставки МТР к соответствующему договору, а также по факту выполненных работ/оказанных услуг', поставки товара в течение 15 дней с момента предоставления документов, предусмотренных в пункт 2.3.3.2 настоящего договора. Использование (зачет) полученных от застройщика денежных средств осуществляется техзаказчиком в хронологическом порядке по мере поступления первичных документов.

Сопроводительным письмом от 25.05.2015 № НП-1/013 истец направил акты выполненных работ обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ", выступающим агентом публичного акционерного общества "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (получены 30.05.2015), приемка по 03.06.2015 (оплата по 30.07.2015).

Так же подтверждается материалами дела:

- по скважине № 43771 куст № 373.2 представлены в томе 1 на листах дела: 33, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52;

- по скважине № 8814 куст № 339.1, представлены в томе 1 на листе дела 47 и документами представленные истцом;

- на скважине № 11324 куст № 339.2, представлены в томе 1  на листах дела: 34, 35, 48, 49. Истец выполнение указанных работы не доказал, так как эти данные работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью "РН-БУРЕНИЕ" (том 2 листы дела 13-17, 47-111).

Определением суда от 02.08.2018 обществу с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" было предложено представить заверенные копии дел следующих скважин в полном объеме: дело скважины № 43771 куст № 373.2 Приобского месторождения, дело скважины № 11324 куст 339.2 Приобского месторождения, дело скважины № 8814 куст 339.1 Приобского месторождения, а также сторонам было предложено рассмотреть вопрос о назначении судебной экспертизы.

Документы ответчиком не представлены, заявления о назначении судебной экспертизы не поступало.

Общество с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" заявило  о пропуске срока исковой давности, данное заявление не подлежит удовлетворению, так как срок исковой давности истекал 31.07.2018, иск подан 25.05.2017.

Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" также заявило о пропуске срока, срок пропущен, ходатайство подано 28.08.2018, но в соответствии со статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответственное лицо за оплату работ выступало общество с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ".

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При данных обстоятельствах односторонний отказ ответчика от исполнения обязательства по оплате работ является недопустимым в силу требований статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд находит требование о взыскании основной задолженности в размере 30 606 073 рублей 35 копеек подлежащим удовлетворению.

Дополнительно истец заявил требование процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 15 396 784 рублей 63 копеек, исчисленных за период с 28.05.2015 по 25.05.2018.

Как установлено пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Надлежащий расчет процентов за пользование чужими денежными средствами составил 2 588 519 рублей 13 копеек, в том числе 387 397 рублей 42 копейки, исчисленные за период с 31.07.2015 по 31.12.2016, 918 182 рубля 20 копеек, исчисленные за период с 01.01.2016. по 31.12.2016, 918 182 рубля 20 копеек, исчисленные за период с 01.01.2017. по 31.12.2017, 364 757 рублей 31 копейка, исчисленные за период с 01.01.2018. по 25.05.2018,.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 588 519 рублей 13 копеек.

В подтверждение соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец представил заверенную копию претензии, доказательства ее направления ответчику.

На момент рассмотрения дела ответчик возражения относительно соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования не сообщил, доказательства принятия мер к добровольному урегулированию спора не представил.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 200 000 рублей.

Истец по платежному поручению от 30.05.2018 № 220 уплатил государственную пошлину в размере 200 000 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 91 026 рублей 39 копеек на ответчика, 108 973 рубля 61 копейка на истца. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования открытого акционерного общества "СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" в пользу открытого акционерного общества "СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН" 33 194 592 рубля 48 копеек, в том числе 30 606 073 рубля 35 копеек - основную задолженность, 2 588 519 рублей 13 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" в пользу открытого акционерного общества "СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН"91 026 рублей 39 копеек - судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                  Ю.П. Щепелин