ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-248011/22

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2023г. (резолютивная часть от 11.01.2023г.) по делу № А40-248011/22 

по иску ООО "Компания Иванычи" (ОГРН: 

<

***>) к АО "Мосотделстрой № 1" (ОГРН: 

<

***>) о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 30.12.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "Компания Иванычи" (далее – истец) предъявило АО "Мосотделстрой № 1" (далее – ответчик) иск о взыскании задолженности в размере 3 441 982 руб. 49 коп., неустойки в размере 172 099 руб. 10 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 11.01.2023г., изготовленным в полном объеме 11.01.2023г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, неявившийся Истец уведомлен о времени и месте рассмотрения дела посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте суда в сети Интернет (т. 2 л.д. 122). 

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между истцом и ответчиком заключен договор №МОС-12/07/16-мипвенткроб_1 на выполнение подрядных работ /с поставкой материалов/ по объекту: Строительство электродепо «Солнцево» от 12.06.2016 г. по которому, Субподрядчик - ООО «Компания Иванычи» обязуется в установленный Договором срок на основании рабочей документации, утвержденной Подрядчиком, выполнить: комплекс работ по монтажу и поставке /поэтапно/ вентиляционных коробов различного сечения и фасонных деталей к ним, на объекте: «Строительство Электродепо «Солнцево», ОКПД2 43.22.12.190, ОКВЭД2 43.22, расчётно (далее - Объект), а Подрядчик - АО "Мосотделстрой № 1" (ранее именовалось ГУП г. Москвы трест «Мосотделстрой № 1») обязуется принять результат выполненной работы и уплатить обусловленную цену.

Стоимость работ по договору №МОС-12/07/16-мипвенткроб_1 на выполнение подрядных работ /с поставкой материалов/ по объекту: Строительство электродепо «Солнцево» от 12.06.2016 г. определяется в следующем порядке: директивная цена (1- го этапа): 2100000 руб. (выполнение поэтапное) включая НДС. Общая цена определяется стоимостью фактически выполненных Исполнителем работ /с поставкой/ по договору в соответствии с графиком строительства, включая НДС. Цена и объём определяются в соответствии со сметными нормативами производства работ на объекте «Строительство электродепо «Солнцево». Цена определяется стоимостью фактически выполненных субподрядчиком работ по договору в соответствии с графиком строительства, согласно приложению №1 к договору; окончательная цена договора определяется поэтапно, как стоимость выполненных субподрядчиком работ /с поставкой/ согласно рабочей документации со штампом подрядчика «В производство работ», определенной в текущих ценах на основе сметной стоимости строительства, установленной в проектной документации в соответствии порядком определения стоимости строительно-монтажных работ (приложение № 5) по каждому этапу.

Оплата, за работы, выполняемые субподрядчиком по настоящему договору, производится подрядчиком в следующем порядке: п. 4.1. установлено, что оплата работ по настоящему договору производится промежуточными платежами ежемесячно после выполнения субподрядчиком работ путем перечисления на расчетный счет субподрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при наличии исполнительной документации и выставленных субподрядчиком счета и счета-фактуры. Подписание акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) осуществляется подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от субподрядчика.

При оформлении акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, в стоимости выполненных в отчетном периоде работ с использованием давальческих материалов подрядчика учитываются среднегодовые затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. Расчет осуществляется на основе стоимости давальческих материалов с учетом зимнего удорожания, рассчитанных в соответствии с нормами сметно-нормативной базы ТСН-2001, после чего стоимость давальческих материалов вычитается из общей стоимости работ.

В случае если субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документации и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют установленным договором требованиям, и/или указанные в актах объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ, подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет субподрядчику письменный мотивированный отказ в подписание акта приемки выполненных работ (форма № КС- 2).

Пункт 4.2. договора установлено, что сумма промежуточного платежа, причитающегося субподрядчику, определяется как цена выполненных и указанных в подписанном сторонами акте приемки выполненных работ (форма № КС-2) объемов работ, определенная в соответствии с п. 3.2 договора, согласно рабочей документации со штампом подрядчика «В производство работ», за вычетом суммы удерживаемого аванса согласно графику погашения аванса и иных удержаний, которые произведены подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора

Согласно п. 4.5. договора, подрядчик осуществляет промежуточный платеж в течение 10 дней после поступления денежных средств от АО «Мосинжпроект», но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Окончательные расчеты между сторонами производятся в месячный срок после подписания акта сдачи-приемки результата завершенных работ в порядке, определенном разделом 9 договора.

Пункт 11.1. договора предусмотрено, что подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору. 

В случае нарушения подрядчиком сроков оплаты выполненных работ, подрядчик по требованию субподрядчика обязан выплатить неустойку в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от суммы задолженности.

Во исполнение условий договора ООО «Компания Иванычи» выполнило работы (поставило материалы) на объекте в полном объеме на общую сумму: 3 441 982 руб. 49 коп., в том числе: 2827204 руб. 95 коп. - за выполненные работы; 614777 руб. 54 коп. - за поставленные материалы и оборудование.

Претензий по качеству и объему выполненных работ от АО "Мосотделстрой № 1" не поступало.

ООО «Компанией Иванычи» в соответствии с условиями раздела 4 Договора №МОС-12/07/16-мипвенткроб_1 на выполнение подрядных работ /с поставкой материалов/ по объекту: Строительство электродепо «Солнцево» от 12.06.2016 г. были переданы АО "Мосотделстрой № 1" результаты выполненной работы, что подтверждается подписанными со стороны АО "Мосотделстрой № 1" актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1.1 от 30.11.2017, №1.2/2 от 22.12.2017, №1.2 от 18.12.2017, №1.3 от 28.02.2018, №1.4 от 28.04.2019, №1.5 от 28.04.2018, №1.7 от 01.07.2018, №1.7/2 от 01.07.2019, №1.8 от 01.07.2019, №1.9 от 10.07.2020, №2.1. от 30.11.2017, №2.3 от г., №3.2 от 18.12.2017, №4.1 от 30.11.2017, №4.5 от 28.04.2018, №5.2 от 29.12.2017, №5.4. от 28.04.2018, №5.5 от 28.04.2018, №5.8 от г., №5.8/2 от 01.07.2018, №5.8/3 от 01.07.2019, №6.4 от 28.04.2018, №6.4/2 от 28.04.2018, №7.7 от 01.07.2019, №7.8 от 01.07.2019, №8.8 от 01.07.2018 и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №2 от 29.12.2017, а также товарными накладными: №15 от 04.05.2017, №17 от 11.05.2017, №21 от 15.06.2017, №26 от 05.09.2017, №41 от 29.12.2017, №104 от 31.05.2017, №13 от 07.03.2018, №14 от 07.03.2018, №18 от 21.03.2018, №19 от 21.03.2018, №32 от 03.07.2018, №34 от 04.07.2018, №37 от 20.07.2018, №38 от 20.07.2018, №39 от 20.07.2018, №40 от 20.07.2018, №41 от 13.08.2018, №42 от 13.08.2018, №43 от 13.08.2018, №44 от 13.08.2018.                                                    

Выполнение обязательств ООО «Компания Иванычи» в полном объеме перед АО «Мосотделстрой №1» подтверждается также вводом 30.08.2018 г. в эксплуатацию объекта строительства «Электродепо «Солнцево», что подтверждается сообщениями АО      «Мосинжпроект» на своём официальном сайте: https://mosinzhproekt.ru/proiect/elektrodepo-solnczevo/, а также сообщение на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы https://stroi.mos.ru/news/solntsievo-stalo-vos-mvm-vviediermvm-eliektrodiepo-v- moskvie-za-vosiem-liet. 

В нарушение принятых на себя обязательств, ответчик оплату выполненных и принятых работ в полном объеме не произвел, в результате чего за АО "Мосотделстрой № 1" образовалась задолженность в общем размере 3 441 982 руб. 49 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не представил, доводы истца о нарушении сроков оплаты за выполненные истцом работы документально не опроверг. 

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно не удовлетворено, задолженность в размере 3 441 982 руб. 49 коп., неустойка в размере 172 099 руб. 10 коп. подлежат присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке.

Доводов по существу заявленных исковых требований апелляционная жалоба АО "Мосотделстрой № 1" не содержит, документальных доказательств, опровергающих обоснованность оспариваемого судебного акта, заявителем в суд первой инстанции не представлено.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2023г. (резолютивная часть от 11.01.2023г.) по делу № А40-248011/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

 

Председательствующий судья                                                         Е.Е. Кузнецова

 

Судьи                                                                                                 Е.В. Бодрова

 

                                                                                                                      П.А. Порывкин 

 

 

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.