РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-288864/21-110-1984

г. Москва

03 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 07 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 03  апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОМАШ" (108811, МОСКВА ГОРОД, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) КИЛОМЕТР, ДОМОВЛАДЕНИЕ 4, СТР 4, Б Д ЭТ 6 ОФ 607Д, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1" (107023, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 4 873 675,01 руб., а также встречный иск 

Третье лицо 1-акционерное общество "МОСИНЖПРОЕКТ" (101000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>), 

Третье лицо 2- государственное унитарное предприятие города Москвы "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА"(129110, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Третье лицо 3- ФИО3, Третье лицо 4- общество с ограниченной ответственностью "АЛ-ТЕК" (195027, 

<

...>, ЛИТЕР Е, ОФИС 313, ОГРН: 

<

***>),

Третье лицо- ФИО4

при участии:

от истца – ФИО5 по дов.  от 10.08.2021,

от ответчика- ФИО6 по дов.  от 22.02.2022,  

от третьих лиц- ФИО7 по дов.  от  09.12.2022, ФИО8 по дов.  от 09.02.2023,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОМАШ" обратилась с иском к акционерному обществу "МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 4 645 134,40 руб. задолженности по договору б/н от 03.07.2018, 232 256,72 руб. неустойки.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  были привлечены акционерное общество "МОСИНЖПРОЕКТ", государственное унитарное предприятие города Москвы "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА", ФИО3, общество с ограниченной ответственностью "АЛ-ТЕК", ФИО4

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 81 595 320,97 руб. пени по договору от 03.07.2018.

Заслушав представителей лиц участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Производственно - Сервисное Предприятие «ЭНЕРГОМАШ» (далее Истец/Субподрядчик) и АО «Мосотделстрой № 1» (ранее ГУП г. Москвы трест «Мосотделстой № 1») (далее Ответчик/Подрядчик) был заключен Договор субподряда №б/н от 03.07.2018г. по выполнению монтажных и пусконаладочных работ стационарных площадок и камеры мойки составов на объекте: «Строительство электродепо «Солнцево».

Согласно п. 1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажных и пусконаладочных работ стационарных площадок и камеры мойки составов собственными силами в соответствии с условиями Договора, а Подрядчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его.

В соответствии с п.3.1. цена Договора общая стоимость работ определяется на основании предварительного локального сметного расчета и составляет: 10 407 566 (Десять миллионов четыреста семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 45 копеек, вкчючая НДС 18% - 1 587 594,88(один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 88 копеек (Приложение №1 к Договору.)

В соответствии с п.4.1. Договор, срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней.

В 2019 году Заказчиком-генподрядчиком АО «Мосинжпроект» выпущен измененный локальный сметный расчет, на общую стоимость: 5 361 236 (Пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести тридцать шесть) рублей 50 копеек (без НДС), в ценах ТСН-2001 2016г.

На момент выполнения работ цена по Договору составила: 5 829 065 (Пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч шестьдесят пять рублей 26 копеек (без НДС), что подтверждено Ответчиком.

Все работы по Договору выполнены Истцом в полном объеме согласно проектно -сметной документации, выданной Ответчиком со штампом «В производство работ».

По результатам выполненных Истцом работ на Объекте, ответственными представителями    (комиссией)    из    числа:    Ответчика,    Заказчика-генподрядчика   АО «Мосинжпроект», авторского надзора, Застройщика-технического заказчика Дирекция строящегося метрополитена и эксплуатирующей организации ГУП «Московский метрополитен» подписаны комиссионные акты (акты скрытых работ, акты пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования) и др. исполнительная документация, которая сдана в архив.

По объекту: «Строительство электродепо «Солнцево», в том числе на основании выполненных Истцом работ 29.08.2018г. в Мосгосстройнадзоре получено заключение №313-33-Р/ЗОС о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов

Начало строительства: 10.07. 2015г. Окончание строительства: 23.08.2018г.

Основанием для выдачи заключения является Акт проверки №7456/18 от 28.08.2018г.

В рамках заключенного Договора Ответчик 12.08.2018г. перечислил аванс в размере: 2 000 000 (Два миллиона рублей) 00 копеек (платежное поручение №1434).

Удержание за выполнение Ответчиком функций генерального подрядчика по Договору составляет: 279 795 (Двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 13 копеек.

Принято работ Ответчиком на сумму 5 595 902 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот два рубля) 65 копеек, в том числе НДС (с применением понижающего коэффициента 0,8%), что подтверждается подписанными сторонами Актами приемки выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

В Договоре субподряда от 03.07.2018г. не содержится условий о применении Подрядчиком понижающего коэффициента К=0,8. Дополнительное соглашение между сторонами на применение понижающего коэффициента К=0,8 не заключалось.

В связи с вышеизложенным Истцом в адрес Ответчика надлежащим образом направлен (исх. 477 от 12.08.2020г.) комплект откорректированных документов: акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) №507к и №507/1 от 01.12.2020г. , справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) №79к от 01.12.2020г. на сумму 1 329 026 (Один миллион триста двадцать девять тысяч двадцать шесть) рублей 88 копеек.

В соответствии с п. 3.2. оплата выполненных работ по Договору осуществляется на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),при наличии исполнительной документации в течении 90 (Девяноста) дней со дня подписания вышеуказанных документов.

В соответствии с абз. 2 п. 3.2. Договора подписание актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от Субподрядчика.

Ответчик не оплатил принятые работы по Договору и не направил в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Истца/Субподрядчика корректировочных актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) письменный мотивированный отказ в подписании указанных актов и справок (абз. 3 п. 3.2. Договора).

Итого, согласно актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) сумма принятых, но не оплаченных работ по Договору составила: 3 316 107 (Три миллиона триста шестнадцать тысяч сто семь) рублей 52 копейки).

Таким образом, сумма задолженности Ответчика/Подрядчика перед Истцом/Субподрядчиком по Договору субподряда №б/н от 03.07.2018г. по выполнению монтажных и пусконаладочных работ стационарных площадок и камеры мойки составов на объекте: «Строительство электродепо «Солнцево», согласно принятых работ и надлежаще направленным актам приемки выполненных работ (форма № КС-2). справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) составляет: 4 645 134 (Четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 40 копеек.

Указанная сумма задолженности не учитывает увеличение стоимости выполненных ООО «ПСП «ЭНЕРГОМАШ» работ по результатам пересчетов на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы от 05.03.2020. Данная сметная документация не предоставлена Подрядчиком по запросу Субподрядчика.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требований закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условии и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявленными требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ч. 3 ст. 706 ГК РФ Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В нарушение упомянутых норм права и условий Договора, Ответчиком вплоть до настоящего времени принятые работы не оплачены, направленные корректировочные документы не приняты и не подписаны, при этом не были предоставлены мотивированные возражения в порядке предусмотренном Договором.

Доказательств наличия обоснованных причин для отказа от подписания откорректированных актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат не предоставлено. Таким образом, объем выполненных работ Истцом/Субподрядчиком считается сданным Ответчику/Подрядчику и подлежащим оплате.

На основании п. 8.1 Договора Ответчик/Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик по требованию Субподрядчика обязан выплатить неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от суммы задолженности.

Размер неустойки составляет 228 540,61 руб.

Между тем, все работы по Договору выполнены Истцом в полном объеме согласно проектно -сметной документации, выданной Ответчиком со штампом «В производство работ».

В соответствии с п.3.1. цена Договора общая стоимость работ определяется на основании предварительного локального сметного расчета и составляет: 10 407 566 руб. 45 коп., включая НДС 18% - 1 587 594 руб. 88 коп. (Приложение №1 к Договору.)

В соответствии с п.4.1. Договор, срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней.

В 2019 году Заказчиком-генподрядчиком АО «Мосинжпроект» выпущен измененный локальный сметный расчет, на общую стоимость: 5 361 236 руб. 50 коп. (без НДС), в ценах ТСН-2001 2016г.

На момент выполнения работ цена по Договору составила: 5 829 065 руб. 26 коп. (без НДС), что подтверждено Ответчиком.

Принято работ Ответчиком на сумму 5 595 902 руб. 65 коп., в том числе НДС (с применением понижающего коэффициента 0,8%), что подтверждается подписанными сторонами Актами приемки выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

В рамках заключенного Договора Ответчик 12.08.2018г. перечислил аванс в размере: 2 000 000 руб. 00 коп. (платежное поручение №1434).

Удержание за выполнение Ответчиком функций генерального подрядчика по Договору составляет: 279 795 руб. 13 коп.

Истец также сослался на то,  что в Договоре субподряда от 03.07.2018г. не содержится условий о применении Подрядчиком понижающего коэффициента К=0,8. Дополнительное соглашение между сторонами на применение понижающего коэффициента К=0,8 не заключалось.

В связи с вышеизложенным Истцом в адрес Ответчика надлежащим образом направлен (исх. 477 от 12.08.2020г.) комплект откорректированных документов: акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) №507к и №507/1 от 01.12.2020г. , справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) №79к от 01.12.2020г. на сумму 1 329 026 руб. 88 коп.

В соответствии с п. 3.2. оплата выполненных работ по Договору осуществляется на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),при наличии исполнительной документации в течении 90 (Девяноста) дней со дня подписания вышеуказанных документов.

В соответствии с абз. 2 п. 3.2. Договора подписание актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от Субподрядчика.

Ответчик не оплатил принятые работы по Договору и не направил в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Истца/Субподрядчика корректировочных актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) письменный мотивированный отказ в подписании указанных актов и справок (абз. 3 п. 3.2. Договора).

Итого, согласно актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) сумма принятых, но не оплаченных работ по Договору составила: 3 316 107 руб. 52 коп., в том числе НДС.

Таким образом, сумма задолженности Ответчика/Подрядчика перед Истцом/Субподрядчиком по Договору субподряда №б/н от 03.07.2018г. по выполнению монтажных и пусконаладочных работ стационарных площадок и камеры мойки составов на объекте: «Строительство электродепо «Солнцево», согласно принятых работ и надлежаще направленным актам приемки выполненных работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) составляет: 4 645 134 руб. 40 коп.

Указанная сумма задолженности не учитывает увеличение стоимости выполненных ООО «ПСП «ЭНЕРГОМАШ» работ по результатам пересчетов на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы от 05.03.2020.

Монтаж и пусконаладочные работы комплекса оборудования для автоматической мойки составов на объекте Электродепо «Солнцево выполнялись на основании заключенного между ООО «ПСП «ЭНЕРГОМАШ» (Заказчик) и ООО «Ал-Тек» (Исполнитель) Договора субподряда №01 /11 /17 от 01.11.201 г.

По результатам выполненных работ на Объекте, ответственными представителями (комиссией) из числа: Истца, Ответчика, Заказчика-генподрядчика АО «Мосинжпроект», авторского надзора, Застройщика-технического заказчика Дирекция строящегося метрополитена и эксплуатирующей организации ГУП «Московский метрополитен», представителя ООО «Ал-Тек» подписаны комиссионные акты (акты пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования) и др. исполнительная документация, которая сдана в архив ГУП «Московский метрополитен», согласно реестра передачи документации от 14.10.2019г. о чем имеется соответствующая отметка.

По объекту: «Строительство электродепо «Солнцево», в том числе на основании выполненных вышеуказанных работ по комплексу оборудования для автоматической мойки составов, 29.08.2018г. в Мосгосстройнадзоре получено заключение №313-33-Р/ЗОС о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов. Основанием для выдачи заключения является Акт проверки №7456/18 от 28.08.2018г.

Начало строительства: 10.07. 2015г.

Окончание строительства: 23.08.2018г.

То есть, на объекте Электродепо «Солнцево» комплекс оборудования для автоматической мойки составов эксплуатируется более 3-х лет Заказчиком ГУП «Московский метрополитен».

05.03.2020г. получено Положительное заключение государственной экспертизы №77-1-1-2-006010-2020 по объекту «Строительство электродепо «Солнцево»Акт ЗОС и РВ по объекту Электродепо «Солнцево» получен Ответчиком в том числе на основании сданной Ответчиком исполнительной документации Заказчику - Генподрядчику АО «МОСИНЖПРОЕКТ», что подтверждается особым мнением Ответчика указанным в Актах контрольных обмеров, оформленных и подписанных (представителями) между вышеуказанными сторонами, а именно: Особое мнение АО «Мосотделстрой №1»

П.2 - в начале 2018 года с целью получения Заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, а также с целью получения от уполномоченных органов исполнительной власти разрешения на ввод объекта «Электродепо «Солнцево» (далее по тексту - Объект) в эксплуатацию, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Подрядчик АО «Мосотделстрой №1» предоставил Заказчику - Генподрядчику исполнительную документацию и другие документы, обязанность составления которых возложена на Подрядчика.

П.3 - в августе 2018 года АО «Мосинжпроект» получило заключение на соответствие построенного Объекта проектной документации и требованиям нормативных документов (ЗОС), утвержденное Распоряжением Мосгосстройнадзора от 29.08.2019г. №319-33-Р/ЗОС, которое в совокупности с другой документацией (доказательствами) рассматривается в качестве подтверждения факта выполнения работ, а также разрешения на ввод объекта в Эксплуатацию от 30.08.2018г. №77-198000-008522-2018, выданное Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, после чего Объект был передан эксплуатирующей организации ДСМГУП «Московский метрополитен».

П. 4 - с августа 2018 года по сегодняшний день объект эксплуатируется ДСМ ГУП «Московский метрополитен».

То есть, Подрядчик сам подтверждает факт выполненных работ Субподрядчиком по объекту и сданной Заказчику - генподрядчику АО «МОСИНЖПРОЕКТ» исполнительной документации, на основании которой Объект в 2018г. введен в эксплуатацию.

Также факт выполненных Истцом работ подтверждается письмом Ответчика (исх. 436/04-МОС-1 от 29.04.2021г.) в адрес Заказчика-генподрядчика АО «Мосинжпроект», которое свидетельствует о сдачи Ответчиком выполненных работ за весь период Заказчику-генподрядчика АО «Мосинжпроект» в рамках «верхних» Договоров №660-0913-ЗП-1/Н ОТ 14.10.2013Г. И №16-2489 ОТ 27.12.2016г., путем направления Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), в том числе пересчеты с учетом: коэффициента К=0,9971322, увеличения затрат на временные здания и сооружения дою5,61%, надбавки к ЗП 15% в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы №795-РП от 27.12.2019г.

Кроме того, вышеуказанный факт выполненных работ истцом в полном объеме подтверждает письмо исх. №2328-05/22 от 18.05.2022г ответчика в адрес Заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства ФИО9, (приобщено к материалам дела 27.06.2022г.), где ответчик указывает на факт выполненных им работ на объекте: Электродепо «Солнцево» в полном объеме, после чего получены заключения на соответствие объекта проектной документации и требованиям нормативных документов по объекту.

Ответчик также в письме указывает, что им направленно Актов в АО «МОСИНЖПРОЕКТ» на сумму 2,1 млрд. рублей за уже выполненный комплекс работ на объекте и просит о необходимости оказания содействия в прекращении судебных разбирательств с АО «МОСИНЖПРОЕКТ», подписанию соответствующих актов по форме №КС-2, №КС-3 и выполнению АО «МОСИНЖПРОЕКТ» обязательств по оплате всего комплекса выполненных работ, с целью последующего расчета с субподрядными организациями, кем и является Истец по настоящему делу, уплатой налогов и не допущения процедуры банкротства в отношении АО «Мосотделстрой №1»

В связи с вышеизложенным, сведения Ответчика об отсутствии исполнительной документации, которая не позволяет определить, действительно ли спорные работы выполнялись Субподрядчиком, установить фактический объем работ и осуществить их приемку не соответствуют действительности.

Суммарная задолженность Ответчика АО «Мосотделстрой №1» перед Истцом ООО «ПСП «ЭНЕРГОМАШ» по оплате за выполненные Субподрядчиком работы и процентам за пользование чужими денежными средствами по Договору субподряда №б/н от 03.07.2018г. составляет 4 877 391 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто один) рубль 12 копеек.

Вместе с тем сторонами  был согласован понижающий коэффициент ,  акты Субподрядчиком подписаны без замечаний,  в связи с чем суд считает подлежащим удовлетворения первоначальный иск  в размере  3 316 107 руб. 52  коп. задолженности, 165 805 руб. неустойки. 

При  этом встречный иск не подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно условиям заключенного между сторонами договора, срок выполнения ООО «ПСП «Энергомаш» работ составляет 30 календарных дней, срок истек 05 августа 2018 года, календарный план производства работ договором не предусмотрен, сдача-приемка работ АО «Мосотделстрой №1» только единовременно и в полном объеме.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями.

Обязательства признаются исполненными надлежащим образом, если точно соблюдены все условия и требования, предъявляемые к предмету исполнения, субъектам, месту, срокам и способу исполнения.

Исходя из существа регулируемых названных положений действующего законодательства отказ исполнителя от выполнения работ не допускается.

В соответствии с условиями заключенных договоров в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

В соответствии с пунктом 8.3. заключенного договора пени за нарушение срока выполнения работ начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня, истечения установленного Договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере 0,5% от цены Договора. Срок просрочки для расчета взят с учетом подписанных актов КС-2. Таким образом, сумма пени за период с 05 августа 2018 года по 24 августа 2020 года составила 39 079 995 (Тридцать девять миллионов семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 21 копейка. Расчет:

Количество дней просрочки - 751 день

Цена договора - 10 407 455,45 рублей.

Пени за каждый день - 0,5% от цены Договора

Пени = 10 407 455,45 * 0,5% * 751 = 39 079 995,21 рублей

Также из ходя из условий пункта 6.6. договора установлено, что окончательная приемка выполненных работ производится Подрядчиком и обязательства Субподрядчика считаются выполненными после подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки результата завершенных работ. Данный документ вопреки требованию Договора подписан не был.

Согласно пункту 3 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128) исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Отсутствие исполнительной документации не позволяет подтвердить надлежащее качество и объем выполненных работ, и, как следствие, оформить акты о приемке работ КС-2 и справки о стоимости работ КС-3.

Таким образом, в виду отсутствия оформленных и переданных в установленном порядке комплектов исполнительной документации у Подрядчика до настоящего времени отсутствует возможность определить, действительно ли спорные работы выполнялись Субподрядчиком, установить фактический объем работ и осуществить приемку у непосредственного производителя работ.

Следовательно, у ООО «ПСП «Энергомаш»,  по мнению Подрядчика, имеется просрочка по выполнению работ в период 25.08.2020. по 09.09.2022. 745 дня, которая составляет 38 767 771 (тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 55 копейки.

Кроме того, согласного пункта 8.7. Подрядчик вправе удерживать суммы штрафов, неустойки, а также убытков, подлежащих уплате или возмещению Субподрядчиком, в счет погашения обязательств Подрядчика по оплате выполненных Субподрядчиком работ.

В соответствии с пунктом 8.3. заключенного договора пени за нарушение срока выполнения работ начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня, истечения установленного Договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере 0,5% от цены Договора.

Общая сумма Договора 10 407 566, 45 рублей.

Срок просрочки для расчета взят с учетом подписанных актов по форме № КС-2. Согласно материалам дела крайний акт по форме № КС-2 подписанный сторонами датирован 30.06.2020 (период работ с 01.06.2020 по 30.06.2020).

Также из ходя из условий пункта 6.6. договора установлено, что окончательная приемка выполненных работ производится Подрядчиком и обязательства Субподрядчика считаются выполненными после подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки результата завершенных работ. Данный документ вопреки требованию Договора подписан не был.

Размер процентов на 17.11.2022 произведен с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», учитывая положения Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом общая сумма пеней по встречному исковому заявлению составляет 81 595 320,97 руб. 

Вместе с тем, в соответствии с п.3.1. цена Договора общая стоимость работ определяется на основании предварительного локального сметного расчета и составляет: 10 407 566 руб. 45 коп., включая НДС 18% - 1 587 594 руб. 88 коп. (Приложение №1 к Договору.)

В соответствии с п.4.1. Договор, срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней.

В 2019 году Заказчиком-генподрядчиком АО «Мосинжпроект» выпущен измененный локальный сметный расчет, на общую стоимость: 5 361 236 руб. 50 коп. (без НДС), в ценах ТСН-2001 2016г.

На момент выполнения работ цена по Договору составила: 5 829 065 руб. 26 коп. (без НДС), что подтверждено Ответчиком.

Все работы по Договору выполнены Истцом в полном объеме согласно проектно- -сметной документации, выданной Ответчиком со штампом «В производство работ».

Принято работ Ответчиком на сумму 5 595 902 руб. 65 коп., в том числе НДС (с применением понижающего коэффициента 0,8%), что подтверждается подписанными сторонами Актами приемки выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), приобщенными к материалам дела.

Корректировочные акты приемки выполненных работ (форма № КС-2) №507к и №507/1 от 01.12.2020г., справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) №79к от 01.12.2020г. на сумму 1 329 026 руб. 88 коп., не имеют отношения к срокам выполнения договорных обязательств, а лишь направлены на требование о возврате ранее удержанных средств по выполненным и принятым работам (изменение понижающего коэффициента с К=0,8 на К=1).

Акты сформированы и направлены надлежащим образом (исх. 477 от 12.08.2020г.) в адрес Ответчика, получено 25.08.2020г., что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 11962039020564.

Счет фактура №6.30.008 от 30.06.2020г. свидетельствует о проведенной реализации Истцом по выполненным и принятым Ответчиком работам.

Монтаж и пусконаладочные работы комплекса оборудования для автоматической мойки составов на объекте Электродепо «Солнцево выполнялись на основании заключенного между ООО «ПСП «ЭНЕРГОМАШ» (Заказчик) и ООО «Ал-Тек» (Исполнитель) Договора субподряда №01 /11 /17 от 01.11.201 г.

По результатам выполненных работ на Объекте, ответственными представителями (комиссией) из числа: Истца, Ответчика, Заказчика-генподрядчика АО «Мосинжпроект», авторского надзора, Застройщика-технического заказчика Дирекция строящегося метрополитена и эксплуатирующей организации ГУП «Московский метрополитен», представителя ООО «Ал-Тек» подписаны комиссионные акты (акты пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования) и др. исполнительная документация, которая сдана в архив ГУП «Московский метрополитен», согласно реестра передачи документации от 14.10.2019г. о чем имеется соответствующая отметка.

По объекту: «Строительство электродепо «Солнцево», в том числе на основании выполненных вышеуказанных работ по комплексу оборудования для автоматической мойки составов, 29.08.2018г. в Мосгосстройнадзоре получено закчючение №313-33-Р/ЗОС о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов. Основанием для выдачи заключения является Акт проверки №7456/18 от 28.08.2018г.

Начало строительства: 10.07. 2015г.

Окончание строительства: 23.08.2018г.

То есть, на объекте Электродепо «Солнцево» комплекс оборудования для автоматической мойки составов эксплуатируется более 4-х лет Заказчиком ГУП «Московский метропол итен ».

Акт ЗОС и РВ по объекту Электродепо «Солнцево» получен Ответчиком в том числе на основании сданной Ответчиком исполнительной документации Заказчику - Генподрядчику АО «МОСИНЖПРОЕКТ», что подтверждается особым мнением Ответчика указанным в Акте контрольного обмера, оформленных и подписанных (представителями) между вышеуказанными сторонами, приобщенного к материалам дела, а именно:

Особое мнение АО «Мосотделстрой №1»

П.2 - в начале 2018 года с целью получения Заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям нормативных документов, а также с целью получения от уполномоченных органов исполнительной власти разрешения на ввод объекта «Электродепо «Солнцево» (далее по тексту Объект) в эксплуатацию, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Подрядчик АО «Мосотделстрой №1» предоставил Заказчику - Генподрядчику исполнительную документацию и другие документы, обязанность составления которых возложена на Подрядчика.

П.З - в августе 2018 года АО «Мосинжпроект» получило закчючение на соответствие построенного Объекта проектной документации и требованиям нормативных документов (ЗОС), утвержденное Распоряжением Мосгосстройнадзора от 29.08.2019г. №319-33-Р/ЗОС, которое в совокупности с другой документацией (доказательствами) рассматривается в качестве подтверждения факта выполнения работ, а также разрешения на ввод объекта в Эксплуатацию от 30.08.2018г. №77-198000-008522-2018, выданное Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, после чего Объект был передан эксплуатирующей организации ДСМГУП «Московский метрополитен».

П. 4 - с августа 2018 года по сегодняшний день объект эксплуатируется ДСМ ГУП «Московский метрополитен».

То есть, Подрядчик сам подтверждает факт выполненных работ Субподрядчиком по объекту и сданной Заказчику - генподрядчику АО «МОСИНЖПРОЕКТ» исполнительной документации, на основании которой Объект в 2018г. введен в эксплуатацию.

Также факт выполненных Истцом работ подтверждается письмом Ответчика (исх. 436/04-МОС-1 от 29.04.2021г.) в адрес Заказчика-генподрядчика АО «Мосинжпроект», которое свидетельствует о сдачи Ответчиком выполненных работ за весь период Заказчику-генподрядчика АО «Мосинжпроект» в рамках «верхних» Договоров №660-0913-ЗП-1/Н ОТ 14.10.2013Г. И №16-2489 ОТ 27.12.2016г., путем направления Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), в том числе пересчеты с учетом: коэффициента К=0,9971322, увеличения затрат на временные здания и сооружения дою5,61%, надбавки к ЗП 15% в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы №795-РП от 27.12.2019г.

Кроме того, вышеуказанный факт выполненных работ истцом в полном объеме подтверждает письмо исх. №2328-05/22 от 18.05.2022г ответчика в адрес Заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства ФИО9, (приобщено к материалам дела 27.06.2022г.), где ответчик указывает на факт выполненных им работ на объекте: Электродепо «Солнцево» в полном объеме, после чего получены заключения на соответствие объекта проектной документации и требованиям нормативных документов по объекту.

Ответчик также в письме указывает, что им направленно Актов в АО «МОСИНЖПРОЕКТ» на сумму 2,1 млрд. рублей за уже выполненный комплекс работ на объекте и просит о необходимости оказания содействия в прекращении судебных разбирательств с АО «МОСИНЖПРОЕКТ», подписанию соответствующих актов по форме №КС-2, №КС-3 и выполнению АО «МОСИНЖПРОЕКТ» обязательств по оплате всего комплекса выполненных работ, с целью последующего расчета с субподрядными организациями, кем и является Истец по настоящему делу, уплатой налогов и не допущения процедуры банкротства в отношении АО «Мосотделстрой №1»

Таким образом встречные требования Ответчика касательно неисполнения (просрочки) договорных обязательств Истцом, взыскания пени за просрочку выполнения работ по договору и отсутствии исполнительной документации не соответствуют действительности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. В удовлетворении  встречного иска отказать.

Взыскать с  акционерного общества "МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОМАШ" (ОГРН: 

<

***>) 3 316 107 руб. 52  коп. задолженности, 165 805 руб. неустойки, 33 829 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОМАШ" (ОГРН: 

<

***>) федеральный бюджет госпошлину в размере 19  руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1