Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-161107/2018

18 апреля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  18 апреля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТРОЙ" (адрес:  Россия 614000, г ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ край, ул ЛУНАЧАРСКОГО 23/ОФИС 36, ОГРН:  1085907001883);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ" (адрес:  Россия 196626, п ШУШАРЫ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ш МОСКОВСКОЕ 179/2 ЛИТ. А/1-Н НОМ. ЧАСТИ 224, ОГРН:  1127847421525);

о взыскании 5 384 203руб. 71коп.

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (дов. от 01.01.2019г.)

- от ответчика: представитель ФИО3 (дов. от 10.01.2019г.)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ» (далее – ответчик) о взыскании 4 059 890 руб., 49 коп. задолженности по договорам субподряда №413/2016 от 14.03.2016г., №421/2016 от 14.03.2016г., №СМР/1323/2016 от 01.06.2016г., №СМР/1326/2016 от 01.06.2016г., №СМР/1327/2016 от 01.06.2016г., по счет-договору от 22.03.2017г., а также 1 324 313 руб. 22 коп. пени за нарушение сроков оплаты по договорам субподряда.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на его необоснованность.

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ» (Заказчик) были заключены договоры субподряда на выполнение работ по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации на объекте «Распределительный центр в составе Многофункционального производственно-логистического комплекса «А Плюс Парк Пермь» по адресу Пермский край, Краснокамский муниципальный район, ФИО4, вблизи реки Суздалька, в том числе:

1. Договор субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года. 

Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору), Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: разработка рабочей документации шифр: 01/01/16-НВК, устройство системы наружных внутриплощадочных сетей дренажа с установкой оборудования, обвязкой и испытанием смонтированных систем, пусконаладочные работы. 

Сроки выполнения работ указаны в п.3.2 Договора: начало – 17.03.2016 г., окончание – 25.04.2016 г.

Стоимость работ по договору определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к договору) – 15 097 378 руб., 90 коп.

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к договору субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года:

- авансовый платеж в сумме 3 580 000 руб. - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора. Зачет аванса производится в полном объеме при подписании первых актов выполненных работ;

- промежуточные платежи, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (5%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов КС-2, справки КС-3;

- окончательный платеж, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (5%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 30 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3.

20 апреля 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ» (Заказчик) к договору субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому сроки выполнения работ: начало – 17.03.2016 г., окончание – 20.09.2016 г. Кроме того, дополнительным соглашением определена общая стоимость работ - 13 656 573 руб.,56 коп.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №1 от 29.04.2016 г. на сумму 4 153 659 руб. 20 коп., №2 от 26.05.2016 г. на сумму 1 280 339 руб. 88 коп., №3 от 20.06.2016 г. на сумму 1 552 884 руб. 56 коп., №4 от 18.08.2016 г. на сумму 1 734 416 руб. 64 коп., №5 от 17.10.2016 г. на сумму 195 000 руб. 00 коп., №6 от 30.11.2016 г. на сумму 176 761 руб. 04 коп., №7 от 28.02.2017 г. на сумму 4 540 512 руб. 24 коп., №8 от 19.04.2017 г.  на сумму 23 000 руб. 00 коп. 

Ответчиком произведена оплата по договору на общую сумму 12 120 238 руб. 64 коп. по платежным поручениям: №478 от 24.03.2016 г. на сумму 3 580 000 руб. 00 коп., №897 от 23.05.2016 г. на сумму 365 976 руб. 24 коп., №1685 от 19.08.2016 г. на сумму 1 216 322 руб. 89 коп., №1710 от 22.08.2016 г. на сумму 1 475 240 руб. 33 коп., №2138 от 22.09.2016 г. на сумму 890 000 руб. 00 коп., №2346 от 07.10.2016 г. на сумму 844 416 руб. 64 коп., №2600 от 31.10.2016 г. на сумму 130 231 руб.,76 коп., №372 от 03.02.2017 г. на сумму 118 050 руб. 78 коп., №1134 от 24.03.2017 г. на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №1541 от 13.04.2017 г. на сумму 1 500 000 руб. 00 коп., №1790 от 27.04.2017 г. на сумму 500 000 руб. 00 коп.

Задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года составляет 1 536 334 руб. 92 коп. (13 656 573,56 -12 120 238,64). 

2. Договор субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года.

Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору), Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: монтаж и испытание наружных внутриплощадочных сетей ливневой канализации с установкой оборудования и обвязкой. 

Сроки выполнения работ указаны в п.3.2 Договора: начало – 17.03.2016 г., окончание – 25.05.2016 г.

Стоимость работ по договору определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к договору) – 11 943 164 руб., 49 коп.

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года:

- авансовый платеж в сумме 3 580 000 руб. - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора Зачет аванса производится в полном объеме при подписании первых актов выполненных работ;

- промежуточные платежи, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (5%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов КС-2, справки КС-3;

- окончательный платеж, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (5%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 30 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3.

20 апреля 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ» (Заказчик) к договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому сроки выполнения работ: начало – 17.03.2016 г., окончание – 20.09.2016 г. Кроме того, дополнительным соглашением определена общая стоимость работ – 10 549 856 руб., 19 коп.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №1 от 25.08.2016 г. на сумму 4 949 459 руб., 33 коп., №2 от 17.10.2016 г. на сумму 3 512 085 руб., 34 коп., №3 от 30.11.2016 г. на сумму 1 143 046 руб., 79 коп., №4 от 28.02.2017 г. на сумму 945 264 руб., 73 коп.

Ответчиком произведена оплата по договору на общую сумму 12 120 238 руб. 64 коп. по платежным поручениям: №1167 от 24.06.2016 г. на сумму 3 580 000 руб., 00 коп., №2021 от 15.09.2016 г. на сумму 4 000 000 руб., 00 коп., №2556 от 27.10.2016 г. на сумму 843 988 руб., 50 коп., №197 от 31.01.2017 г. на сумму 675 150 руб., 74 коп., №2405 от 14.06.2017 г. на сумму 450 000 руб., 00 коп., №4321 от 16.10.2017 г. на сумму 1 000 000 руб., 00 коп.

05 марта 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Спецстрой» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ» (Заказчик) к договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года заключено дополнительное соглашение №2 на выполнение дополнительных работ по монтажу наружных внутриплощадочных сетей ливневой канализации, согласно которому сроки выполнения работ: начало – 05.03.2017 г., окончание – 25.05.2017 г. Стоимость дополнительных работ определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к д.с.№2) – 771 934 руб., 93 коп. 

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к дополнительному соглашению №2 от 05.03.2017 года к договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года:

- окончательный платеж, за вычетом гарантийного удержания (7%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 7 рабочих дней со дня истечения 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по дополнительному соглашению №2 от 05.03.2017 года к договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №5 от 24.07.2017 г. на сумму 771 934 руб., 93 коп.

Оплата выполненных работ Ответчиком не производилась.

Задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года составляет 772 651 руб., 88 коп. (10 549 856,19 + 771 934,93 - 10 549 139,24)

3. Договор субподряда №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года

Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору), Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: монтаж наружных внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации К1, с установкой КНС с обвязкой, установка жироуловителей, установка счетчиков на трубы сетей К1 и ПНР. 

Сроки выполнения работ указаны в п.3.2 Договора: начало – 01.06.2016 г., окончание – 20.09.2016 г.

Стоимость работ по договору определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к договору) – 5 915 942 руб., 74 коп.

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к договору субподряда №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года:

- авансовый платеж в сумме 1 774 000 руб. – до 20.08.2016 года. Зачет аванса производится в полном объеме при подписании первых актов выполненных работ;

- промежуточные платежи, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов КС-2, справки КС-3;

- окончательный платеж, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 15 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 7 рабочих дней со дня истечения 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №1 от 25.08.2016 г. на сумму 2 060 762 руб., 31 коп., №2 от 17.10.2016 г. на сумму 1 743 266 руб.,10 коп., №3 от 30.11.2016 г. на сумму 480 145 руб., 25 коп., №4 от 28.02.2017 г. на сумму 1 513 782 руб., 51 коп., №5 от 19.04.2017 г. на сумму 117 986 руб., 57 коп.

Ответчиком произведена оплата по договору на общую сумму 4 973 596,27 руб. по платежным поручениям: №1722 от 23.08.2016 г. на сумму 1 774 000 руб., 00 коп., №2554 от 27.10.2016 г. на сумму 1 298 552 руб., 94 коп., №2601 от 31.10.2016 г. на сумму 1 098 488 руб., 33 коп., №371 от 03.02.2017 г. на сумму 302 555 руб., 00 коп., №412 от 07.02.2017 г. на сумму 500 000 руб., 00 коп.

Задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года составляет 942 346 руб., 47 коп. (5 915 942,74 - 4 973 596,27).

4. Договор субподряда №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года

Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору), Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: монтажные и пусконаладочные работы наружных внутриплощадочных сетей противопожарного водопровода В2, В2.1. 

Сроки выполнения работ указаны в п.3.2 Договора: начало – 01.06.2016 г., окончание – 20.10.2016 г.

Стоимость работ по договору определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к договору) – 9 464 568 руб., 63 коп.

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к договору субподряда №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года:

- авансовый платеж в сумме 2 839 370,59 руб. – до 20.08.2016 года. Зачет аванса производится пропорционально объему выполненных работ при каждом закрытии КС-2;

- промежуточные платежи, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов КС-2, справки КС-3;

- окончательный платеж, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 15 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 10 рабочих дней со дня истечения 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №1 от 17.10.2016 г. на сумму 3 949 736 руб., 09 коп., №2 от 30.11.2016 г. на сумму 5 443 699 руб., 09 коп., №3 от 19.04.2017 г. на сумму 71 133 руб., 45 коп.

Ответчиком произведена оплата по договору на общую сумму 8 757 234 руб., 75 коп. по платежным поручениям: №1940 от 08.09.2016 г. на сумму 2 839 370 руб., 59 коп., №2531 от 25.10.2016 г. на сумму 2 488 333 руб.,73 коп., №3397 от 26.12.2016 г. на сумму 3 429 530 руб., 43 коп.

Задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года составляет 707 333 руб., 88 коп. (9 464 568,63 - 8 757 234,75). 

5. Договор субподряда №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года

Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору), Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: монтажные и пусконаладочные работы наружной внутриплощадочной сети хозяйственно-питьевого водопровода В1. 

Сроки выполнения работ указаны в п.3.2 Договора: начало – 01.06.2016 г., окончание – 10.10.2016 г.

Стоимость работ по договору определена Расчетом стоимости работ и затрат (Приложение №2 к договору) – 1 004 505 руб.,73 коп.

Порядок оплаты согласован в Приложении №3 к договору субподряда №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года:

- авансовый платеж в сумме 301 351,00 руб. – до 20.08.2016 года. Зачет аванса производится пропорционально объему выполненных работ при каждом закрытии КС-2;

- промежуточные платежи, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов КС-2, справки КС-3;

- окончательный платеж, за вычетом авансового платежа и гарантийного удержания (7%) - в течение 15 рабочих дней со дня подписания закрывающих актов КС-2, справки КС-3;

- гарантийное удержание - в течение 10 рабочих дней со дня истечения 90 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается актами о приемке выполненных работ: №1 от 30.11.2016 г. на сумму 988 778 руб., 87 коп., №2 от 19.04.2017 г. на сумму 15 726 руб., 86 коп.

Ответчиком произведена оплата по договору на общую сумму 924 282,39 руб. по платежным поручениям: №1721 от 23.08.2016 г. на сумму 301 351 руб., 00 коп., №281 от 02.02.2017 г. на сумму 622 931 руб., 39 коп.

Задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года составляет 80 223 руб., 34 коп. (1 004 505,73 - 924 282,39)  

6. Счет-договор № б/н от 22.03.2017 года

Согласно п.п.1,9 счет-договора Заказчик поручил, а Исполнитель принял на себя обязательство по выполнению следующих работ: монтаж скорлуп ППУ и отводов. Стоимость работ составляет 70 000 руб., 00 коп.

Сроки выполнения работ указаны в п.2 счет-договора: 30 дней с даты подписания Счет-договора.

В соответствии с п.3 счет-договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю выполненные работы в следующем порядке:

- предоплата 70% от цены договора - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора;

- окончательная оплата - в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ.

Истец ссылается на то, что выполнил свои обязательства по счет-договору в полном объеме, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (оказания услуг) №11 от 19.04.2017 г. на сумму 70 000 руб., 00 коп.

Ответчиком произведена оплата по счет-договору на сумму 49 000 руб., 00 коп. по платежному поручению №1233 от 29.03.2017 г.

Задолженность Ответчика перед Истцом по счет-договору № б/н от 22.03.2017 года составляет 21 000 руб., 00 коп. (70 000 – 49 000). 

16.03.2018 года Истец направил Ответчику претензию №19 от 15.03.2018 г.  с требованием с требованием об оплате задолженности за выполненные работы по договорам субподряда в размере 4 059 890 руб., 49 коп.

Ссылаясь на ненадлежащее выполнение Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ, Истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Правоотношения Истца и Ответчика по спорному требованию регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о договоре строительного подряда, о договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В материалы дела Истцом представлены: акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, выписки банка, платежные поручения.

Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 подписаны представителями сторон без замечаний к объёму и качеству выполненных работ. В актах и справках имеются ссылки на договоры субподряда.

Ответчик на фальсификацию указанных документов в порядке статьи 161 АПК РФ не ссылается.

Ответчик не ссылается на отсутствие результата выполненных Истцом работ, либо на выполнение спорных работ иным лицом.

Таким образом, факт выполнения Истцом работ, предусмотренных договорами субподряда, подтверждается материалами дела.

На основании изложенного, требование Истца о взыскании с Ответчика задолженности в размере 4 059 890 руб., 49 коп.  (в том числе по Договору субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года - 1 536 334 руб., 92 коп.; по Договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года - 772 651 руб., 88 коп.; по Договору субподряда №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года - 942 346 руб., 47 коп.; по Договору субподряда №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года - 707 333 руб., 88 коп.; по Договору субподряда №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года - 80 223 руб., 34 коп.; по счет-договору № б/н от 22.03.2017 года - 21 000 руб., 00 коп.) является обоснованным, подлежит удовлетворению.

Истец также просит взыскать с Ответчика неустойку (пени) за несвоевременную оплату выполненных работ по договорам субподряда в размере 1 324 313 руб., 22 коп.

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 ГК РФ).

Пунктом 11.1 договоров субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года, №421/2016 от 14.03.2016 года, №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года, №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года, №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года предусмотрено: «За нарушение по вине Заказчика сроков оплаты выполненных Работ более чем на 10 рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатить пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый полный день просрочки, но не более 10% от такой суммы»

Пунктом 6.2 счет-договора № б/н от 22.03.2017 года предусмотрено: «В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый полный день просрочки, но не более 10 (десяти)% от такой суммы».

По расчету Истца, размер неустойки (пени) за нарушение Ответчиком сроков оплаты выполненных работ по договорам субподряда составляет 1 324 313 руб., 22 коп.

Расчет неустойки (пени) закону, соглашению сторон не противоречит, Ответчиком не оспорен (статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Ходатайство о снижении неустойки на основании ст.333 ГК РФ Ответчик не заявил, доказательств, подтверждающих её несоразмерность, не представил.

На основании изложенного, с Ответчика в пользу Истца взыскивается неустойка в размере 1 324 313 руб., 22 коп (в том числе по Договору субподряда №413/2016 от 14.03.2016 года - 714 266 руб., 83 коп.; по Договору субподряда №421/2016 от 14.03.2016 года - 256 740 руб., 68 коп.; по Договору субподряда №СМР/1323/2016 от 01.06.2016 года - 200 149 руб., 06 коп.; по Договору субподряда №СМР/1326/2016 от 01.06.2016 года - 111 887 руб., 75 коп.; по Договору субподряда №СМР/1327/2016 от 01.06.2016 года - 39 168 руб., 90 коп.; по счет-договору № б/н от 22.03.2017 года - 2 100 руб., 00 коп.).

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины в размере 49 921 руб., 00 коп взыскиваются с Ответчика в пользу Истца.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО «А Плюс Инжиниринг» в пользу ООО «УК «Спецстрой» 4 059 890руб. 49коп. задолженности, 1 324 313руб. 22коп. пени и 49 921руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.