Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-49328/2023

22 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  19 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  22 сентября 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 31" 

ответчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2 доверенность от 20.01.2023

- от ответчика: ФИО3 доверенность от 07.04.2023

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 31" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" (далее – ответчик) о взыскании 2 026 352 руб. 40 коп. задолженности.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, открыл судебное заседание в первой инстанции.

Суд установил следующее.

Истец указывает, что по договору № 352/10, заключенному 26 октября 2022 года с  Санкт – Петербургским государственным унитарным предприятием «Ленинградский зоологический парк»  (далее по тексту – «Заказчик»),  общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление – 31» (далее по тексту –  «Подрядчик», «СМУ-31»)  выполняло  работы  по ремонту каркаса  здания  «Буромедвежатника» (часть 2), расположенном   по адресу: Санкт – Петербург, Александровский парк, дом 1, литера Д.  

Стоимость работ – 2 395 774 рубля 80 копеек (пункт 3.1 договора).

Подрядчик выполнил работы в полном объеме и  22 ноября 2022 года передал Заказчику оригиналы документов, в том числе и акты выполненных работ, составленные по форме КС-2,  КС-3 (письмо № 277/11/1-22).

13 марта 2023 года стороны заключили дополнительное соглашение № 1,  которым с учетом фактически выполненных работ согласовали  их  окончательную стоимость  в 2 026 352 рубля 40 копеек.

На основании  пункта  5 договора Заказчик обязан принять  работы и подписать акты.

Это обязательство не исполнено:  акты выполненных работ  (КС-2, КС-3) не подписаны, а работы не оплачены.

СПБ ГУП «Ленинградский зоологический парк» было реорганизовано, в соответствии с п.1 ст.129 ГК РФ правопреемником является СПБ ГБУК «Ленинградский зоологический парк».

28» декабря 2022 года  и «11» апреля 2023 года ответчику направлены претензии, содержащие требование исполнить обязательство по оплате  выполненных работ. Требование не исполнено. Указанное послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик возражений против исковых требований не представил.

Иск подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 31" (ИНН: 

<

***>) 2 026 352 руб. 40 коп. задолженности, а также 33 132 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.