АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-35139/2017 «18» декабря 2017 года 

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины  Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грибовой  В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 400078, 

<

...>/1) к Федеральному  бюджетному учреждению «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных  путей» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400082, 

<

...>),  Федеральному агентству морского и речного транспорта (125993, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об изменении договора,  

 при участии в судебном заседании: 

 от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.09.2017 № 01/09.17,  ФИО2, представитель по доверенности от 12.12.2017 № 01/12.17,  

 от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 20.12.2016 № ЮО-14- 03/108,  

 руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

 Изменить Государственный контракт № 0329100005913000773-к от 10.02.2014 на  выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта  реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй этап). Пусковой  комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III техническое  перевооружение насосной станции № 32 (агрегаты №№ 1,2), единая автоматизированная  

информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации)» в части  продления сроков выполнения работ до 20 июня 2019 года, а именно:  

- календарный план на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация  комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2  (второй этап). Пусковой комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III  техническое перевооружение насосной станции № 32 (агрегаты №№ 1,2), единая  автоматизированная информационно-управляющая система (единая система  диспетчеризации)» (Приложение № 3 к Контракту) изложить в следующей редакции:  

 № п/п 

Перечень выполняемых работ  

Сроки (периоды выполнения работ)  

Примечание 

Начало выполнения работ 

Окончание выполнения 

работ 

1.1 Реконструкция Гидроузла № 7 

1.1.1 

Разработка рабочей  документации  

10.02.2014  

07.02.2017  

1.1.2 

Выполнение строительно- монтажных работ  

01.08.2014  

20.06.2019  

1.2 Реконструкция Насосной станции № 32 

1.2.1 

Разработка рабочей  документации  

10.02.2014  

07.02.2017  

1.2.2 

Выполнение строительно- монтажных работ  

01.09.2014  

20.06.2019  

1.3 Единая система диспетчеризации 

1.3.1 

Разработка рабочей  документации  

01.01.2015  

01.06.2015  

1.3.2 

Выполнение строительно- монтажных работ  

02.06.2015  

31.11.2015  

Срок окончания работ по Контракту на выполнение работ по Объекту: 20.06.2019  

 Взыскать с Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского  бассейна внутренних водных путей» (400082, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ВолгоПромСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400078, 

<

...>/1) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000  

руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 25.12.2017. 

  Судья Е.Б. Смагоринская