ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-96494/18-15-673

03 декабря 2018 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена  22 ноября 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 03 декабря 2018 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 119019, 

<

...>, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ", 123104, 

<

...>, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки и приложенные к исковому заявлению документы, 

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по дов. №212/1/400 от 09.08.2018 

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" неустойки в размере 4 270 000 руб.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения спора в судебное заседание не явился; отзыва, а также других доказательств в материалы дела не представил.

Суд, с учетом мнения истца считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (заказчик) и ФГУП «ЦНИИЭИСУ»» (исполнитель) заключен государственный контракт от 14.10.2010 г. №07001082 на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка комплексов программных средств инфраструктурных систем АСУ ВС РФ» (шифр «Шестеренка»).

Согласно уточненной ведомости исполнения (приложение №1 к Дополнительному соглашению от 28.01.2011 г. №1 к государственному контракту) Исполнитель должен завершить выполнение работ:

по этапу №5 ОКР, стоимостью 30000 000 руб., в срок до 30.04.2013г.;

по этапу №6 ОКР, стоимостью 10000 000 руб., в срок до 30.06.2013г.;

по этапу №7 ОКР, стоимостью 70 000 000 руб., в срок до 25.10.2013г.

Исполнителем работы не выполнены и Заказчику не сданы, просрочка исполнения обязательства составляет:

по этапу №5 ОКР по состоянию на 12.07.2013 г. - 73 дня;

по этапу №6 ОКР по состоянию на 12.07.2013 г. - 12 дней;

по этапу №7 ОКР по состоянию на 22.11.2013 г. - 28 дней.

В соответствии с п. 1 ст. 777 ГК РФ Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401}.

В соответствии с п. 8.2 государственного контракта в случае нарушения Исполнителем срока выполнения этапа ОКР, он уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости этапа ОКР, за каждый факт нарушения срока выполнения и неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства по государственному контракту. Размер неустойки устанавливается 0,1% от стоимости этапов ОКР.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Расчет неустойки складывается из следующих показателей: стоимость невыполненного этапа ОКР х 0,1% х количество просроченных дней, что составляет:

по этапу №5 ОКР: 30 ООО ООО руб. х 0,1% х 73 = 2 190 000 руб. (период с 01.05.2013 г. по 12.07.2013 г.);

по этапу №6 ОКР: 10 000 000 руб. х 0,1% х 12 = 120 000 руб. (период с 01.07.2013 г. по 12.07.2013 г.);

по этапу №7 ОКР: 70 000 000 руб. х 0,1% х 28 = 1 960 000 руб. (период с 26.10.2013 г. по 22.11.2013 г.)

Сумма неустойки:117 600,00 руб.+95 200,00 руб.+107 800,00 руб.+115 733,33 руб.+84 000,00 руб.+30 933,33 руб.= 4 270 000 рублей. 

Минобороны России в адрес Ответчика направило претензии от 26.06.2013 г. №212/6/2086, от 22.07.2013 г. №212/6/2020, от 29.11.2013 г. №212/6/3582 с требованием уплаты штрафных санкций по государственному контракту за нарушение сроков исполнения обязательств, однако ответчик претензии не удовлетворил.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен, как и доказательств необоснованного начисления неустойки.

Факт нарушения ответчиком обязательств по контракту подтверждается материалами дела. 

Ответчиком не представлены обстоятельства, доказывающие отсутствие его вины в нарушении исполнения обязательства. 

Таким образом, Ответчик, несет ответственность перед Истцом за невыполнение предписаний государственного заказчика по контракту. 

Гражданское законодательство исходит из того, что основанием наступления договорной ответственности служит нарушение договора, то есть соглашения самих сторон. 

Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, при этом, ответчик не представил достаточных и допустимых доказательств явной несоразмерности неустойки. 

Оснований для снижения неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ судом не усматривается. 

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму пени, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства в установленный договором срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 4 Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ сумму договорной неустойки в размере 4 270 000 руб. 

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" в доход Федерального бюджета РФ 44 350 руб. государственной пошлины. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

             СУДЬЯ:                                                                             М.А. Ведерников